전라남도 공고 제2023 - 399호

도시가스 공급시설 공사계획 공고

「도시가스사업법」제18조의3 및 같은 법 시행규칙 제30조에 따라 전라남도 지역별 도시가스 공급시설의 2개년(2023~2024년) 공사계획을 다음과 같이 공고합니다.

2023.  3.  30.

전라남도지사

1. 공사 시행기간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(2년간)

2. 시행자 및 공사대상지역

가. 목포도시가스㈜ : 목포시, 무안군, 영암군, 강진군

나. 대화도시가스㈜ : 여수시

다. 전남도시가스㈜ : 순천시, 광양시, 곡성군, 보성군, 구례군, 고흥군

라. ㈜해양에너지 : 나주시, 화순군, 장성군, 영광군, 해남군, 담양군, 함평군, 장흥군

도시가스 공급시설 공사계획(2023~2024년)

1. 도시가스사별 공급시설 공사계획 (총괄)

(단위 : m, 천원, 개소)

공급사	공 급 시 설	2022년 12월말까지		2023년 계획			2024년 계획
		수 량	수요가수	수 량	투자금액	수요가수	수 량	투자금액	수요가수
합 계	계		534,877		41,562,652	15,958		36,415,459	19,147
	배 관	2,422,687	534,877	95,168	40,736,782	15,958	76,186	35,220,490	19,147
	정압기	309		15	825,870		14	1,194,969
목포도시 가스(주)	소계		152,127		9,499,728	2,704		8,097,729	2,737
	배 관	583,847	152,127	20,531	9,367,073	2,704	20,429	8,097,729	2,737
	정압기	80		2	132,655		-	-
대화도시 가스(주)	소계		115,905		5,497,308	5,715		4,925,000	1,922
	배 관	467,268	115,905	24,422	5,293,308	5,715	17,690	4,865,000	1,922
	정압기	61		6	204,000		1	60,000
전남도시 가스(주)	소계		169,190		10,832,372	5,621		10,844,375	7,987
	배 관	570,243	169,190	15,546	10,643,157	5,621	16,337	10,094,375	7,987
	정압기	89		2	189,215		6	750,000
㈜해양 에너지	소계		97,655		15,733,244	1,918		12,548,355	6,501
	배 관	801,329	97,655	34,669	15,433,244	1,918	21,730	12,163,386	6,501
	정압기	79		5	300,000		7	384,969

2. 지역별 배관 설치계획

1) 목포도시가스(주)

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 64개소		20,531	-	-	2,704	9,367,073
목포시 소계 17개소		1,769	목포시	-	43	727,430
1	광명샤인빌2차~열매교회	49.0	옥암동	6월	2	19,264
2	우미파크빌5차~평화광장	100.0	상동	8월	3	44,929
3	우미파크빌5차~황혜원	50.0	상동	3월	1	16,341
4	블루오션호텔 인입	40.0	동명동	7월	1	19,247
5	목포국제축구센타~목포종합경기장	180.0	대양동	3월	1	89,856
6	유성푸드~장애인체육관	312.0	대양동	3월	1	92,640
7	빌리앙뜨~클락홈즈	80.0	석현동	7월	1	29,657
8	부영3차~궁떡	286.0	옥암동	2월	8	125,250
9	연탄불고기~김선화	52.0	옥암동	2월	4	19,561
10	동광프라자~이정상사	70.0	상동	2월	3	32,088
11	정철균~용당유통프라자	20.0	용당2동	2월	3	10,687
12	하당현대~현대식육점	170.0	상동	3월	6	74,891
13	우리목포교회~윤호준	118.0	상동	3월	1	52,634
14	리치빌~오연택	30.0	산정동	2월	1	20,835
15	롯데마트~온도25도씨 호텔	83.0	목포시	7월	1	37,653
16	해군3함대간부숙소 인입	19.0	옥암동	7월	1	8,497
17	신안인스빌후문~이정자	110.0	이로동	7월	5	33,400
영암군 소계 22개소		5,589	영암군	-	467	2,567,024
1	식품농공단지 연결	30.0	영암읍	2월	6	27,508
2	청호개발~한일시멘트	380.0	삼호읍	10월	1	212,612
3	삼호중앙초등학교~영암가족복합센터	1,107.0	삼호읍	2월	71	634,526
4	조학선~에덴빌라A,B	105.0	영암읍	4월	31	37,333
5	영암군청~권지영	110.0	영암읍	4월	10	39,008
6	5일시장~신애란	60.0	영암읍	4월	8	22,243
7	영암군청~5일시장	155.0	영암읍	5월	19	54,096
8	영암경찰서~서남빌라	60.0	영암읍	5월	9	20,982
9	하나로마트~영암초 달물수영장	260.0	영암읍	5월	2	132,321
10	영신아파트~신동아빌라	205.0	영암읍	6월	18	70,860
11	영암초등학교~교동로	40.0	영암읍	6월	2	13,499
12	대영맨션~그린하이빌	50.0	영암읍	6월	20	23,528
13	학암마을회관~이림재	295.0	군서면	7월	12	101,743
14	인지식당~왕실민박	235.0	군서면	7월	16	81,625
15	학산LH~낭주하이빌	400.0	학산면	7월	31	229,690
16	학산지역정압기~궁전아트빌라	250.0	학산면	8월	54	143,734
17	양일선~낭주골상가	40.0	학산면	8월	2	15,538
18	김문진~풍년방앗간	170.0	학산면	8월	11	55,553
19	삼호희망가~삼호서초등학교	760.0	삼호읍	7월	68	281,809
20	퀸스빌1차~한양파크빌	380.0	삼호읍	7월	34	193,534
21	용앙휴먼시아1차~피자나라치킨공주	190.0	삼호읍	7월	17	66,880
22	정수연립~안석환	307.0	영암읍	7월	25	108,402
무안군 소계 15개소		10,896	무안군	-	2,024	5,214,979
1	오룡지구 지원시설용지	450.0	오룡리	3월	-	148,500
2	오룡1-1지역정압기 ~ 오룡2-3공구	955.0	오룡리	2월	1,103	314,072
3	오룡 공동41블럭 ~ 공동 38블럭	130.0	오룡리	2월	423	42,900
4	남악청소년문화의집 인입	21.0	남악리	7월	1	8,727
5	오룡농업인지원센터	80.0	오룡리	7월	1	47,214
6	항공특화단지	650.0	현경면	3월	-	190,285
7	청천천 배관이설	-	청계면	7월	-	107,396
8	오룡산로~후정마을회관	1,800.0	일로읍	1월	-	859,496
9	후정마을회관~계두길	1,600.0	일로읍	2월	-	803,792
10	계두길~일로지역정압기	1,500.0	일로읍	3월	-	1,139,952
11	일로지역정압기~일로읍사무소	1,265.0	일로읍	3월	170	560,043
12	일로성당~일로로	660	일로읍	4월	113	224,807
13	일로읍사무소~다복2차아파트	975	일로읍	5월	40	418,110
14	일로읍사무소~월암교차로	745	일로읍	6월	143	325,765
15	성동길~성동오피스텔	65.0	무안읍	10월	30	23,920
강진군 소계 10개소		2,277	강진군	-	170	857,640
1	문화마을길 - 종합운동장길	250.0	강진읍	4월	16	92,350
2	동성로 - 사의재길	786.0	강진읍	4월	48	286,440
3	탐진로 - 향교로	40.0	강진읍	5월	3	21,260
4	한별어린이집-삼일로	40.0	강진읍	5월	9	21,040
5	프로방스-서성안길	130.0	강진읍	6월	12	44,340
6	강진복지타운-보은로1길	147.0	강진읍	6월	17	57,840
7	목리-이학래길	264.0	강진읍	7월	11	83,230
8	초지길~송도푸르름 빌라	70.0	강진읍	8월	18	31,740
9	맘편한센터~하나베버리힐즈	460.0	강진읍	9월	21	179,950
10	강진버스터미널~보금모텔	90.0	강진읍	9월	15	39,450

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분		공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 11개소			20,429	-	-	2,737	8,097,729
목포시 소계 1개소			2,300	목포시	-	500	800,000
1		목포시 일원	2,300.0	목포시	12월	500	800,000
영암군 소계 1개소			4,500	영암군	-	1,500	1,900,000
1		영암군 일원	4,500.0	영암군	12월	1,500	1,900,000
무안군 소계 2개소			1,655	무안군	-	36	597,729
1	일로읍사무소~목포교도소		520	일로읍	2월	33	205,051
2	하나로마트~전남체육고등학교		1,135	일로읍	3월	3	392,678
강진군 소계 7개소			11,974	강진군	-	701	4,800,000
1	강진지구정압기~다산삼거리		1,565.0	강진군	2월	-	726,080
2	다산삼거리~송계로		1,856.0	강진군	3월	-	835,540
3	송계로~거목영농법인		1,500.0	강진군	4월	-	563,190
4	거목영농법인~남산주유소		1,286.0	강진군	5월	-	630,055
5	남산주유소~성전천		960.0	강진군	6월	-	370,730
6	성전천~강진산단		1,807.0	강진군	7월	1	753,260
7	강진군 일원		3,000	강진군	12월	700	921,145

2) 대화도시가스(주)

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 22개소		24,422	-	-	5,715	5,293,308
1	서교동 행복주택 일원 저압 배관공사	163	서교동	2월	208	86,277
2	서교동 중해마루 일원 저압 배관공사	164	서교동	3월	240	85,383
3	관문동 여수여고 인근지역 저압 배관공사	58	관문동	3월	5	21,908
4	소호동 금호어울림 아파트 중□저압 배관공사	547	소호동	3월	162	315,490
5	수정동 블루써밋아파트 저압 배관공사	205	수정동	3월	272	93,390
6	신기동 대광로제비앙아파트 중□저압 배관공사	380	신기동	3월	366	262,920
7	문수동 4통,5통,6통,8통,9통 단독주택지역	3,245	문수동	4월	359	669,700
8	돌산읍 우두리 돌산교차로 ~ 백초공원 중·저압배관공사 등 3개소	679	돌산읍	4월	397	387,840
9	미평동 해광상그릴라아파트 저압 배관공사	10	미평동	4월	282	9,900
10	충무동 10통,11통 저압배관 연결공사	835	충무동	6월	34	275,000
11	여서동 1통(대치마을) 단독주택지역 저압 배관공사	1,800	여서동	7월	52	540,100
12	중앙동 8통,9통 단독주택지역 저압 배관공사	2,600	중앙동	9월	150	727,100
13	화치동 코오롱인더스트리 중압 배관공사	78	화치동	6월	1	85,800
14	대교동 15통 단독주택지역 저압 배관공사	900	대교동	8월	40	269,500
15	봉계동 온천리조트 연립주택 중압 배관공사	350	봉계동	7월	115	231,000
16	봉계동 주택조합 아파트 중압 배관공사	5	봉계동	7월	116	5,500
17	삼일동 7통 단독주택지역 저압 배관공사	1,500	삼일동	10월	64	550,000
18	여수죽림1지구 택지개발지구 중□저압 배관공사	9,700	소라면 죽림리	11월	-	-
19	광무동 아델리움오션프랑 저압 배관공사	365	광무동	11월	274	220,000
20	우두리 청솔1차아파트 저압 배관공사	8	돌산읍 우두리	12월	750	5,500
21	우두리 청솔2,3차아파트 저압 배관공사	230	돌산읍 우두리	12월	1128	151,800
22	소규모 배관공사	600	-	연중	700	299,200

나) 2024년도 계획                                      (단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
여수시 소계 14개소		17,690	-	-	1,922	4,865,000
1	덕양리 단지형 연립주택1차 저압 배관공사	10	소라면 덕양리	2월	77	5,000
2	덕양리 단지형 연립주택2차 저압 배관공사	10	소라면 덕양리	2월	72	5,000
3	덕양리 단지형 연립주택3차 저압 배관공사	10	소라면 덕양리	2월	120	5,000
4	충무동 12통 단독주택지역 저압 배관공사	1,700	충무동	4월	29	510,000
5	여수 율촌 국제미소래아파트1차 저압 배관공사	250	율촌면 조화리	4월	258	95,000
6	여수 율촌 국제미소래아파트2차 저압 배관공사	50	율촌면 조화리	4월	147	25,000
7	소호동 소제택지개발지구 중□저압 배관공사	6,300	소호동	6월	-	1,320,000
8	대교동 12통 단독주택지역 저압 배관공사	900	대교동	6월	40	270,000
9	삼일동 8통 단독주택 지역 저압 배관공사	1,800	삼일동	7월	45	540,000
10	대교동 1통(1구간) 단독주택지역 저압 배관공사	3,000	대교동	10월	128	840,000
11	주삼동 4통(월앙마을) 단독주택지역 저압 배관공사	1,800	주삼동	10월	64	540,000
12	충무동 9통 주택 일부지역 저압 배관공사	1,100	충무동	11월	70	330,000
13	학용동 원더라움더힐아파트 저압 배관공사	160	학용동	10월	172	80,000
14	소규모 배관공사	600	충무동	연중	700	300,000

3) 전남도시가스(주)

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 26개소		15,546			5,621	10,643,157
순천시 소계 9개소		3,738			3,520	1,979,691
1	조례동 골드클래스 3차	309	조례동	2월	479	151,644
2	해룡면 중우아펠리스	779	해룡면	7월	112	353,913
3	금곡동 일대	955	금곡동	7월	57	375,974
4	해룡면 전남 동부권 통합청사	150	해룡면	4월	4	76,023
5	왕지2지구 Main 공급관 공사	281	왕지동	3월	2,019	281,697
6	왕지2지구 하천하월공사	344	왕지동	3월	705	246,221
7	인제동 저압 Loop(대도빌라 일원)	90	인제동	3월	-	40,419
8	배관 이설 (매곡동 일원)	-	매곡동	3월	-	50,000
9	기타 공사구간	830	순천시	연중	144	403,800
광양시 소계 8개소		9,933			1,928	7,841,012
1	광양읍 서희스타힐스	1,389	광양읍	4월	883	707,144
2	광영동 한라비발디	496	광영동	3월	335	232,729
3	황금지구 푸르지오	4,182	황금동	7월	567	2,826,449
4	중동 일대	425	중동	6월	46	516,236
5	포스코리튬솔루션	25	율촌산단	9월	1	23,548
6	중마동 중압 Loop(길호대교~제철1문)	2,820	중마동	6월	-	3,184,012
7	광영동 저압 Loop(광영덕진G~상아G 間)	175	광영동	5월	-	134,694
8	기타 공사구간	421	광양시	연중	96	216,200
곡성군 소계 3개소		735			55	360,982
1	읍내리 곡성경찰서 일대	425	곡성읍	6월	22	233,456
2	읍내리 일대	170	곡성읍	5월	13	57,526
3	기타 공사구간	140	곡성읍	연중	20	70,000
구례군 소계 3개소		785			71	291,001
1	봉동리 일대	450	구례읍	6월	40	149,379
2	봉남리 일대	195	구례읍	5월	11	71,622
3	기타 공사구간	140	구례읍	연중	20	70,000
보성군 소계 1개소		140			20	70,000
1	기타 공사구간	140	벌교읍	연중	20	70,000
고흥군 소계 2개소		215			27	100,471
1	남계리 일대	75	고흥읍	9월	7	30,471
2	기타 공사구간	140	고흥읍	연중	20	70,000

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 30개소		16,337			7,987	10,094,375
순천시 소계 10개소		9,371			3,915	6,562,028
1	조곡동 일대	1,680	조곡동	10월	79	413,000
2	도시첨단산단 행복주택	2,000	야흥동	7월	665	1,680,000
3	연향동 남해오네뜨	45	연향동	7월	407	18,431
4	석현동 공동주택	150	석현동	7월	101	66,630
5	왕지2지구 트리마제	944	왕지동	9월	2,023	486,290
6	선평리 엔탑주택	100	서면	1월	496	60,000
7	PE 중압배관 교체(왕조우체국~조례사거리)	970	조례동	7월	-	934,459
8	PE 중압배관 교체(왕조우체국~조례주공G 間)	700	조례동	8월	-	545,328
9	PE 중압배관 교체(조례동 삼성AS~왕지송촌A 間)	1,952	조례동	7월	-	1,954,090
10	기타 공사구간	830	순천시	연중	144	403,800
광양시 소계 10개소		3,576			3,188	1,592,727
1	중동 일대	490	중동	3월	25	208,250
2	칠성리 일대	258	광양읍	5월	34	64,890
3	목성리 일대	798	광양읍	10월	58	225,225
4	황금지구 한라비발디	32	황금동	4월	775	38,218
5	황금지구 포스코 더샵 1차	20	황금동	6월	730	20,261
6	와우지구 중흥 S클래스	30	마동	7월	904	13,461
7	중동 산이고운마린파크	523	중동	7월	528	233,751
8	중동 자연애비버리힐	4	중동	7월	38	1,271
9	중마동 중압 Loop(중마송보G~중마덕진G 間)	1,000	중마동	4월	-	571,200
10	기타 공사구간	421	광양시	연중	96	216,200
곡성군 소계 2개소		290			142	180,315
1	묘천리 공동주택	150	곡성읍	8월	122	110,315
2	기타 공사구간	140	곡성읍	연중	20	70,000
보성군 소계 2개소		1,380			210	1,078,634
1	우산리 일대	1,240	보성읍	5월	190	1,008,634
2	기타 공사구간	140	벌교읍	연중	20	70,000
구례군 소계 3개소		460			274	177,408
1	봉남리 일대	170	구례읍	8	5	47,172
2	백련리 공동주택	150	구례읍	5	249	60,236
3	기타 공사구간	140	구례읍	연중	20	70,000
고흥군 소계 3개소		1,260			258	503,263
1	등암리 일대	1,020	고흥읍	8	55	385,413
2	고흥읍 승원팰리체 2차	100	고흥읍	8	183	47,850
3	기타 공사구간	140	고흥읍	연중	20	70,000

4) (주)해양에너지

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 55개소		34,669			1,918	15,433,244
장성군 소계 8개소		4,576			246	1,779,373
1	기산리 일대	128	기산리	5월	124	68,311
2	삼계면 일대	315	삼계면	4월	8	77,733
3	삼태리 일대	1,959	삼태리	6월	45	468,222
4	성산리 일대	87	성산리	4월	2	29,285
5	영천리 일대	529	영천리	6월	18	243,700
6	황룡면 일대	130	황룡면	6월	2	78,000
7	장안리 일대	2	장안리	6월	2	945
8	기타지역 및 소구간	1,426	장성군 내	2~12월	45	1,011,185
영광군 소계 8개소		6,856			327	3,284,228
1	단주리 일대	3,342	단주리	10월	49	1,645,379
2	대마면 일대	205	대마면	12월	10	143,607
3	신하리 일대	1,698	신하리	10월	78	645,870
4	월평리 일대	1,346	월평리	10월	48	464,725
5	녹사리 일대	7	녹사리	10월	54	3,475
6	도동리 일대	43	도동리	6월	18	21,730
7	영광읍 일대	25	영광읍	6월	32	12,645
8	기타지역 및 소구간	190	영광군 내	2~12월	38	346,797
담양군 소계 11개소		6,573			411	2,994,187
1	가산리 일대	116	가산리	3	2	30,897
2	반룡리 일대	2,610	반룡리	12	90	731,517
3	백동리 일대	2,110	백동리	7	37	1,142,390
4	삼만리 일대	101	삼만리	4	3	79,514
5	오계리 일대	79	오계리	3	3	23,819
6	운교리 일대	519	운교리	4	102	275,837
7	학동리 일대	90	학동리	5	24	37,432
8	양각리 일대	367	양각리	6월	41	183,151
9	지침리 일대	42	지침리	6월	2	21,164
10	담빛리 일대	14	담빛리	3월	2	6,886
11	기타지역 및 소구간	525	담양군 내	2~12월	105	461,579
함평군 소계 5개소		7,662			237	2,304,168
1	기각리 일대	397	기각리	6월	16	171,195
2	사거리 일대	6,976	사거리	6월	164	1,816,927
3	내교리 일대	72	내교리	3	4	36,134
4	함평읍 일대	27	함평읍	3	15	13,595
5	기타지역 및 소구간	190	함평군 내	2~12월	38	266,316
화순군 소계 5개소		3,635			166	1,958,487
1	만연리 일대	38	만연리	6월	2	28,596
2	백용리 일대	3,008	백용리	5월	90	1,424,495
3	삼천리 일대	210	삼천리	6월	5	142,837
4	일심리 일대	44	일심리	8월	2	45,692
5	기타지역 및 소구간	335	화순군 내	2~12월	67	316,867
나주시 소계 9개소		2,007			296	1,047,887
1	교동 일대	95	교동	3월	1	19,501
2	나주시 일대	30	나주시	9월	2	26,000
3	덕산리 일대	461	덕산리	10월	3	268,447
4	산정동 일대	48	산정동	3월	3	21,600
5	송월동 일대	73	송월동	4월	38	26,262
6	금계동 일대	130	금계동	4월	33	64,818
7	서내동 일대	374	서내동	6월	67	187,087
8	금천면 일대	36	금천면	6월	3	18,006
9	기타지역 및 소구간	760	나주시 내	2~12월	146	416,166
해남군 소계 6개소		1,541			115	1,017,288
1	고도리 일대	279	고도리	5	20	128,893
2	구교리 일대	492	구교리	8	25	438,273
3	남외리 일대	379	남외리	7	21	165,003
4	읍내리 일대	65	읍내리	7	3	44,374
5	해리 일대	61	해리	1	3	32,846
6	기타지역 및 소구간	265	해남군 내	2~12월	43	207,899
장흥군 소계 3개소		1,819			120	849,618
1	건산리 일대	1,200	건산리	5	55	501,090
2	장흥읍 일대	499	장흥읍	12월	41	230,110
3	기타지역 및 소구간	120	장흥군 내	2~12월	24	118,417

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

구분	공사 구간	연장	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
지역 합계 40개소		21,730			6,501	12,163,386
나주시 소계 7개소		5,867			2,421	3,231,033
1	남평읍 일대	35	남평읍	11	1	17,096
2	덕산리 일대	20	덕산리	9	1	10,847
3	동수동 일대	20	동수동	10	1	10,847
4	산포면 일대	4,187	산포면	11	373	1,871,593
5	송월동 일대	730	송월동	11	1,614	376,873
6	이창동 일대	20	이창동	5	311	12,682
7	기타지역 및 소구간	855	나주시 내	2~12월	120	931,095
담양군 소계 5개소		4,435			441	2,771,393
1	강쟁리 일대	2,266	강쟁리	9	60	1,248,120
2	담양읍 일대	250	담양읍	12	30	111,922
3	봉서리 일대	300	봉서리	12	3	166,607
4	석현리 일대	479	석현리	11	140	152,925
5	기타지역 및 소구간	1,140	담양읍 내	2~12월	208	1,091,819
화순군 소계 7개소		4,067			848	2,377,916
1	교리 일대	5	교리	3	308	6,167
2	능주면 일대	600	능주면	12	6	333,214
3	동면 일대	300	동면	12	3	166,607
4	삼천리 일대	190	삼천리	11	268	123,159
5	천덕리 일대	2,472	천덕리	5	100	1,303,344
6	화순읍 일대	500	화순읍	12	50	193,613
7	기타지역 및 소구간	563	화순군 내	2~12월	113	251,812
함평군 소계 5개소		2,288			246	1,581,242
1	기각리 일대	460	기각리	8	170	225,448
2	마산리 일대	20	마산리	3	1	10,868
3	사거리 일대	400	사거리	4	15	163,347
4	월야리 일대	1,328	월야리	11	40	968,603
5	기타지역 및 소구간	80	함평군 내	2~12월	20	212,976
장흥군 소계 4개소		2,893			192	1,076,743
1	남외리 일대	2,090	남외리	4월	53	589,983
2	삼산리 일대	20	삼산리	6	1	10,924
3	장흥읍 일대	343	장흥읍	12	50	53,613
4	기타지역 및 소구간	440	장흥읍 내	2~12월	88	422,223
장성군 소계 6개소		1,110			1,400	554,927
1	기산리 일대	110	기산리	10	180	53,141
2	남면 일대	40	남면	10	2	21,574
3	영천리 일대	95	영천리	8	971	66,461
4	월평리 일대	398	월평리	10	15	93,311
5	주산리 일대	210	주산리	10	184	87,808
6	기타지역 및 소구간	257	장성읍 내	2~12월	48	232,632
해남군 소계 2개소		792			138	417,336
1	해남읍 일대	352	해남읍	12	50	59,941
2	기타지역 및 소구간	440	해남읍 내	2~12월	88	357,395
영광군 소계 4개소		278			815	152,796
1	단주리 일대	56	단주리	4	300	35,680
2	백학리 일대	102	백학리	12	493	22,828
3	송죽리 일대	40	송죽리	5	2	21,746
4	기타지역 및 소구간	80	영광읍 내	2~12월	20	72,542

3. 지역별 정압기 설치계획

1) 목포도시가스

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		2	-	-	-	132,655
목포시	옥암동	1	옥암동	8월	-	69,744
무안군	일로읍	1	일로읍	10월	-	62,911

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시 군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		-	-	-	-	-

2) 대화도시가스

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		6	-	-	989	204,000
여수시	소호동	1	소호동	3월	162	26,000
여수시	신기동	1	신기동	4월	366	59,000
여수시	돌산읍 우두리	1	돌산읍 우두리	4월	397	59,000
여수시	삼일동	1	삼일동	9월	64	60,000
여수시	소라면 죽림리	2	소라면 죽림리	10월	-	120,000

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		1	-	-	-	60,000
여수시	소호동	1	소호동	6월	-	60,000

3) 전남도시가스

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		2				189,215
광양시	신규설치	2		4~7월		189,215

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시 군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		6				750,000
순천시	신규설치	3		1~7월		330,000
광양시	신규설치	2		7~10월		220,000
보성군	신규설치	1		5월		200,000

4) (주)해양에너지

가) 2023년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		5			300	300,000
화순군	백용리 일대	1	백용리	6월	90	60,000
담양군	반룡리 일대	1	반룡리	12월	90	60,000
함평군	사거리 일대	1	사거리	6월	101	60,000
영광군	단주리 일대	1	단주리	10월	3	60,000
영광군	신하리 일대	1	신하리	10월	16	60,000

나) 2024년도 계획

(단위 : m, 천원, 개소)

시 군	설치지역	개소	공급지역	공급시기	수혜가구	공 사 비
계		7				384,969
화순군	천덕리 일대	1	천덕리	5월		50,952
장성건	영천리 일대	1	영천리	8월		56,613
나주시	산포면 일대	1	산포면	11월		56,613
나주시	송월동 일대	1	송월동	11월		56,613
담양군	석현리 일대	1	석현리	11월		50,952
함평군	월야리 일대	1	월야리	11월		56,613

* 본 공사계획은 타 공사와의 연계, 수요자 사정 및 건설사의 준공일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

* 본 공사계획의 세대수와 공급신청서의 세대수가 현저하게 차이나는 경우 공사가 취소될 수 있음을 안내드립니다.