목포시 고시 제2006  -  14호

목포 도시계획시설사업(소3-58 외 4개) 실시계획인가(변경) 고시

1. 목포시 고시 제2003-64호(2003. 9. 20) 실시계획인가 고시된 도시계획시설사업에 대하여 근거 관련규정 추가 및 사업기간 연장을 위하여 아래와 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 목포시청 건설과에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2006.   4.   5

목 포 시 장

1) 변경사항

가. 근거 관련규정 변경

o 당 초 : 국토의계획및이용에관한법률 제88조, 시행령 제97조

o 변 경 : 국토의계획및이용에관한법률 제88조, 제91조, 제96조, 동법 시행령 제97조, 제100조

나. 변경사유 : 관련규정 추가

2) 사업의 종류 및 명칭

노 선 명	위 치	비 고
계	4개소
소로 3류 58호선	북교동 성결교회 뒤	도시계획사업
소로 2류 42호선 소로 2류 43호선	은혜학원~뉴그린탕간	〃
소로 3류 155호선	용해동 샤론빌라 앞	〃
소로 3류 41호선	죽교동 죽교농협 뒤	〃

3) 사업의 면적 또는 규모

노 선 명	위 치	총 계 획	금회계획
계	4개소
소로 3류 58호선	북교동 성결교회 뒤	L=287m B=6m	L=125m B=8m
소로 2류 42호선	은혜학원~뉴그린탕간	L=350m B=8m	L=40m B=8m
소로 2류 43호선	은혜학원~뉴그린탕간	L=225m B=8m	L=180m B=8m
소로 3류 155호선	용해동 샤론빌라 앞	L=530m B=6m	L=200m B=6m
소로 3류 41호선	죽교동 죽교농협 뒤	L=90m B=6m	L=90m B=6m

4) 사업 시행자 : 목포시장

5) 사업착수 및 준공예정일

o 착  수  일 : 2003. 9. 20

o 준공예정일 : 당 초 2006. 12. 31

변 경 2008. 12. 31

6) 사용 또는 수용할 토지 등 세목조서 : 변경 없음