전라남도 고시 제2006 - 42호

대양지구 지방상수도사업 변경인가 고시

목포시 대양지구 지방상수도사업을 수도법 제12조의 규정에 의거 변경인가 하였기 같은법 시행령 제17조의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2006.   4.   5.

전라남도지사

1. 사 업 명 : 대양지구 지방상수도사업

2. 사업시행자  주소․성명

가. 주  소 : 전라남도 목포시 용당동 1188-2번지

나. 성  명 : 목 포 시 장

3. 사업의 목적 및 개요

가. 목   적 : 장흥댐 광역상수원 수수로 맑은 물을 안정적으로 공급하여 주민의 보건위생 향상에 기여

나. 변경인가 사유

1) 일부 누락된 관로매설구간 편입토지 반영

2) 편입토지 및 지장물건 보상협의 난항으로 인한  사업기간 연기

3) 수자원공사 신안송수관로 대양분기점 위치변경으로 인한 관로연장 변경

다. 사업개요

1) 목표년도 : 1단계 2006년, 2단계 2016년 (변경없음)

2) 수    원 : 장흥댐 호소수 (변경없음)

3) 시설용량 : 3,500㎥/일 (변경없음)

4) 사업내용 (변경)

◦배수시설 : 배수지 3,500(7,000)㎥, 건축․전기 설비

◦배수관로 : ￠=350～600mm, L= 1.467km

◦송수관로 : (당초) ￠=500mm, L= 0.204km

(변경)￠=500mm, L= 0.231km (증 0.027km)

5) 총사업비 :  3,926백만원 (변경없음)

4. 사업시행지의 위치 및 면적

가. 위  치 : 목포시 대양동 957-10번지 등 10필지

나. 면  적 :  4,927㎡ (당초 4,724㎡)

5. 급수구역, 급수인구 및 급수량 (변경없음)

가. 급 수  구 역 : 목포시 삼향동, 용해동, 용해지구 일원

나. 총 계획 인구 : 32,200명

다. 계획급수인구 : 32,200명

라. 보   급   률 :  100%

마. 1인당 1일 급수량 : 520ℓ

6. 사업시행기간 및 급수개시예정일 (변경)

가. 사업 시행 기간 : (당초) 2004. 2 ～ 2006. 9

(변경) 2004. 2 ～ 2007. 6

나. 급수개시예정일 :  (당초) 2006. 10

(변경) 2007. 7

7. 수용․사용할 토지의 조서 및 소유자와 이해관계인 : 별첨조서 참조

8. 기타 : 관계도서를 목포시 수도과(전화 061-270-3532)에 비치

수용·사용할 토지등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소

○ 토지 편입조서(변경)

일련 번호		토 지 소재지	지 번 ( )은 분할 번지	지목	지적 (㎡)	편입예정면적 (㎡)		소 유 자		이해관계인		비 고 (근저 당권, 가압류)
						당초	변경	주 소	성명	주소	성명
진입도로	1	전라남도 목 포 시 대 양 동	1144 (1144-1)	도	3,411	37	37	국 (건설부)
	2	전라남도 목 포 시 대 양 동	957-10 (957-43)	임	6,975	541	541	서울 노원구 중계동 366, 라이프 중계동 아파트 109-1201호	윤영래
배 수 지	3	전라남도 목 포 시 대 양 동	957-10 (957-42)	임	6,975	1,884	1884	서울 노원구 중계동 366, 라이프 중계동 아파트 109-1201호	윤영래
	4	전라남도 목 포 시 용 해 동	563-1 (563-10)	전	4,571	989	989	강진군 강진읍 서성리 302-5	하용문 외10인
	5	전라남도 목 포 시 용 해 동	563-4	전	132	132	132	서울 은평구 음암동 616-35	정일식 외
	6	전라남도 목 포 시 용 해 동	563-2 (563-11)	전	893	400	400	목포시 대의동 2가 1-77	이경애
	7	전라남도 목 포 시 용 해 동	584-4 (584-9)	임	107	4	4	목포시 양동 125	김연금
	8	전라남도 목 포 시 용 해 동	584-2 (584-7)	전	655	604	604	목포시 용해동 445	정종만
	9	전라남도 목 포 시 용 해 동	584-1 (584-6)	전	777	43	211	목포시 용해동 445	정종만
	10	전라남도 목 포 시 용 해 동	584 (584-5)	전	936	90	125	성남시 분당구 서현동96, 우성 아파트 226-901	노동욱
계					25,432	4,724	4,927