익산지방국토관리청 고시 제2006 - 58호

하천정비시행계획 변경 고시

하천법 제27조의 규정에 의하여 하천정비시행계획을 다음과 같이 변경 고시합니다.

2006.  4.  27

익산지방국토관리청장

하천공사의 명칭	하천공사시행지역의 위치	하천공사의 목적 및 개요		하천공사시행자의 명칭 및 주소	하천공사의 착수 및 준공 예정일
		당초	변경		당초	변경
영산강수계치수사업 평림천 홍정제2차 개수공사	전남 장성군 삼계면 능성리,삼서면 홍정리～광주광역시 광산구 명도․오운동	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 0.6 km 교량 148m/2개소	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 0.6 km 교량 148m/2개소	익산지방국토관리청장 전북 익산시 남중동 352	착수 : 2003년 5월 준공 : 2006년 4월(1,080일)	착수 : 2003년 5월 준공 : 2006년 11월(1,260일)
영산강수계치수사업 지석천 기존제방보축 2차공사	전남 화순군 도곡면 신덕리, 춘양면 우봉․부곡리, 이양면 금릉․강성리	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 0.3km 하도정비 1.6km 교량 448m/2개소	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 0.3km 하도정비 1.6km 교량 445m/2개소	〃	착수 : 2003년 6월 준공 : 2006년 6월(1,080일)	착수 : 2003년 6월 준공 : 2007년 6월(1,440일)

하천공사의 명칭	하천공사시행지역의 위치	하천공사의 목적 및 개요		하천공사시행자의 명칭 및 주소	하천공사의 착수 및 준공 예정일
		당초	변경		당초	변경
영산강수계치수사업 지석천 송림제2차 개수공사	전남 나주시 동강면 대지, 운산, 양지리, 산포면 등정, 덕례리, 금천면 신가리지내	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 4.3 km 교량 274m/1개소	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 4.3 km 교량 274m/1개소	익산지방국토관리청장 전북 익산시 남중동 352	착수 : 2003년 7월 준공 : 2006년 7월(1,080일)	착수 : 2003년 7월 준공 : 2007년 7월(1,440일)
일반하천치수사업 고막원천 단면보강공사	전남 함평군 학교면 석정, 대동면 금곡리,나산면 이문, 삼축리, 나주시 문경면 산호리 영암군 학산면 매월리 지내	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 2,954m 교량 462m/3개소	홍수로부터 농경지 및 인가보호 축제 2,954m 교량 462m/3개소	〃	착수 : 2003년 6월 준공 : 2006년 6월(1,080일)	착수 : 2003년 6월 준공 : 2007년 6월(1,440일)