나주시 고시 제2006 - 54호

재해복구및재해위험지구정비사업 하천공사 시행계획변경 고시

하천법 제27조 및 같은법시행령 제17조의 규정에 의거 장성천(지방2급하천) 재해복구 및 재해위험지구 정비사업 시행계획을 다음과 같이 변경 고시합니다.

2006.   5.   12

나 주 시 장

1. 사업의 목적 : 재해복구 및 재해위험지구 정비사업 하천정비 및 접속도로 개설

2. 사업시행자 : 나주시 송월동 1100번지 나주시장

3. 사업개요

구분	사 업 명 (하천명)	위 치		사 업 량	사 업 비 (백만원)	사업기간	비고
		면	리
당초	장성천제방숭상 및 하상정비공사 (장성천,지방2급)	노안	금동~ 학산	․하상정비 L=4,000m ․교량개측 4개소 ․접속도로 L=1,110m	8,600	2005. 01 ~ 2007. 01
변경	장성천제방숭상 및 하상정비공사 (장성천,지방2급)	노안	금동~ 학산	․하상정비 L=4,000m ․교량개측 4개소 ․접속도로 L=2,260m	10,112	2005. 01 ~ 2007. 12

4. 손실보상에 관한 사항

○ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 보상

○ 관계도면 및 토지, 지장물 조서 (추가분) : 게재생략

․나주시청 재난관리과(330-8498), 노안면사무소(330-7865), 성북동사무소(330-7882)