전라남도 고시 제2006 - 71호

영광군 계획시설(공공청사)사업 실시계획 변경 고시

영광군계획시설(공공청사)사업에 대하여 국토의계획 및 이용에관한법률 제88조,제91조 및 동법시행령 제100조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획 변경 고시합니다.

2006.  5.  19

전 라 남 도 지 사

1. 사업시행지 위치(변경없음)

○영광군 영광읍 학정리 679-7번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

○종  류 : 영광군계획시설(공공청사)사업

○명  칭 : 영광소방서 신축공사

3. 면적 또는 규모(변경없음)

○부지면적 : 7,903㎡

○건축면적 : 1,132.66㎡(철근콘크리트조 지상4층 1동)

4. 시행자의 성명 및 주소(변경없음)

○성  명 : 전라남도지사

○주  소 : 전남 무안군 삼향면 남악리 1000번지

5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(기간연장)

○착  수 : 2004.10.16(변경없음)

○준  공 : 당초 - 2005.7.12 , 변경 - 2007.8.15

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 소유권과 소유권외의 권리의 명세와 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제2조제5항의 규정에 의한 관계인의 주소․성명(변경없음) : 게재생략

7. 기타 자세한 사항은 전라남도 소방본부 소방행정과에 문의하여 주시기 바랍니다.(☏061-286-0751)