광양시 고시 제2006 - 52호

광양국가산업단지개발사업 실시계획 변경승인 고시

광양시고시 제2005-46(2005. 7. 28)호로 고시한 바 있는 154kv송전선로 변경공사 실시계획 승인․고시에 대하여 산업입지및개발에관한법률 제17조의 규정에 의하여 변경승인 하고 같은법 제19조의2 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2006.  5.  26

광 양 시 장

1. 사업종류 및 명칭(변경없음)

◦ 154kv송전선로 변경공사

2. 사업시행자의 성명 (변경)

◦ 기 정 : 주식회사 포스코 사장 강창오

◦ 변 경 : 주식회사 포스코 대표이사 정준양

◦ 사 유 : 대표이사 변경

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업목적

◦ 광양제철소 및 태인동 연관단지 공급용 154kv 송전선로 이설을 통한 인근지역 민원해결 및 지역발전 촉진

나. 사업개요

◦ 154kv송전탑 설치 11기(광영 7  중마 1  옥곡 2  진월 1)

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경)

◦ 위    치 : 광양시 옥곡면 장동리 산68-5번지외 71필지

◦ 면    적

ㆍ 기 정 : 86,810㎡(철탑용지 3,014  선하용지 67,086  작업장진입로 16,710)

ㆍ 변 경 : 84,615㎡(철탑용지 3,014  선하용지 64,891  작업장진입로 16,710)

․ 증ㆍ감 : 감 2,195㎡(선하용지  감 2,195)

ㆍ 사 유 : 지적불부합지 등으로 인한 선하용지 면적산출 오류 정정

5. 사업시행기간(변경)

․기 정 : 2005. 7 ～ 2006. 6. 30

․변 경 : 2005. 7 ～ 2007. 3. 31

․사 유 : 철탑부지 손실보상협의 지연으로 인한 공사 지연

6. 도시관리계획결정에 대한 국토의계획및이용에관한법률시행령 제25조제5항 각호의 사항(변경없음)

◦ 도시계획시설 결정 및 지형도면 승인조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치		면적(㎡)	최 초 결정일	비 고
신설	4	고압선 (154kv)	소계	11 기	3,014	2005. 7. 28	선로연장 4.6km
			21번	옥곡면 장동리 산68-5	213
			22번	옥곡면 장동리 산68-6	172
			23번	광영동 산61-3	331
			24번	마동 산75	670
			25번	광영동 산52-1번지 외 1	160
			26번	광영동 산32-1	172
			27번	광영동 산26-1	230
			28번	광영동 산6-46	230
			29번	광영동 산4-1	230
			30번	광영동 산1-3	160
			31번	진월면 망덕리 산139-32	446

7. 수용ㆍ사용할 토지, 건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 현황(변경)

◦ 토 지

ㆍ 기 정 : 72필지, A=86,810㎡

ㆍ 변 경 : 72필지, A=84,615㎡

․ 증ㆍ감 : 감 2,195㎡

※ 토지세목(변경)조서 : 다음

8. 상세 서류 및 도면의 공고는 생략하되 광양시청 도시과에 공고일로부터 14일간 비치하고 일반인에게 열람합니다. (☎ 061-797-3427)