목포시 고시 제2006 - 35호

목포 도시계획시설사업(유달산주차장) 실시계획인가(변경) 고시

1. 목포시 고시 제2003-18호(2003. 03. 05) 실시계획인가 고시된 도시계획시설사업(주차장)에 대하여 지적분할 측량에 따른 면적변경 및 부대시설 추가, 사업기간 변경, 관련규정 추가를 위하여 국토의계획및이용에관한법률 제88조, 제91조, 제96조 및 동법 시행령 제97조, 제100조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 목포시청 도시과 및 원도심개발사업단에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2006.   6.   5

목 포 시 장

■ 실시계획 변경사항

가. 고시근거 관련규정 변경(추가)

∙당 초 : 국토의계획및이용에관한법률 제88조 및 같은법 시행령 제97조

∙변 경 : 국토의계획및이용에관한법률 제88조, 제91조, 제96조 및 동법시행령

제97조, 제100조

나. 사업계획 변경

항 목	구분	고 시 내 용
1. 사업시행지의 위치	변경	∙위 치 : 목포시 죽교동 363번지 일대 → 목포시 죽교동 360-1번지 일대(유달산 일주도로 아래)
2. 사업종류 및 명칭	변경	∙종 류 : 주차장(14호) ∙명 칭 : 죽교4지구 주차장 → 죽교4지구 유달산 주차장
3. 사업면적 및 규모	변경	∙조성면적 : 8,800㎡ → 10,075㎡ (증 1,275㎡) ※ 변경사유 : 분할측량에 의한 면적 변경(구역변경 없음) ∙부대시설 추가 : 관리실(2.5×2.5m), 화장실(3.0×4.5m), 음수대(2.5×2.5m), 정 자(4.5×4.5m)
4. 사업시행자 주소 성명	변경	∙주 소 : 목포시 용당동 1188-2번지 ∙성 명 : 목포시장(도시과장 → 원도심개발사업단장)
5. 사업착수 및 준공 예정일	변경	∙사업기간 : 2003년 3월 5일 ～ 2005년 12월 31일 → 2003년 3월 5일 ～ 2006년 12월 31일
6. 수용 또는 사용할 토지 건물조서	변경	∙다음
7. 실시계획 관계도서	변경	∙게재생략(목포시청 도시과, 원도심개발사업단 비치)
8. 기타 문의	변경	∙ 전화 270-8329(원도심개발사업단 주거환경팀)