전라남도 공고 제2006 - 357호

무안공항개발 기본계획 변경 공고(안)

항공법 제89조 및 동법시행령 제23조의 규정에 의하여 무안국제공항 기본계획 변경(안)을 다음과 같이 공고하오니 일반인은 공람하시기 바랍니다

2006.  6.  20

전라남도지사

Ⅰ. 공항개발의 기본방향

◦지방화시대에 대비하고 2000년대의 항공수요에 대처하기 위한 공항의 역할과  기능을 재정립하기 위하여 ’94.4.19 수립한 『공항개발중장기기본계획』에   의한 지역공항의 위상정립

◦국토의 균형발전을 도모할 수 있는 호남지역 거검공항으로서 장기적으로    서해안 개발 및 대중국 교류기반 구축

◦투자의 효율성과 경제적인 사업시행을 위하여 2010년의 항공수요에 대비한  단계사업을 우선 시행하고, 추후 항공수요 증가 추이에 따라 경제적 분석을   통한 단계적 확장 추진

Ⅱ. 개발계획의 개요

1. 사업기간

◦당초 : 1997년 ～ 2003년(7년)

◦변경 : 1997년 ～ 2008년(11년)

2. 개발예정지역

◦위치 : 전라남도 무안군 망운면 일원

◦공항개발예정지역안의 수용 또는 사용할 토지 등의 범위 및 규모

- 당초 : 약 2,580천㎡(약780천평)

- 변경 : 변경없음

3. 공항시설규모(변경없음)

구 분		개항단계
활주로(m)		2,800×45m 1본
유도로(m)		평행유도로 1본 (2,800×23m) 연결유도로 3본
계류장(㎡)		90,692 (9대 주기)
여객터미널	국내(㎡)	20,106 (6,052천인/년)
	국제(㎡)	9,000 (473천인/년)
화물터미널	국내(㎡)	2,050 (50,039톤/년)
	국제(㎡)	1,062 (12,018톤/년)
주차장(㎡)		66,990 (2,095대 주차)
진입도로(m)		2,300(4차로)
항행안전시설		CAT-Ⅰ

* 공항배치도 : 행정기관에 비치된 관계도서 참조

4. 환경관리계획(변경없음)

Ⅲ. 변경사유

무안공항의 항공수요와 경제적 타당성 재검토결과 및 국가재정운용․투자     계획  조정에 따른 사업시행기간 연장