익산지방국토관리청 고시 제2006 - 114호

비관리청 하천공사 실시계획 변경 인가 고시

하천법 제33조 규정에 의거 다음과 같이 비관리청하천공사 실시계획 변경인가 하였기 고시합니다.

2006.  7.  26

익산지방국토관리청장

1. 하 천 명 : 영산강(국가하천)

2. 위    치 : 나주 삼영동 ～ 금천면 지내

3. 변경사유 : 나주시 영산강수계치수사업(수질개선 및 자연친화적 하천환경조성)을 추진함에 있어 이용객 편의증진 및 안전사고 예방을 위하여 일부 공종 변경

4. 점용면적 : 나주 삼영동 ～ 금천면 지내(L=9.0km)

5. 공사개요

당 초	변 경
- 토공 1식(흙깍기 : 213,841㎥, 사토 : 156,271㎥) - 호안공(식물재호안 : 13,250㎡, 자연석쌓기 : 7,313㎡,접안시설:50m) - 여울 2개소, 평여울 4개소, 어로 2개소 - 체육시설(마사토포장, 축구장, 농구장, 배구장, 게이트볼장) - 티타늄칼라코트 : 롤러스케이트장(인라인), 자전거전용도로	- 토공 1식(흙깍기:222,491㎥, 사토:237,335㎥,잔디식재:20,642㎡) - 호안공(식물재호안 : 13,250㎡, 자연석쌓기 : 4,876㎡, 초화류 : 4,154m) - 구조물공 1식(여울 1개소, 접안시설 50m, 관람석:160m) - 체육시설(종합운동장, 축구장, 농구장, 배구장, 롤러스케이트장 등) - 근린시설 1식(자전거도로등) - 부대시설 1식(음수대, 이동식화장실 등)

6. 공사기간 : 2001.12.11 ～ 2006.10.30

7. 피허가자 : 전남 나주시  송월동 1100 나주시장