장성군 고시 제2006 - 24호

황룡지구 문화마을조성(기존마을정비)사업

시행계획변경승인 고시

황룡지구 문화마을조성사업(기존마을정비) 시행계획 변경 수립에 대하여 2006.7.18 전라남도지사로 부터 승인받아 그 내용을 토지등 소유자,이해관계인,일반에게 알리고자 농어촌정비법 제34조 및 동법 제91조 및 동법시행령 제74조,공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제20조 내지 제22조 규정에 의거 사업시행계획을 아래와 같이 변경고시합니다.

2006.  8.  4

장 성 군 수

1. 사업의 목적 : 문화마을(기존마을정비) 조성사업

2. 사업의내용 및 구역

가. 사 업 명 : 황룡지구 문화마을(기존마을정비) 조성사업

나. 사업시행자의 성명 및 주소 : 장성군수, 장성군 장성읍 영천리 1061-2번지

다. 위 치 : 장성군 황룡면 장산리 일원

라. 면 적 : 기존마을정비 138,800㎡ (41,987평)

마. 계획인구 : 239세대 670인

바. 사업내용 ( 변경 )

◦도로정비 - 당초: 7개노선 도로확․포장  L= 1,617m, B=2.5∼ 12.0m

변경: 4개노선 도로확․포장  L= 920m, B=8.0m (감 697m)

◦오․우수관로 -당초:  L= 3,838m

변경:  L= 2,322m (감 1,516m)

◦공동이용시설(변경없음) :

마을회관-1동,  공동창고 1동 140㎡, 어린이 놀이터-1개소,

주차장-2개소, 소공원-1개소, 특산물판매소 1개소

사. 토지이용계획 (변경없음)

(단위: ㎡ )

구 분	합계	주 거 용 지	상 업 용 지	공 업 용 지	공공 용지	공동이용 시 설	도 로	녹 지
면 적 (㎡)	138,800	74,850	5,000	12,230	1,000	5,820	21,011	18,889
구성비 (%)	100.0	53.9	3.6	8.8	0.7	4.2	15.2	13.6

3. 사업비 소요액(변경없음) : 3,752백만원  (보조  3,612  융자  140 )

4. 사업예정기간 - 당초 : 2005. 6월 ∼ 2006.  5월

변경 : 2005. 6월 ∼ 2007. 12월

5. 사업의 효과

◦주거환경 개선으로 농촌 정주의욕 고취

◦생산기반 및 정비로 소득증대

6. 수용 또는 사용할 토지 등의 세목조서 (변경) : 다음

7. 열람장소 : 장성군청 도시과

8. 사업 시행계획 변경승인 고시에 따른 관계도서 : 게재생략

※본 변경승인 고시내용에 대하여 기타 자세한 사항 문의 (☏전화 061-390-7445) 및 열람은 장성군청 도시과에 비치 일반에게 보입니다.