광양시 고시 제2006 - 68호

옥곡지구 문화마을 조성사업 시행계획 변경 고시

농어촌정비법 제34조제2항의 규정에 의거 옥곡지구 문화마을 조성사업 시행계획 변경사항을 다음과 같이 고시합니다.

2006.  8.  4

광  양  시  장

1. 사 업 명 : 옥곡지구 문화마을 조성사업  (변경없음)

2. 위    치 : 광양시 옥곡면 신금리 (변경없음)

3. 사업면적 : 36,730㎡ (11,111평)  (변경없음)

- 신규마을 : 25,969㎡, 기존마을 : 9,985㎡

마을하수처리시설 : 776㎡

4. 사업기간 : 당초 2004. 8  ~  2005. 6. 30.

변경 2004. 8  ~  2006. 12. 31(연장 6개월)

5. 사 업 비 : 6,460백만원  (변경없음)

(국비 2,809, 지방비 1,930, 융자 1,720)

6. 사업개요 (변경없음)

- 부지조성 : 25,969㎡ (주택용지 29호 12,130㎡, 공공시설 13,839㎡)

- 도로 : 9조 952m, 상수도 : 1,115m,

- 우수로 : 11조 L=1,164m, L= 1,881m

- 복지회관 및 주차장 : 1식   - 공원 및 어린이놀이터 : 1식

7. 사업시행자 : 광양시장 (변경없음)

(위탁시행자 - 한국농촌공사 순천, 광양, 여수지사장)

8. 토지이용계획(변경없음)                               (단위 : ㎡)

구 분	면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
계	36,730	100.0
ꁯ 신 규 마 을	25,969	70.7
○ 주택건설용지	12,130	33.0
- 단독주택용지	12,130	33.0
○ 공공시설용지	13,839	37.7
- 도 로	3,431	9.3
- 사 면 녹 지	10,408	28.4
ꁯ 기 존 마 을	9,985	27.2
- 복지회관및주차장	1,255	3.4
- 어린이놀이터	1,078	3.0
- 우 수 로	47	0.1
- 도 로	3,086	8.4
- 사 면 녹 지	4,519	12.3
ꁯ 마을하수처리시설	776	2.1
- 마을하수처리장	744	2.0
- 방 수 로	32	0.1

9. 사업의 효과

○ 쾌적한 농어촌 정주생활공간 조성

○ 주거환경개선을 위한 주거단지 조성

○ 공공시설의 확충으로 면단위 거점마을의 기능제고

10. 기타사항

관계도서는 광양시 건설과(일반 061-797-3486, 행정 3486)에 비치하고 일반인에게 공개합니다.

11. 수용또는 사용하고자 하는 편입토지, 물건세목조서 : 다음