전라남도 고시 제2006 - 133호

공유수면매립공사 실시계획변경인가 고시

귀 군에서 신청한 영광군 법성면 법성리․진내리 지선 공유수면에 도시용지 (상업 ․주택시설 및 어항시설) 조성 목적의 공유수면매립공사 실시계획 변경인가 신청에 대하여, 공유수면매립법 제15조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 변경인가 합니다.

2006.  9.  27

전 라 남 도 지 사

1. 피인가자  :  영광군수(영광군 영광읍 무령리 198-4번지)

2. 변경 인가사항

위 치	매립목적 (매립면적)	실시계획 변경인가
		사 유	내용(공사기간 연장)
영광군 법성면 법성리․진내리 지선 공유수면	도시용지조성 (257,312㎡)	채석장 확보 위한 기간 소요	․당초 : 2003. 7. 21 ~ 2006. 11. 21 ․변경 : 2003. 7. 21 ~ 2007. 12. 21

3. 인가조건(해양수산부 협의조건)

○ 공유수면매립면허 및 실시계획인가시 제시한 조건을 철저히 이행할 것

○ 매립준공시 공유수면매립법 제26조의 규정에 따라, 총사업비를 산정하여야 하며, 매립지중 빈지 등을 국가에 귀속시키고, 준공시 해수부와 협의하여야 함