전라남도 고시 제2006 - 137호

골재채취 예정지 지정 기간연장 변경고시

2006년도 골재채취 예정지 지정기간을 아래와 같이 변경지정 하였기에 골재채취법 시행령 제25조의3조 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.

2006.  10.  4

전 라 남 도 지 사

1. 골재채취 예정지

하천명	위 치	면 적	부존량	허가예정량
영산강	함평군 학교면 고막리 ~ 곡창리 사포지선	502,090㎡	모래 559,000㎥	모래 559,000㎥

2. 골재채취 예정기간 : 당초 : 2004년 6월 ~ 2006년 9월까지

변경 : 2004년 6월 ~ 2007년 2월까지

3. 연도별 채취예정 물량

o 2004년 191,000㎥,   2005년 222,000㎥,   2006년~2007년 146,000㎥

4. 변경 사유 : 수생동물 산란기에는 준설량 조절 등을 위한 골재채취기간 중지로 예정량 미채취

4. 골재채취허가 신청에 관한 사항

o 사업시행자 : 함평군수

o 위치 지형평면도, 골재채취계획 물량산출표 등은 함평군청 건설과에 비치 열람(함평군청 건설교통과 061 - 320 - 3481)

부          칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.