순천시 고시 제2006 - 96호

도시계획시설(체육시설, 도로)사업 실시계획변경인가 및 고시

순천시 도시계획시설(체육시설, 도로)사업 실시계획변경인가에 대하여 국토의계획및이용에관한법률 제88조, 같은법 시행령 제97조의 규정에 의거 변경인가하고, 같은법 제91조, 시행령 제100조 규정에 의거 고시합니다

2006.   12.   13.

순  천  시  장

1. 공사명 : 힐사이드컨트리클럽 및 진입도로 건설사업(변경없음)

2. 사업의위치 : 순천시 별량면 죽산리 산15번지 일원(변경없음)

3. 사업의 종류, 규모(변경없음)

- 체육시설(골프장) : 329,500㎡(대중9홀)

- 도    로(소로2-720호선) : 19,637㎡(L=525m, B=8m)

4. 사업시행자 주소, 성명(변경없음)

- 순천시 연향동 1318-1번지 죽산기업(주) 김종훈

5. 사업착수일, 준공예정일(변경)

- 당초 : 2005.  5. 13 ～ 2006. 12. 31

- 변경 : 2005.  5. 13 ～ 2007.  2. 28

6. 사용 또는 수용할 토지조서(변경없음) : 게재생략

7. 변경사유 : 실시계획변경에 따른 관련기관 협의 및 보완서 작성 등으로 사업기간내 준공이 어려워 사업기간을 연장코자 함.