여수시 고시 제2006 - 170호

여수도시계획시설(도로)사업 실시계획변경인가 고시

여수도시계획시설(도로)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조, 제91조, 동법 시행령 제97조, 제100조 및 「전라남도 사무위임 조례」제2조의 규정에 의거 실시계획을 변경인가(기간연장) 하고 고시합니다.

2006.  12.  13

여 수 시 장

1. 사업시행지의 위치(변경없음) : 여수시 주삼동 982번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

가. 종 류 : 여수도시계획시설사업(대로1류3호선)

나. 명 칭 : 국도17호선(산단고가～석창)도로 확․포장 공사

3. 사업의 면적 또는 규모(변경없음)

규 모				사 용 형 태	면 적 (㎡)	연 장 (m)	시 점	종 점	비 고
등 급	류 별	번 호	폭원 (m)
대로	1	3	35	일반 도로	95,190	1,540	주삼동 982번지	주삼동 833-14번지

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

가. 성 명 : 여수시장

나. 주 소 : 여수시 학동 100번지

5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

가. 착수예정년월일 : 2001. 6.  7.

나. 준공예정년월일 : 당초 - 2006 12. 31. 변경 - 2007. 6. 30.

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소(변경없음) : 게재생략

7. 도시계획시설사업의 시행으로 새로이 설치하는 공공시설 또는 기존의 공공시설의 조서 및 도면(변경없음) : 게재 생략

8. 관계도서 : 게재생략(여수시 도시계획과에 비치)

9. 인가조건 : 게재생략

※ 기타 자세한 사항은 여수시청 도로과(☎ 061-690-2538, 담당자 명주완)로 문의하여 주시기 바랍니다.