여수시 고시 제2007 - 53호

여수국가산업단지개발사업 실시계획변경승인 고시

전라남도 제2007-1호(2007. 1. 17.)로 여수국가산업단지개발사업 시행자지정을 받은 지에스칼텍스(주) VRU(증기회수장치), 유량계실 등 부지조성 및 도로공사에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조, 동법 제19조의2 및 「전라남도 사무위임 규칙」 제2조의 규정에 의거 실시계획승인하고 다음과  같이 고시합니다.

2007.  4.  27

여 수 시 장

1. 사업의 명칭(변경없음) : VRU(증기회수장치), 유량계실 등 부지조성 및 도로공사

2. 사업시행자 성명 주소(변경없음)

가. 성 명 : 지에스칼텍스(주) 대표이사 허동수

나. 주 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 679번지

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적

여수국가산업단지내 IMO(국제해사기구)의 해양오염방지 협약 일환중 제품출하시 발생하는 유증기를 회수하기 위한 대기오염방지시설(VRU : 증기회수장치) 설치 및 제품 수출용 유량계 설치 부지 확보를 위함

나. 사업의 개요

VRU(증기회수장치 : 400㎡), 유량계실(600㎡) 및 도로공사(L=178.5m, B=6.0m)

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경)

가. 위 치 : 기정 - 여수시 월내동 1031-1번지외 2필지

변경 - 여수시 월내동 1031-2번지외 2필지

나. 면 적 : 기정 - 6,803㎡, 변경 - 8,802㎡

5. 사업시행기간(변경) : 기정 - 2006.  7. 20. ～ 2007  7. 31.

변경 - 2006.  7. 20. ～ 2008 12. 31.

6. 사용할 토지세목조서 및 소유권이외의 권리(변경)

소재지	지 번	지목	지적 (㎡)	편입면적(㎡)		소 유 자		비고
				기정	변경	주 소	성 명
계				6,803	8,802
월내동	1031-2	도	17,238	1,483	1,688	서울 강남구 역삼동 679	지에스칼텍스(주)
월내동	1050	대	73,404	708	558	서울 강남구 역삼동 679	지에스칼텍스(주)
월내동	1050-1	임	30,368	4,612	6,556	서울 강남구 역삼동 679	지에스칼텍스(주)

7. 관계도서는 여수시 도시계획과(690-2512, 담당자 장경신) 및 지에스칼텍스(주) 현장사무실(680-2142)에 비치하고 이해관계인에게 보입니다.