전라남도 고시 제2007 - 78호

공유수면매립공사 실시계획변경인가 고시

공유수면매립법 제15조 제3항 및 동법시행령 제16조 제3항의 규정에 의거 삼산지구 공유수면매립공사 실시계획변경인가를 다음과 같이 고시합니다.

2007.  7.  5

전 라 남 도 지 사

1. 실시계획인가연월일 : 1996년 12월 30일

2. 면허를 받은 자의 성명·주소

가. 성 명 : 장흥군수

나. 주 소 : 전남 장흥군 장흥읍 건산리 715-11

3. 매립목적 : 농지조성

4. 매립공사 구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 전남 장흥군 관산읍 삼산, 신동, 외동, 송촌, 방촌리지선

나. 면 적 : 4,205천㎡

5. 매립공사의 시행기간 :

가. 당 초 : 1997년 2월27일  ～ 2007년 12월 31일

나. 변 경 : 1997년 2월27일  ～ 2008년 12월 31일

6. 실시계획의 변경사항 및 변경사유

가. 변경사항 : 공사기간연장(1년)

나. 변경사유 : 내부개답 공사기간 및 농지관리기금 투자계획에 따른 소요기간 연장