도내 대규모점포 입점 현황

□ 입점 개요

구 분		광양 LF	남악 롯데	남악 이마트 트레이더스
규모	부지면적	23,650평	19,639평	3,966평
	연면적	28,143평	14,240평	18,917평
	매장수	286개(의류 193개)	172개(의류 114개)	-
주요 시설		아웃렛, 극장 (지하1, 지상4)	아웃렛(3층), 마트(2층)	판매시설(지하1~지상2) 주차장(지상3~지상7)
투 자 비		1,300억원	1,000억원	900억원
MOU 체결		‘14. 7. 31. (도․광양시․LF)	없음	없음
건축허가		‘15. 6. 15.	‘15. 3. 30.	‘16. 4. 12.
토지수용		'15. 5. 7.	분양용지 매입	분양용지 매입
상권영향평가		전남대 (최지호 교수)	경기과학기술대 (조춘한 교수)	-
착 공		‘15. 7. 3.	‘15. 9. 1.	‘19. 상반기
개 장		‘17. 1. 6.	‘16. 12. 21.	‘19년(예정)
비 고		행정소송	가처분 신청, 검찰 고발

① 광양 LF스퀘어

- ‘14.  7. 31.   MOU 체결(도↔광양시↔LF네트웍스)

- ‘14.  8. 28.   도시관리계획(지구단위계획) 변경 결정(광양시)

- ‘14. 10. 30.   도시계획시설 사업시행자 지정(광양시)

- ‘14. 12. 18.   도시계획시설 실시계획 인가(광양시)

- ‘15.  1. 27.   건축 교통 심의 승인(광양시)

- ‘15.  3. 24.   전남토지수용위원회 토지 수용재결 결정(도)

- ‘15.  6. 15.   건축 허가(광양시)

- ‘15.  7.  3.   건축 착공

- ‘15. 11. 26.   행정소송 1심 판결(공사중지)

- ’16.  7.  21.   행정소송 2심 판결(피고 승소)

- ‘16. 11.  4.   점포등록 신청(LF→광양시)

- ‘16. 11.  9.   점포등록 신청 통보(광양시→순천시)

- ‘16. 11. 25.   순천시 의견 통보(순천시→광양시)

- ‘16. 12. 27.   건축물 사용승인 신청(LF→광양시)

- ‘16. 12. 29.   지역협력계획서 보완 제출(LF→광양시)

- ‘16. 12. 29.   지역협력계획서 협약 체결(광양시, 시의회, LF, 광양경제활성화운동본부)

- ‘17.  1.  2.   점포등록 수리

- ‘17.  1.  3.   건축물 임시 사용 승인

- ’17.  1.  6.   복합쇼핑몰 개장

② 남악 롯데쇼핑몰

- ‘15.  1.  2.   개발행위 허가(무안군)

- ‘15.  3. 30.   건축 허가(무안군)

- ‘15.  7. 16.   점포등록 신청(롯데)

- ‘15.  7. 31.   무안군 유통업상생발전협의회 개최→지역협력계획 보완

- ‘15.  9.  1.   건축 착공

- ‘15.  9.  8.   점포등록 신청 취하(롯데) → 지역 상인회 등과 상생협력 추진

- ‘15. 10.  1.   민사소송 접수(용도지역 변경 손배소, 토지소유자 4명)

- ‘16.  6.  7.   점포등록 신청(롯데)→(무안군) 상권영향평가서와 지역협력계획서 전문가 검토 의뢰, 유통업상생발전협의회 개최(7.12.)

- ‘16.  8. 24.   민사소송 1심 판결(기각-원고 패소)

- ‘16. 10. 19.   건축물 사용승인 신청서 제출(GS→무안군)

- ‘16. 10. 26.   점포등록 신청(2차)

- ‘16. 10. 28.   점포 등록 서류 보완 요구(무안군→롯데)

- ‘16. 11.  8.   점포등록 수리

- ‘16. 11. 25.   건축물 사용승인

- ‘16. 12. 21.   쇼핑몰 개장

③ 남악 이마트 트레이더스 몰

- ‘15. 11. 16.   건축위원회 심의 신청(무안군→도)

- ‘15. 12. 16.   도 조건부 승인(건축물 색상, 일반인 소규모 휴식공간 변경 등)

- ‘16.  2. 23.   건축허가 접수(이마트→무안군)

- ‘16.  4. 12.   건축허가(무안군)

- ‘17.  4. 10.   착공신고서 제출(이마트→무안군)

- ‘18.  9.  4.   점포등록 접수(이마트→무안군), 상권영향평가서, 지역협력계획서 제출

- ‘18.  9.  5.   상권영향평가서 전문기관 검토(무안군→대한상공회의소)

- ‘18. 10. 15.   점포등록 접수 취소(이마트→무안군)

(사유) 입점 반대 측과(목포시) 상생 협의를 추진하고 향후 진행 예정

④ 여수 이마트 트레이더스 몰

- ‘14.  9. 19.   토지매매 약정체결(이마트↔블루토피아(택지개발업체))

- ‘16.  6. 20.   토지사용승낙(여수시)

- ‘16.  9.  8.   교통영향평가 심의 완료(전남도)

- ‘16.  9. 23.   경관․건축 공동위원회 심의 신청(이마트)

- ‘16. 11.  4.   경관․건축 공동위원회 심의(여수시 보완요구-반려)

- ‘17.  1. 24.   경관․건축 공동위원회 심의 승인(여수시)

- ‘17.  3. 30.   건축허가 신청(이마트→여수시)

- ‘17.  5. 17.   건축 불허가 처분(여수시 허가민원과)