		2018. 11.

순천 도시첨단 산업단지 조성 사업

	(건설도시과)

순천 도시첨단 산업단지 조성 사업

	【사 업 개 요('15~'22)】
❍ 위 치 : 순천시 도사(야흥)동 일원 ❍ 면 적 : 190천㎡ ❍ 사 업 비 : 376억원(용지비 135, 조성비 224, 기타 17) ❍ 시 행 자 : 국토부, 한국토지주택공사 ❍ 유치업종 : 연구개발(R＆D)산업, MICE산업, 지식서비스산업

추진 상황

❍ 도시첨단 산업단지 개발 사업지 선정	: ‘15.  1. 19.

❍ 개발행위제한구역 지정고시	: ‘16.  9. 13.

❍ 개발 및 실시계획 승인 고시(국토부)	: ‘17. 12. 29.

❍ 토지 및 지장물 보상절차 추진(조사, 감정평가, 열람공고)  : ‘18.  2. ~9.

❍ 손실보상 협의요청	: ’18. 10. 26.

❍ 감정평가 및 토지보상	: ‘18.  1. ~12.

앞으로 추진계획

❍ 협의보상 및 토지수용	: ‘18.11.~’19.6.

❍ 공사 착공(예정)	: ‘19.  1. 31.

❍ 공사 준공(예정)	: ‘22. 12. 31.

위 치 도