□ 지방도정비 지구별 사업 계획

구분	지 구 명	사업 기간	사업량 (km)	사업비(백만원)				비 고
				총 사업비	18년 까지	19년 추진	20년 이후
합계 (32개 지구)			138.58	924,346	484,663	98,642	341,041
공사 (29개 지구)			120.50	906,346	480,163	90,942	335,241
준공 (5)	소계		13.56	93,783	77,379	16,404	-
	나주IC ~동신대	10~19	6.73	60,206	55,599	4,607	-
	시종~나주	14~19	3.78	17,149	12,793	4,356	-
	북일 오소재	17~19	0.99	4,010	1,810	2,200	-
	광양~봉강	15~19	1.00	4,242	2,851	1,391	-
	원동~청룡	15~19	1.06	8,176	4,326	3,850	-
계속 (20)	소계		97.94	784,063	402,784	71,438	309,841
	유치~이양	06~21	17.43	225,103	175,608	9,486	40,009
	무안공항	10~20	8.12	88,079	68,342	6,670	13,067
	영산강 강변도로	10~20	4.66	38,571	30,572	3,479	4,520
	벌교~낙안	11~21	6.59	54,186	23,652	7,006	23,528
	남포~장재	11~19	3.16	36,369	19,954	7,361	9,054
	진월~광영	11~19	2.76	53,676	30,080	2,477	21,119
	증도~지도	14~21	3.30	16,096	5,073	1,000	10,023	지적불부합 보상지연
	거제~안치	15~20	3.80	15,890	7,106	2,297	6,487
	만곡~신하	15~20	2.58	10,012	3,036	2,400	4,576
	송지~고담IC	15~20	2.70	15,250	7,003	2,173	6,074
	깃재터널	17~21	3.95	37,911	6,088	6,000	25,823
	무정 ~ 순창	16~23	4.81	22,425	5,908	2,000	14,517	노선조정 민원
	고서IC ~광주댐	17~24	4.90	44,132	4,7 65	5,084	34,283
	보성 겸백	17~22	5.00	24,991	3,917	5,000	16,074
	금정~유치	17~22	5.74	23,524	3,079	2,605	17,840
	구례 용방	17~20	1.70	7,541	1,687	1,000	4,854
	갈퀴재	17~22	3.10	11,307	1,216	2,000	8,091
	목포구등대 ~양화	18~23	2.64	19,000	2,898	2,000	14,102
	태천~선도	18~23	4.00	15,000	1,500	700	12,800	18년 선보상
	과역~남양	18~23	7.00	25,000	1,300	700	23,000	18년 선보상
신규 (4)	소계		9.00	28,500	-	3,100	25,400
	조성~대서	19~22	3.40	8,000	-	1,000	7,000	국비(특교세)
	한천~오음	19~22	1.20	5,000	-	700	4,300	국비(특교세)
	벽파~연동	19~22	1.80	7,000	-	700	6,300	국비(특교세)
	밤고개~율포	19~22	2.60	8,500	-	700	7,800
설계 (3개 지구)			7.99	1,000	-	500	500
보완설계(2), 신규(1)			7.99	1,000	-	500	500	대흥사(보), 원화(보), 세지(신)
기 타			10.09	17,000	4,500	7,200	5,300
선보상(4건)		19~25	6.79	9,500	1,500	4,700	3,300	까치내(20), 원동(10), 원화(10), 월등(7)
비관리청 (함평, 고흥)		17~21	3.20	6,000	3,000	2,000	1,000
위험교량 개축 (사거리교)		18~20	0.10	1,500	-	500	1,000	도로사업소 추진

(단위: ㎞, 백만원)