위험도로 구조개선사업

	사업개요(2014~2023)
- 총 73개소, 162,138백만원(국비 81,069, 지방비 81,069) ○ 지 방 도 : 37개소, 97,358백만원 ○ 시 군 도 : 36개소, 64,780백만원 ※ 소요재원 : 국고(광역․지역발전특별회계) 50%, 지방비 50% ※ 1차(‘04~’13년) 위험도로 구조개선사업 추진 : 141개소, 1,137억원 ※ ‘14년~’17년 위험도로 구조개선사업 : 12개소 347억원(도 6, 사업소 6)

□ 사업개요

○ 위    치 : 고흥, 신안, 장성, 광양, 곡성(계속 5)

○ ’19 본예산 : 11,778백만원 [지특 5,889(50%), 도비 5,889(50%)]

- 본  청 시행 : 3지구 (9,336백만원)

- 사업소 시행 : 2지구 (2,442백만원)

○ 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

○ 사업내용 : 선형개량, 도로 확포장, 우회도로, 안전시설 설치 등

□ 사업 추진 현황(중장기계획)

○ 대상지구 : 73개소, 88.0km, 1,620억원(국비 810, 지방비 810)

- 완료지구 :  7개소, 12.6km, 262억원

- 시 행 중 :  5개소, 9.40km, 422억원

- 미 시 행 : 61개소, 66.0km, 936억원

○ 년차별 투자 실적

(단위 : 개소, 억원)

사업량		총사업비	‘18년 까지	‘19년	‘20년 이후	비고
추진	미추진
12	61	1,620	417	118	1,085

※ 제2차('14~'23) 위험도로 구조개선사업 중장기 계획‘우선 순위’에 따라 추진

※ 준공 : 여운재, 배산('16), 봉룡~세동, 남죽, 쌍태, 매산('17), 월선('18)

□ 2019년 추진계획

○ 예산 내시(행정안전부) : 11,778백만원(국비 5,889, 도비 5,889)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				공사기간	진도 (%)	시 공 자
			계	’17까지	’18년	’19이후
합 계	5지구	9.40	42,207	15,460	11,778	15,034
도로교통과 시행(3지구)		7.53	34,607	10,302	9,336	15,034
당숙재 도로확포장	신안 자은	1.66	7,494	1,329	2,547	3,618	’14.06.26.~ ’20.06.10..	7	금강건설㈜ 등 2개사
작은재 선형개량	장성 북일	2.88	13,479	3,383	1,684	8,412	’14.12.08.~ ’20.11.05.	19	국제건설 산업㈜
봉강 위험도로	광양 봉강	2.99	13,634	5,590	5,105	3,004	’15.12.16.~ ’20.11.24	35	양일건설㈜ 등 2개사
도로관리사업소 시행(2지구)		1.87	7,600	5,158	2,442	0
학곡지구 선형개량	고흥 두원	1.10	4,414	2,732	1,682	-	'15.10.21. ~ '19.10.19.	28	㈜해정건설 등 2개사
건모지구 선형개량	곡성 죽곡	0.77	3,186	2,426	760	-	'15.10.23. ~ '19.10.21.	66	청하건설(주) 등 2개사

※ 도로교통과(3지구)와 도로관리사업소(2지구)에서 각각 사업을 추진하고 있으나, 앞으로 신규발주는 사업소에서만 추진하여 일원화 예정