2020년

항만건설사업

해운항만과

(항만개발)

홍도항 남방파제 축조공사

	사업개요(’18～’21)
‣ 위 치 : 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 일원 ‣ 사 업 량 : 남방파제 60m, 북측선착장 보수 1식 등 ‣ 사 업 비 : 18,275백만원(’19년까지 3,479, ’20년 4,450, ’20년 이후 10,346) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 17. ~ ’22. 6. 3. * (1차분) ’19. 12. 17. ～ ’20. 12. 15. ‣ 시공회사 : ㈜도영 대표이사 김형민(구례소재) 등 2개사 ‣ 감리회사 : ㈜세일종합기술공사 대표이사 김정(목포소재) 등 3개사

지금까지 추진현황

❍ 공사착공 및 건설사업관리용역 착수	: '19. 12.

향후계획

❍ 가설사무실 축조 및 콘크리트 블록 제작	: '20. 1월~

	위 치 도

진도항 2단계 건설공사

	사업개요(’16～’20)
‣ 위 치 : 진도군 임회면 진도항 일원 ‣ 사 업 량 : 화물접안시설 200m, 준설 67만㎥, 진입도로 660m 등 ‣ 사 업 비 : 34,728백만원(’19년까지 26,670, ’20년 5,096, ’20년 이후 2,962) ‣ 사업기간 : ’16. 3. 8. ~ ’20. 9. 27. * (4차분) ’19. 2. 7. ～ ’20. 4. 6. ‣ 시공회사 : 해동건설㈜ 대표이사 박찬(여수 소재) 등 2개사 ‣ 감리회사 : ㈜건화 대표이사 최진상(경기도 소재) 등 3개사

지금까지 추진사항 – 총괄 89%, ’4차 94%

❍ 진도항 2단계 건설공사(4차분) 착공	: ’19. 2. 7.

향후계획

❍ 진도항 2단계 건설공사 최종 준공	: ’20. 9. 27.

	조 감 도

나로도항 물양장 개축공사

	사업개요(’19～’21)
‣ 위 치 : 고흥군 봉래면 신금리 나로도항 일원 ‣ 사업내용 : 물양장 개축 337m(B=13.5m), 박지준설 931㎥, 쇄빙탑 1개소 ‣ 사 업 비 : 9,973백만원(’19년까지 1,902, ’20년 4,091, ’21년 이후 3,980) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 10. ~ ’21. 12. 8. * (1차분) ’19. 12. 10. ～ ’20. 6. 8. ‣ 시공회사 : ㈜백산 대표이사 김호 (장성소재) ‣ 감리회사 : ㈜항도엔지니어링 대표이사 황기정(군산소재) 등 3개사

지금까지 추진현황

❍ 공사착공 및 건설사업관리용역 착수	: ’19. 12.

향후계획

❍ 가설사무실 축조 및 콘크리트 블록 제작	: ’20. 1월~

	위 치 도

물양장 확장

L=300m(B=13.5m)

땅끝항 여객터미널 신축공사

	사업개요(’19～’20)
‣ 위 치 : 해남군 송지면 송호리 땅끝항 일원 ‣ 공사내용 : 연안여객터미널*, 주차시설, 친수(휴게)공간 * 연면적 499.6㎡ / 매표소, 편의시설, 사무실 등 ‣ 사 업 비 : 3,227백만원(’19년까지 1,236, ’20년 1,991) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 24. ~ ’20. 12.12. * (1차분) ’19. 12. 24. ～ ’20. 5. 21. ‣ 시공회사 : 세울종합건설㈜ 대표이사 염대훈(나주소재) ‣ 감리회사 : 대진건축사사무소 대표이사 김정(목포소재)

지금까지 추진현황

❍ 공사착공 및 감리용역 착수	: ’19. 12.

향후계획

❍ 여객선터미널 신축공사 준공	: ’20. 12. 12.

	조 감 도