2020년

항만건설사업

해운항만과

(항만개발)

홍도항 남방파제 축조공사

	사업개요(’18～’21)
‣ 위 치 : 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 일원 ‣ 사 업 량 : 남방파제 60m, 북측선착장 보수 1식 등 ‣ 사 업 비 : 18,275백만원(’19년까지 540, ’20년 5,540, ’20년 이후 12,195) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 17. ~ ’22. 6. 3. * (2차분) ’20. 2. 3. ～ ’20. 12. 11. ‣ 시공회사 : ㈜도영 대표이사 김형민(구례소재) 등 2개사 ‣ 감리회사 : ㈜세일종합기술공사 대표이사 이호순(충남 천안) 등 3개사

지금까지 추진현황

❍ 1차분 준공(가설사무실 등)	: ’20.  6.

❍ 2차분 시행(TTP제거, 기초 굴착 등)	: ’20.  2.

향후계획

❍ 기초사석 부설, 콘크리트 블록 제작	: ’20. 9월~

	위 치 도

진도항 2단계 건설공사

	사업개요(’16～’20)
‣ 위 치 : 진도군 임회면 진도항 일원 ‣ 사 업 량 : 화물접안시설 200m, 준설 67만㎥, 진입도로 660m 등 ‣ 사 업 비 : 34,728백만원(’19년까지 26,670, ’20년 5,096, ’20년 이후 2,962) ‣ 사업기간 : ’16. 3. 8. ~ ’20. 11. 22. * (5차분) ’20. 4. 13. ～ ’20. 11. 22. ‣ 시공회사 : 해동건설㈜ 대표이사 박찬(여수 소재) 등 2개사 ‣ 감리회사 : ㈜건화 대표이사 최진상(경기도 소재) 등 3개사

지금까지 추진사항 – 총괄 92%, ’5차 11%

❍ 진도항 2단계 건설공사(4차분) 준공	: ’20. 6. 11.

❍ 진도항 2단계 건설공사(5차분) 착공	: ’20. 4. 13.

향후계획

❍ 진도항 2단계 건설공사 최종 준공	: ’20. 11. 22.

	조 감 도

나로도항 물양장 개축공사

	사업개요(’19～’21)
‣ 위 치 : 고흥군 봉래면 신금리 나로도항 일원 ‣ 사업내용 : 물양장 개축 337m(B=13.5m), 박지준설 931㎥, 쇄빙탑 1개소 ‣ 사 업 비 : 9,973백만원(’19년까지 1,902, ’20년 4,091, ’21년 이후 3,980) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 10. ~ ’21. 12. 8. * (2차분) ’20. 2. 27. ～ ’20. 12. 26. ‣ 시공회사 : ㈜백산 대표이사 김호 (장성소재) ‣ 감리회사 : ㈜항도엔지니어링 대표이사 황기정(전북 군산) 등 3개사

지금까지 추진현황

❍ 1차분 준공(가설사무실, 블록제작 등)	: ’20. 6. 3.

❍ 2차분 착공(연약지반처리, 준설 등)

향후계획

❍ 잔여 블록제작, 기초사석 투하 등	: ’20. 9월~

	위 치 도

물양장 확장

L=300m(B=13.5m)

땅끝항 여객터미널 신축공사

	사업개요(’19～’20)
‣ 위 치 : 해남군 송지면 송호리 땅끝항 일원 ‣ 공사내용 : 연안여객터미널*, 주차시설, 친수(휴게)공간 * 연면적 499.6㎡ / 매표소, 편의시설, 사무실 등 ‣ 사 업 비 : 3,174백만원(’19년까지 1,183, ’20년 1,991) ‣ 사업기간 : ’19. 12. 24. ~ ’20. 12. 22. * (1차분) ’19. 12. 24. ～ ’20. 5. 21. ‣ 시공회사 : 세울종합건설㈜ 대표이사 염대훈(나주소재) ‣ 감리회사 : 대진건축사사무소 대표이사 김정(목포소재)

지금까지 추진현황

❍ 땅끝항 여객선터미널 신축공사 1차분 준공     : ’20.  5.  21.

❍ 땅끝항 여객선터미널 신축공사 2차분 착공     : ’20.  3.  22.

향후계획

❍ 여객선터미널 신축공사 준공	: ’20. 12. 22.

	조 감 도