위험도로 구조개선사업

	사업개요(2014~2023)
- 총 73개소, 162,138백만원(국비 81,069, 지방비 81,069) - ○ 지 방 도: 37개소, 97,358백만원 ○ 시 군 도: 36개소, 64,780백만원 - 소요재원: 국고(광역․지역발전특별회계) 50%, 지방비 50% ※ 1차(‘04∼’13년) 위험도로 구조개선사업 추진 : 141개소, 1,137억원

□ 투자현황(중장기계획)

○ 대상지구 : 73개소, 88.0km, 1,620억원(국비 810, 지방비 810)

- 완료지구 :  9개소, 14.5km, 338억원

- 시 행 중 :  4개소, 8.60km, 360억원

- 미 시 행 : 60개소, 64.9km, 922억원

○ 년차별 투자 실적

(단위 : 개소, 억원)

사업량		총사업비	‘19년 까지	‘20년	‘21년 이후	비고
추진	미추진
13	60	1,620	535	57	1,028

* 준공: 여운재, 배산('16), 봉룡~세동, 남죽, 쌍태, 매산('17), 월선('18), 건모(‘19), 학곡(’19)

□ 2020년 추진

○ 위  치 : 신안, 장성, 광양, 고흥*(계속 3, 신규* 1)

○ 본예산 : 5,700백만원 [지특 2,850(50%), 도비 2,850(50%)]

- 본  청 시행 : 3지구 (5,300백만원)

- 사업소 시행 : 1지구 (  400백만원)

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업내용 : 선형개량, 도로 확포장, 우회도로, 안전시설 설치 등

□ 향후계획

○ 제2차(2014~2023년) 중장기 계획에 따라 사업추진

□ 2020년 추진계획

○ 예산 내시(행정안전부) : 5,700백만원(국비 2,850, 도비 2,850)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				공사기간	진도 (%)	시 공 자
			계	’19까지	’20년	’21이후
합 계	4지구	8.630	37,823	19,637	5,700	12,486
도로교통과 시행(3지구)		7.53	36,423	19,637	5,300	11,486
당숙재 도로확포장	신안 자은	1.66	8,368	3,696	3,084	1,588	’14.06.26.~ ’21.07.31.	45	금강건설㈜ 등 2개사
작은재 선형개량	장성 북일	2.88	13,555	4,968	1,764	6,823	’14.12.08.~ ’22.11.30.	40	국제건설 산업㈜
봉강 위험도로	광양 봉강	2.99	14,500	10,973	452	3,075	’15.12.16.~ ’20.11.24	90	양일건설㈜ 등 2개사
도로관리사업소 시행(2지구)		1.1	1,400	0	400	1,000
학곡지구 선형개량	고흥 두원	1.10	1,400	-	400	1,000	'20. 02. ~ '22. 02.	발주예정	신규

* 도로교통과(3지구)와 도로관리사업소(1지구)에서 각각 사업을 추진하고 있으나, 앞으로 신규발주는 사업소에서만 추진하여 일원화 예정