조선, 철강, 석유화학 등 주력산업 경쟁력 강화

□ 중점 추진사업

【조선분야】

① 해양케이블 시험연구센터 구축사업

- '14∼'19, 265억원(국비160, 지방비50, 민간55), 시험인증장비구축, 생산기술개발

② 조선해양유망기업 육성사업

- '14∼'18, 13.45억원(도비), 시제품 제작, 마케팅, 기술지원

③ 레저선박 부품‧기자재 시험인증지원센터 구축사업

- '16∼'20, 240억원(국비160, 지방비70, 민간10), 시험인증장비구축, 제품개발

【화학·철강분야】

① 주력산업 활력 추진단 구성·운영 : ’14. 7~12.

- 구성인원 : 교수, 협회 등 24명(철강 12, 석유화학 12)

- 주요내용 : 주력산업 발전전략 수립, 신규사업 발굴 및 보고회 개최 등

② 석유화학산업 사업(4개사업, 1,511억원)

○ 기능성 화학소재 클러스터 구축사업(‘15~’19 / 대선공약 )

- 위치/사업비 : 광양만권 세풍산단 內 / 1,310억원(국비 945)

○ 해양 융․복합 소재 산업화 사업(‘15~’20 / 광역간 협력사업)

- 주체/사업비 : 2개시도(부산+전남) 공동 / 81억원(국비 44)

○ 석유화학기반 고분자 산업 기업지원(‘15~’18 / 주력산업 기업지원 사업)

- 사업비 : 120억원(국비 88, 지방비 32)

○ 석유화학분야 기술개발(R&D) 기획 추진

③ 철강산업 사업(3개사업, 381억원)

○ 전남 뿌리기술지원센터 기반구축(‘15 ~ ’18)

- 사업비/위치 : 261억원(국비165, 지방비 96) / 순천, 영암

*뿌리산업 특화단지 지정 추진(순천 해룡산단, 영암 대불산단)

○ 금속 소재․가공 산업 기업지원(‘15 ~ ’18 / 주력산업 기업지원 사업)

- 사업비 : 120억원(국비 88, 지방비 32)

□ 연도별 추진일정

【조선분야】

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
해양케이블 시험연구센터 구축	계획	4,400 (17%)	7,500 (45%)	8,000 (75%)	4,300 (91%)	1,150 (96%)
	실적	3,050 (12%)	3,500 (25%)	-	-	-
조선해양유망기업 육성사업	계획	269 (20%)	269 (40%)	269 (60%)	269 (80%)	269 (100%)
	실적	269 (20%)	280 ((41%)	-	-	-
레저선박 부품‧기자재시험인증지원센터 구축사업	계획	-		6,870 (42%)	6,240 (68%)	3,970 (85%)
	실적	-	-	-	-	-

【화학·철강분야】

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
기능성 화학소재 클러스터 구축	계획	예타통과	기본 및 실시설계	건축 및 장비구축	건축 및 장비구축	준공 및 시운전
	실적	국비 확보 (25억원)
해양 융․복합 소재 산업화 사업	계획	예타 통과	장비구축 및 R&D	장비구축 및 R&D	장비구축 및 R&D	장비구축 및 R&D
	실적	예타 통과
석유화학기반 고분자 산업기업지원	계획	-	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)
	실적
철강 부산물 산업화 지원 기반구축	계획	기획 추진	정부사업에 공모
	실적
전남 뿌리기술지원센터 구축	계획	사업확정	기본 및 실시설계	건축 및 장비구축	건축 및 장비구축	준공 및 센터 운영
	실적	국비 확보 (5억원)
금속소재․ 가공산업 기업지원	계획	-	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)	기업지원 (30억원)
	실적
고기능성 금속소재 플랫폼 구축(예타)	계획	-	기획 및 완료	’16년 상반기 정부사업에 공모	-	-
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	289,894	198,373	41,556	30,586	19,379	-	12,428	8,432	2,670	383	943	-
2014	13,778	8,432	3,570	383	1,393	-	12,428	8,432	2,670	383	943	-
2015	65,799	43,111	10,779	6,703	5,206	-	144.2	101.2	42	-	-	-
2016	95,139	66,250	11,969	11,500	5,420	-	-	-	-	-	-	-
2017	62,909	45,020	7,969	6,200	3,720	-	-	-	-	-	-	-
2018.	35,589	25,000	4,869	3,500	2,220	-	-	-	-	-	-	-
2019	16,680	10,560	2,400	2,300	1,420	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자금액 : 25,784백만원(국비 17,130, 도비 3,337, 시군비 415, 민자 4,902)

철강산업과 석유화학산업을 연계하여 지속 가능한 성장기반 마련

□ 사업개요

○ 사업주관 : 특수목적 법인(포스코, GS칼텍스, 전남개발공사 등)

○ 사업내용 : 해저터널(길이 3.98km, 직경 3.8m)

- 광양제철 부생가스(CO, H₂, N₂)와 여수산단 부산물(질산, 염소) 교환

○ 사업비/기간 : 2,400억원/ 2016년∼2019년(양방향 굴착)

※ 기대효과 : 연간 1,200억원 원가 절감

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
광양-여수간 해저터널 건설	계획	사전 인허가 등	설계 및 착공	공사 중	공사 중	공사 중
	실적	인허가 등 사전 준비

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
2014	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
2015	39,600	-	-	-	39,600	-	-	-	-	-	-	-
2016	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
2017	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
2018.	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
2019	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-

백신산업 지원기반 집적화 추진

□ 중점 추진사업

① 생물의약연구원 내에 ‘세포배양 생산라인’ 확대 구축

- 생산라인 내부시설 클린룸 완공(528㎡), 필수장비 확보(41종 53대)

- 세포배양기반 백신의 비임상·임상시험용 시료 생산 지원

② 화순 생물의약산업단지 내에 ‘백신공장’ 신규 투자 확대

- 산업단지 내 기존기업 등을 대상으로 시설투자 확대 유도(646억원)

③ 산업통상자원부의 백신산업육성관련 ‘미생물실증지원센터’ 유치

- 화순 백신특구에 국제규격 수준의 백신생산 전용 위탁생산시설(CMO) 구축(950억원)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
세포배양 생산라인 확대구축	계획	클린룸 착공	클린룸 완공 장비확충 (27%)	장비 확충 (46%)	장비 확충 (65%)	장비 확충 (85%)
	실적	클린룸 40% 완료	공사변경 계약중
백산공장 신규투자 확대	계획	125억원 (20%)	125억원 (40%)	125억원 (60%)	125억원 (80%)	146억원 (100%)
	실적	405억원 (63%)	녹십자 투자협약체결 (1,113억원)
미생물 실증지원센터 (예타사업)	계획	예타 대상 심의 통과	예타 용역 대응 및 사업비 확보	부지매입 설계 및 착공	공사 추진	공사 추진
	실적	예타 대상 선정	예타 진행중

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	163,200	95,000	700	700	66,800		41,900	-	700	700	40,500
2014	13,900	-	700	700	12,500		41,900	-	700	700	40,500
2015	12,800	-	-	-	12,800
2016	25,300	12,300	-	-	13,000
2017	38,200	25,200	-	-	13,000
2018.	42,600	27,500	-	-	15,100
2019	30,400	30,000	-	-	400

※ 기투자금액 : 1,400백만원(국비 1,000, 도비 200, 시군비 200)

미래 첨단 우주항공산업 육성

□ 중점 추진사업

① 항공센터 비행시험평가 기반 확충(고흥만간척지 일원 / '13 ~ '19)

- 사업비/주관 : 223억원(국 180, 도 10, 군 33) / 산업부(한국항공우주연구원)

- 사업내용 : 비행시험 R&D, 활주로 구축(1,200m)

② 항공기 비행종합시험 인프라 개발 구축(고흥만간척지 일원 / '15 ~ ’19)

- 사업비/주관 : 394억원(국 296, 도 0, 군 98) / 국토부(항공안전기술원)

- 사업내용 : 통제탑, 격납고, 시험장비 구축 등

③ 과학로켓센터 건립(미래부, 고흥 우주․항공센터 일원 / '15 ~ ’18)

- 240억원(국 240) / 한국항공우주연구원 / 센터구축, 로켓개발 R&D 등

④ 항공센터 확장사업과 연계한 후속사업 발굴 및 국가사업 유치 추진

- 우주항공부품 시험평가 인프라(350억원), 항공 ICT 융합산업 육성(3,000억원 * 대구, 항우연 공동), 무인기 활용 과학영농 구현 다부처 기획(220억원) 등

□ 연도별 추진일정

사업명		구분	2014	2015	2016	2017	2018
국가 비행종합성능시험장	항공센터비행시험평가 기반확충	계획	기본계획	부지확보 실시설계	활주로구축, 비행시험R&D	활주로구축, 비행시험R&D	활주로구축, 비행시험R&D
		실적	기본계획	부지확보 실시설계 (추진중)	-	-	-
	항공기 비행종합시험 인프라 개발 구축	계획	기획연구	부지확보 실시설계	지상장비 구축	지상장비 구축	지상장비 구축
		실적	기획연구 기본계획	부지확보 실시설계 (추진중)	-	-	-
과학로켓 최적화 개발 지원		계획	기본계획	부지조성 로켓개발 R&D	센터구축 로켓개발 R&D	센터구축 로켓개발 R&D, 운용	센터구축 로켓개발 R&D, 운용
		실적	기본계획	실시설계 (준비중)	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	85,100	71,200	900	13,000	-	-	16,600	16,200	0	400	-	-
2014	1,300	1,200	-	100	-	-	1,400	1,200		200	-	-
2015	26,400	14,000	200	12,200	-	-	15,200	15,000		200	-	-
2016	25,500	24,800	350	350	-	-					-	-
2017	25,100	24,400	350	350	-	-					-	-
2018.	-	-	-	-	-	-					-	-
2019	6,800	6,800	-	-	-	-					-	-

※ 기투자금액 : 600백만원

신재생에너지사업 본격 추진

□ 중점 추진사업

【기존사업】5개 사업,  7,785억원

① 신재생에너지 공공보급사업(‘14.～’18년/ 421억원)

- 대상/ 지원 : 시군 공공건물 및 사회복지시설 등/ 국비 50%, 지방비 50%

② 신재생에너지 민간보급사업(‘14.～’18년/ 382억원)

- 대상/ 지원 : 4,800가구/ 국비 50%, 지방비 20%, 자부담 30%

③ 90㎿ 태양광발전 민자사업(‘14.～’18년/ 3,130억원)

- 대상 : 도, 시군 공공건물, 주차장, 상하수도시설 등(1단계 완료)

④ 풍력시스템 Test-Bed센터 구축 : 총 100㎿ 규모(영광 백수읍)

- 1단계 사업(‘11.∼’14년) : 20㎿, 135억원 * 2∼3단계는 1단계 실증후 추진

⑤ 에너지 자립 섬 조성 : 28개 섬, 1,654억원

- 대상 섬 : 해남 삼마도, 진도 가사도, 동거차도, 신안 비금도 등

【신규사업】3개 사업,  1,160억원

① 해양에너지 실해역 실증시험장 유치(‘15.∼’18년/ 400억원)

- ’16년 사업공모, ’16.∼’18년 실해역 시험장 건립, '18년 실증시험장 가동

② 전기차(충전기) 보급 스마트그리드 확산사업(‘14.∼’18년/ 6개지역 / 500억원)

- 추진기관 : 전남, 광주, (주)KT 컨소시엄(전국 16개 시도에 8개 컨소시엄 구성)

③ 마이크로그리드 연구․지원센터(‘16.∼’18년/ 260억원)

- 섬 지역 마이크로그리드 구축, DB구축 및 연구․개발지원 등

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
신재생에너지 공공보급사업	계획	16개소	22개소	72개소	79개소	87개소
	실적	22개소	-	-	-	-
신재생에너지 민간보급사업	계획	1,000호	1,100호	1,200호	1,300호	1,400호
	실적	822호	-	-	-	-
90㎿ 태양광발전 민자사업	계획	18㎿	18㎿	18㎿	18㎿	18㎿
	실적	18㎿	-	-	-	-
풍력시스템 Test-Bed센터 구축	계획	20㎿	2단계 건의	2단계 공모	2단계 20㎿구축	2단계 완료
	실적	20㎿	-	-	-	-
에너지 자립 섬 조성	계획	17개 섬	3개 섬	3개 섬	3개 섬	2개 섬
	실적	18개 섬	-	-	-	-
해양에너지 실해역 실증시험장 유치	계획	정부건의	공모예정	시험장건립	시험장건립	시험장 가동
	실적	국고건의	‘16년 국고건의	-	-	-
전기차(충전기) 보급 스마트그리드 확산사업	계획	정부공모	사업확정 및 인프라 구축(6개소)
	실적	예비타당성심의중	예비타당성심의중	-	-	-
마이크로그리드 연구․지원센터	계획	정부건의	공모예정	기본실시설계	센터건립	센터건립
	실적	2회	‘16년 국고건의	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	637,583	205,293	32,154	32,044	368,092	-	567,205	205,568	32,501	31,336	297,800	-
2014	25,389	13,578	2,060	5,319	4,432		32,464	23,706	2,099	5,659	1,000
2015	110,426	33,890	2,568	5,808	68,160		32,973	24,037	2,876	4,760	1,300
2016	123,740	44,105	5,578	6,808	67,249
2017	142,410	56,160	9,978	6,809	69,463
2018.	112,518	37,860	7,970	6,600	60,088
2019	123,100	19,700	4,000	700	98,700

※ 기투자금액 : 256,884백만원

해상풍력발전의 메카 도약

□ 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2010 ～ 2030년

ㅇ 사업내용

- 육･해상 5GW 풍력발전단지(육상1, 해상4) 조성

- 풍력 기자재 기업유치 및 연관산업 육성을 통한 풍력산업클러스터 조성

ㅇ 사업비 : 1조 4,250억원(민자)

* 임기 이후 사업비는 경기상황, 정부 에너지정책 등에 따라 가변적으로 현재 18조 5,000억원 예상

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
육･해상 5GW 풍력발전단지 조성	계획	50㎿	100㎿	100㎿	100㎿	100㎿ (해상)
	실적	80㎿	40㎿	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	1,425,000				1,425,000		335,000				335,000
2014	125,000				125,000		200,000				200,000
2015	250,000				250,000		135,000				135,000
2016	250,000				250,000		-				-
2017	400,000				400,000		-				-
2018	400,000				400,000		-				-

※ 기투자금액 : 200,390백만원

전력계통망 연결 추진

□ 중점 추진사업

○ 한전 154㎸변전소 송전계통 접속용량 확대·증설

- 접속용량 : 뱅크(20㎿⇒40㎿), 변전소(40㎿⇒75㎿)

○ 서남해안 전력계통 연계망 구축 타당성 조사 용역 추진

○ 해상풍력시범단지(300㎿) 조성을 위한 안좌변전소 증설

- 변전소/송전선로 : 154kV/500MVA / 송전선로 154kV/3상/2회선 13㎞

- 소요 사업비 : 약 500억 원(국비 400, 민자 100)

○ 대용량 345㎸급 변전소 및 송전선로 구축

- 위치 / 규모 : 안좌변전소 / 신강진 ↔ 신안 안좌 간 80km

- 사업비 : 2,050억원(변전소 450, 송전선로 1,600)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
154㎸변전소 송전계통 접속용량 확대·증설	계획	건의
	실적	완료
전력계통 연계망 구축 타당성 조사 용역	계획		타당성 조사 용역 실시		건의
	실적
해상풍력시범단지(300㎿)조성을 위한 안좌 변전소 증설	계획	건의	건의	건의	건의	건의
	실적	1회	1회
대용량 345㎸급 변전소 및 송전선로 구축	계획		건의	건의	건의	건의
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	955,080	945,000	80		10,000
2014
2015	80		80				80		80
2016	25,000	20,000			5,000
2017	25,000	20,000			5,000
2018.	155,000	155,000
2019	750,000	750,000

전남 사회적경제 전용 신용보증상품 운용

□ 주요내용

○ 대    상 : 사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업

○ 출연금액/보증규모 : 3억원 / 30억원

○ 보증한도 : 기업당 2억원 이내(운전자금과 시설자금 포함)

○ 보증기간 : 운전자금 2년 이내(1~2%), 시설자금 8년 이내(3%)

□ 연도별 추진일정

(단위 : 백만원)

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
사회적경제 전용 신용보증상품 운용	계획	-	300	300	300	300
	실적	-	300

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	1,200		1,200				300		300
2014
2015	300		300				300		300
2016	300		300
2017	300		300
2018.	300		300
2019	-		-

저비용 고수익 농업기술 창출

□ 중점 추진사업

① 농산물 생산비 절감 기획·추진·평가 전담부서 신설 및 운영

- 생산비 절감 모형개발, 수익성 지표개발, 실용화 지원 등

② 작목별 생산비 절감 패키지 기술개발 및 보급

- 기술개발(20작목) : 식량작물 5, 특용작물 2, 채소 6, 과수 5, 축산 2

- 기술보급 : 생산비 절감 시범단지 육성(매년 38개소)

③ 분야별 품목별 생산비 절감 우수사례 발굴 및 의식 확산

- 우수사례 조사 발굴(50사례), 교육, 홍보 등을 통한 사례 확산

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
작목별 생산비 절감 경영모델 개발	계획	3	5	5	5	2
	실적	0	7
생산비 절감 우수사례 발굴 확산	계획	10	15	15	5	5
	실적	5
생산비 절감 시범단지 육성	계획	-	38	38	38	38
	실적	13	33

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	43,420	15,799	11,460	16,098			13,196	5,473	1,701	5,622	0	400
2014	5,799	2,555	1,203	2,041			5,799	2,555	1,203	2,041
2015	7,871	2,812	2,113	2,946			7,397	2,918	498	3,581		400
2016	8,715	3,091	2,354	3,270
2017	9,829	3,402	2,710	3,717
2018	6,406	1,971	1,940	2,495
2019	4,800	1,968	1,140	1,629

※ 기투자금액 : 11,598백만원

축산물 유통구조 혁신거점 육성

□ 사업개요

○ 위    치 : 장성군 삼계면 일대

○ 사업기간 : 2015.∼2017.(3년)

○ 사 업 비 : 300억원(농협 경제사업 활성화 자금)

- 부지 매입비, 도축․가공․판매시설 신축 및 기계장비 등

※ 사업비 변경 : 600백만원 → 300백만원

○ 사업규모 : 현대식 도축․가공․유통·판매 등 종합시스템 구축

- 1일 도축 능력 : 소 200두

○ 운영 주체 : 농협경제지주 주식회사

○ 추진체계

- 도, 시·군 : 건립 예정부지 확보 등 행정적 지원

- 농협경제지주(주) : 종합유통센터 건립 예정지 확정 및 추진

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
축산물종합 유통센터 건립	계획		부지확보, 설계		완공 (1개소)
	실적		-		-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	30,000				30,000
2014
2015	10,000				10,000
2016	20,000				20,000
2017
2018.
2019

수산업의 저비용․고소득 구조로 개편

□ 중점 추진사업

① 저비용 고소득 구조개편(4개 분야 15종, 3,727억원)

- 양식시설 개선 및 에너지 절감 등을 통한 생산비 절감 사업 : 5종 3,417억원

- 어촌계 조직 활성화 유도 : 3종 296억원

- 수산업의 생산성 증가와 고령화 대비 규모화 추진 : 4종

- 저비용 고수익 수산기술 개발 : 3종 14억원

② 저비용 고소득 실현을 위한 양식수산물 생산비 절감 연구 및 성공사례 발굴 후 어업인 지도 및 홍보

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
양식시설 현대화	계획	198개소 442억원	200개소 450억원	200개소 450억원	230개소 480억원	250개소 480억원
	실적	198개소 510억원	200개소 518억원
친환경에너지 보급사업	계획	64개소 132억원	55개소 167억원	70개소 175억원	70개소 175억원	70개소 175억원
	실적	68개소 139억원	103개소 153억원
순환여과식 양식시설	계획	-	6개소 32억원	6개소 32억원	6개소 32억원	6개소 30억원
	실적
미생물활용 무환수 양식	계획	-	5개소 10억원	5개소 10억원	5개소 10억원	-
	실적
수산장비임대사업	계획	2개소 15억원	2개소 30억원	2개소 30억원	2개소 30억원	2개소 30억원
	실적	2개소 15억원	2개소 12억원
자율관리공동체	계획	52개소 56억원	55개소 60억원	55개소 60억원	55개소 60억원	55개소 60억원
	실적	52개소 56억원	56개소 53억원
어촌계 온라인 통합 쇼핑몰 구축	계획	-	어촌계별 생산조사	산지직거래 협약	통합쇼핑몰 구축	쇼핑몰 홍보
	실적	-	-
전복생산성 향상 신품종 개발	계획	빌딩식 다층수조시설	선발교잡유전육종	고수온에 강한 품종개발	표준모델 개발	-
	실적	예산 신청	예산 확보 12.5억원
고수온에 강한 김, 다시마 등 해조류 이식 연구개발	계획	중국다시마 이식연구개발	김 신품종 연구개발5종	지속연구 개발	어장에 맞는 다시마 신품종개발	김 신품종 5개품목개발
	실적	다시마 1종 개발 등록	-
꼬막인공종묘 기술 개발 등	계획	중간육성단지2개소	중간육성단지2개소	중간육성단지2개소	중간육성단지2개소
	실적	단지조성 4개소	단지조성 2개소

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	559,700	124,800	4,800	66,300	261,000	102,800	148,308	25,835	1,238	11,700	18,100	82,200
2014	64,685	11,500	385	5,300	35,400	12,100	72,376	12,850	491	5,500	13,500	40,800
2015	75,250	15,800	950	7,800	36,000	14,700	75,932	12,985	747	6,200	14,600	41,400
2016	75,050	16,300	950	8,000	36,000	14,800
2017	79,050	16,300	950	8,000	38,400	15,400
2018.	77,665	15,900	665	7,900	38,400	14,800
2019	187,000	49,000	900	29,300	76,800	31,000

친환경농산물 종합물류센터 건립

□ 사업개요

○ 기간/위치 : 2012년 ~ 2016년(5년)/나주시 산포면 내기리 일원

○ 사업규모 : 부지 30천㎡, 건축 연면적 14천㎡

○ 사 업 비 : 289억원(국비 145, 도비 72, 시비 72)

- 임기내 사업비 : 277억원(국비 139, 도비 69, 시비 69)

○ 사업내용 : 선별․포장시설, 저온저장고, 집배송장 등

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
친환경농산물 종합물류센터 건립	계획	설계, 착공	건축, 설비	완공	운영	운영
	실적	-	설계 완료

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	27,700	13,850	6,925	6,925			27,700	13,850	6,925	6,925
2014	9,440	4,720	2,360	2,360			9,440	4,720	2,360	2,360
2015	5,944	2,972	1,486	1,486			5,944	2,972	1,486	1,486
2016	12,316	6,158	3,079	3,079

※ 기투자금액 : 1,152백만원

유기농 선도지역 육성

□ 사업개요

① 친환경농업 선도단지 조성

- 사 업 량 : '14.) 140ha  → '15.) 280 → '16.) 420 →'17.) 560 → '18.) 700

- 사 업 비 : '14.) 1,140백만원 → '15.) 1,280 → '16.) 1,420 → '17.) 1,560 → '18.) 1,700

- 사업내용 : 유기농 자재 생산 시설·장비, 친환경농업 교육·장비 등 지원

② 친환경농산물 잔류농약 검사·지원  ※ 건당 220천원

- 사 업 량 : '14.) 500건  → '15.) 600 → '16.) 700 → '17.) 700 → '18.) 700'

- 사 업 비 : '14.) 110백만원 → '15.) 132 → '16.) 154 → '17.) 154 → '18.) 154

- 사업내용 : 잔류농약 검사에 필요한 검사비용 지원

③ 친환경 전문농업인 양성

- 사 업 량 : '14.) 300명  → '15.) 600 → '16.) 800 → '17.) 900 → '18.) 1,000

- 사 업 비 : 비예산

- 사업내용 : 유기농업의 필요성, 신뢰제고 방안 등 농업인 의식교육

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
친환경농업 선도단지 조성(ha)	계획	140	280	420	560	350
	실적	369	-	-	-	-
친환경농산물 잔류농약검사 지원(건)	계획	500	600	700	700	350
	실적	445	-	-	-	-
친환경 전문농업인 양성(명)	계획	300	600	800	900	500
	실적	1,224	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	7,804	1,500	1,170	4,134		1,000	8,489	458	1,568	6,026		437
2014	1,250	300	178	572		200	3,586	248	674	2,499		165
2015	1,412	300	206	706		200	4,903	210	894	3,527		272
2016	1,574	300	234	840		200
2017	1,714	300	262	952		200
2018.	1,854	300	290	1,064		200
2019

※ 소요비용 추계 : 10ha당 111백만원(선도단지 육성 101, 잔류농약검사 10)

농번기 마을 공동급식사업 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 10.∼계속

○ 사 업 비 : 7,388백만원(도비 2,216, 시군비 5,172)

○ 사 업 량 : 1,265개 마을

○ 급식기간 : 25일 이내(이앙기·수확기)

○ 지원내용 : 조리원 인건비, 부식비 일부 지원

□ 연도별 추진일정

(단위 : 개소)

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
농번기 마을공동급식 지원(개소수)	계획	253	506	759	1,012	1,265
	실적	253

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	7,388		2,216	5,172			1,316		395	921
2014	304		91	213			304		91	213
2015	1,012		304	708			1,012		304	708
2016	1,518		455	1,063
2017	2,024		607	1,417
2018.	1,266		380	886
2019	1264		379	885

대규모 어업기지 조성

□ 중점 추진사업

① 수출양식단지(전복 3, 해삼 1)조성으로 해외시장 진출 기지화

- 전복 섬(3개소, 405억원), 해삼 섬(1개소, 30억원)

② 대규모 해수양식단지 조성으로 고부가가치 양식품종의 안정적인 생산

- 연어류 양식단지 조성(1개소, 100억원)

- 어·패류 융복합육상양식단지 조성(3개소, 250억원)

- 대규모 패류 중간육성단지조성 등(2개소, 20억원)

③ 내수면 대규모 양식단지 조성

- 고부가가치어종 내수면 양식단지 조성(1개소, 70억원)

④ 해수면 양식어장 재배치

- 어·패류 양식어장 외해 재배치(집적․규모화) 추진(5개소, 50억원)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
수출양식단지 조성 (전복, 해삼)	계획	전복섬 1개소 (105억원)	-	전복섬 1개소 (150억원) 해삼섬 기본설계등 (15억원)	전복섬 1개소 (150억원) 해삼섬 1개소 (15억원)	-
	실적	전복섬 1개소 (105억원)
친환경 연어류 생산단지조성	계획	-	기본설계 기초공사 등 (20억원)	양식장 건립 80억원	-	-
	실적	-	-
재해대비 어·패류 융복합육상양식 단지 조성	계획	타당성 조사용역 (해수부)	-	기본설계 기초공사 등 (50억원)	어류 1개소 (100억원) 패류 2개소 (100억원)	-
	실적	-	2개소 40억원
광역권 패류종묘 생산단지	계획	패류종묘공급우량품종개발 (6억원)	패류중간육성장조성 (7억원)	패류중간육성장조성 (7억원)	-	-
	실적	사업자 선정 (21억원)
내수면 대규모 양식단지 조성	계획	-	-	기본설계 등 (10억원)	양식장 건립 (30억원)	양식장 건립 (30억원)
	실적	-	1개소 (설계완료)
양식어장 재배치	계획	37.5ha	30ha	30ha	30ha	22.5ha
	실적	47ha (6억원)	87ha (29억원)

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	92,500	37,600	10,100	21,600	23,200	-	18,415	9,040	5,500	2,360	1,515	-
2014	12,400	6,200	5,300	400	500	-	13,225	7,140	5,500	460	125	-
2015	3,700	1,500	200	800	1,200	-	5,190	1,900	-	1,900	1,390	-
2016	36,700	14,200	1,800	9,700	11,000	-
2017	36,000	14,000	2,100	9,700	10,200	-	-	-	-	-	-	-
2018.	3,700	1,700	700	1,000	300	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

노후어선 현대화사업 추진

□ 중점 추진사업

① (연근해어선) 고효율 어선유류절감장비 지원

- 사업규모 : 830척, 196억원(국비 30%, 시군비 30%, 민자 40%)

- 유류절감장치, LED燈, 기관·장비·설비, 전기추진기 보급

② (근해어선) 근해 노후어선 현대화 사업(20톤급)

- 사업규모 : 20척, 120억원(국비 30%, 시군비 20%, 민자 50%)

- 어선건조 및 기관, 어로장비 등 설치 지원

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
고효율어선 유류 절감장비 지원 사업	계획	200척	170척	190척	190척	80척
	실적	327척	141척	-	-	-
근해노후어선 현대화사업	계획	-	-	해수부 건의	10척	10척
	실적	-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	41,600	12,500	-	10,700	18,400	-	6,676	2,003	-	2,003	2,670	-
2014	3,600	1,100	-	1,100	1,400	-	3,610	1,083	-	1,083	1,444	-
2015	4,000	1,200	-	1,200	1,600	-	3,066	920	-	920	1,226	-
2016	4,000	1,200	-	1,200	1,600	-	-	-	-	-	-	-
2017	10,000	3,000	-	2,400	4,600	-	-	-	-	-	-	-
2018.	10,000	3,000	-	2,400	4,600	-	-	-	-	-	-	-
2019	10,000	3,000	-	2,400	4,600	-	-	-	-	-	-	-

섬․갯벌 등 관광명소 조성

□ 중점 추진사업

①「가고 싶은 섬」가꾸기 추진

- 기본방향 : 섬의 정체성을 유지․보존하면서 주민의 적극적인 참여를 유도하는 섬 가꾸기 추진(24개 섬 / '15년 6개 섬, '16～'24년 매년 2개 섬 선정)

② 섬 자원 데이터베이스 구축

- 도내 유‧무인도서 기본현황 정리, 환경‧생태‧문화자원 조사 등

③ 도서종합개발사업

- 물양장, 연륙‧연도교 등 섬 지역 생산‧소득 및 생활 기반시설 정비‧확충

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
가고 싶은 섬 가꾸기	계획	6개 섬	2개 섬	2개 섬	2개 섬	12개 섬
	실적
섬자원 데이터베이스 구축	계획	구축용역	구축	-	-	-
	실적
도서종합개발사업	계획	157건	230건	259건	4차계획 수립 후	4차계획 수립 후
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	490,216	314,026	88,345	87,845			195,461	151,601	22,680	21,180
2014	104,710	81,274	11,718	11,718			104,710	81,274	11,718	11,718
2015	94,551	70,327	12,362	11,862			94,551	70,327	12,362	11,862
2016	107,567	82,179	12,694	12,694
2017	106,588	80,246	13,171	13,171
2018.	9,600		4,800	4,800
2019	67,200		33,600	33,600

중국관광객 유치 활동 전개

□ 중점 추진사업

① 중국관광객 유치 기반 조성

○ 요우커 친화적 여행환경 조성(중국어관광안내센터 운영 등)

○ 전용 숙박시설「굿스테이」모텔 육성(중저가, 트윈침대)

○ 쇼핑 특화거리 조성(목포 사후면세점거리) 등 쇼핑환경 개선

○ 전용 음식점 집중 육성(다국어 메뉴판, 입식의자)

○ 중국 전용 특구섬(차이나 아일랜드) 지정 - 장기전략

② 특화 여행상품 개발·운영

○ 정기성 전세기 확대 및 크루즈 관광객 유치(1,110회/76항차)

○ 웨딩촬영, 골프투어 등 프리미엄 상품운영

○ 의료클러스터 구축 등 의료관광 활성화

○ 여성 대상 뷰티·미용체험상품 운영(여성관광객 비중 60.3%)

○ 농·어촌 체험 등 농가락(農家樂) 상품개발

○ 중국 인연지역 견학상품 개발(주자묘, 정율성생가, 황조별묘 등 연계)

③ 전략적 홍보마케팅

○ 한류를 이용한 중국 온·오프라인 홍보마케팅

○ 온라인 바이럴 홍보(블로그, 위쳇, 웨이보), 프로모션 등 마케팅 강화

○ 관광공사, 보좌관, 자매도시와 네트워킹으로 교류 확대

○ 중국 중서부 내륙지역 대상 현지 접점마케팅 강화

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	합계	2014	2015	2016	2017	2018
정기성 전세기 유치	계획	1,110회	160회	200회	250회	250회	150회
	실적	176회	176회	152회	-	-	-
크루즈 유치	계획	76항차	14항차	15항차	15항차	15항차	7항차
	실적	14항차	14항차	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	13,700		13,700				3,216		3,216
2014	1,700		1,700				1,498		1,498
2015	3,000		3,000				1,718		1,718
2016	3,000		3,000
2016	3,000		3,000
2018.	1,500		1,500
2019	1,500		1,500

※ 기투자금액('13년) : 1,200백만원

주민소득 증대와 연계한 축제 운영

□ 중점 추진사업

① 입장료, 판매수입 등 직접 수입 확대 : 축제예산의 10%→20%(증 10%)

② 연예인 공연 등 낭비성 예산 절감 : 축제예산의 8%→5%(감 3%)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
1시군 1대표축제 운영	계획	20회	20회	20회	20회	20회
	실적	15회	17회
도 관리축제 홍보	계획	4회	4회	4회	4회	4회
	실적	4회	3회
도 주관축제 운영	계획	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	2회

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합 계	80,216	4,933	5,543	69,740			29,757	1,997	2,200	25,560
2014	14,777	897	1,100	12,780			14,777	897	1,100	12,780
2015	14,777	897	1,100	12,780			14,980	1,100	1,100	12,780
2016	14,777	897	1,100	12,780
2017	14,777	897	1,100	12,780
2018	6,331	448	43	5,840
2019	14,777	897	1,100	12,780

섬진강 기차마을 중심 체류형 관광클러스터 조성

□ 중점 추진사업

① 관광자원시설 확충 : 8개소(역사·문화 5, 자연·생태 3)

- 역사·문화 : 심청 효테마파크, 유팽로 역사촌, 청계동 임란의병 훈련체험장, 기차마을 추억여행 체험관, 도깨비 체험관

- 자연·생태 : 압록 유원지 관광명소화, 섬진강 출렁다리, 국제 에코 힐링파크

② 관광숙박시설 확충·정비

- 가족호텔, 굿스테이, 관광펜션 등 중·저가 숙박시설 확충

- 개별 및 가족 관광객을 위한 전통한옥, 민박, 야영장 등

③ 체류형 관광상품 개발․운영

- 남도 명품여행(10개 상품), 수학여행(연간 11천명), 남도한바퀴 상품 지속 운영

- 곡성과 구례군의 관광지와 체험프로그램을 연계한 여행상품 구성, 홍보

④ 관광두레 육성 및 창업 유도

- 섬진강 도깨비 마을, 힐링푸드 연구소, 주민여행사 등 7개 조직 발굴 완료

- 육성조직별 사업계획 컨설팅 후 관광두레기업 법인화 및 상품 운영

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
관광자원시설 확충	계획	-	1건	2건	3건	2건
	실적	-	1건	-	-	-
숙박시설 확충	계획	-	-	-	-	2건
	실적	-	-	-	-	-
관광두레 육성조직 관리	계획	7개	7개	7개	7개	7개
	실적	7개

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	72,974	40,619	-	28,430	3,925	-	16,030	9,060	-	6,970	-	-
2014	8,943	4,850	-	4,093	-	-	8,943	4,850	-	4,093	-	-
2015	7,160	4,256	-	2,904	-	-	7,087	4,210	-	2,877	-	-
2016	20,014	12,008	-	8,006	-	-			-		-	-
2017	22,107	11,910	-	8,697	1,500	-			-		-	-
2018	14,750	7,595	-	4,730	2,425	-			-		-	-

※ 기투자금액('13년) : 15,026백만원

2015 담양세계대나무박람회 지원

□ 박람회 개요

○ 주    최 : 전라남도, 담양군, 산림청

○ 개최기간 : 2015. 9. 17. ~ 10. 31.(45일간)

○ 장    소 : 담양군 담양읍 죽녹원·전남 도립대 일원

○ 규    모 : 부지 313천㎡(전시관 면적 18천㎡)

○ 주    제 : “대숲에서 찾은 녹색 미래”

○ 관람목표 : 90만명(내국인 88, 외국인 2)

○ 사 업 비 : 14,500백만원(지특 6,850, 도비 400, 군비 7,250)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
박람회 개최지원	계획	98억원	47억원
	실적	98억원	47억원

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획				예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	합계	국비	도비	시군비
합계	10,900	5,350		5,550	10,900	5,350		5,550
2014	6,190	3,095		3,095	6,190	3,095		3,095
2015	4,710	2,255		2,455	4,710	2,255		2,455
2016
2017
2018.
2019

※ 기투자 금액 : 3,600백만원(국비 1,500, 도비 400, 군비 1,700)

축령산 편백숲 산림치유마을 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015.∼2018.(4년간)

○ 대상마을 : 4개 마을(서삼면 추암·모암·대덕, 북일면 문암)

○ 사 업 비 : 5,305백만원(국비 565, 도비 108, 군비 192, 기타 4,440)

※ 사업비 변경 : 2,281백만원 → 5,305백만원

○ 사업내용 : 지역주민 치유리더 육성, 산림치유 음식개발, 편백숲 휴양타운 조성, 친환경임산물 재배 등

※ 축령산 현황 : 1,766ha (편백 763, 삼나무 444, 천연림 559)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
산림치유마을 조성 (4개 마을)	계획		리더육성 12명 산채재배지원 1식 치유음식개발 1식	리더육성 12명 휴양타운조성 1식	리더육성 12명 산채재배지원 1식	리더육성 12명 산채재배지원 1식
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	원전기금
합계	5,305	565	108	192		4,440	4,230	30	-	-		4,200
2014	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
2015	295	185	30	20		60	4,230	30	-	-		4,200
2016	4,470	180	10	20		4,260	-	-	-	-		-
2017	270	100	34	76		60	-	-	-	-		-
2018	270	100	34	76		60	-	-	-	-		-
2019							-	-	-	-		-

지리산 산림복합휴양단지 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014.∼2017.(4년)

○ 사 업 량 : 13종(휴양·치유/교육·체험/위락·문화의 숲 등)

○ 사 업 비 : 69,367백만원(국비 33,031, 도비 5,742, 군비 30,594)

※ 사업비 변경 : 59,700백만원 → 69,397백만원

※ 지리산 국립공원 지정 50주년(2017년)에 맞춰 숲 체험과 휴양기능을 갖춘 산림휴양단지 조성

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
구례자연휴양림조성	계획	34㏊	-	-	-	-
	실적	34ha	-	-	-	-
용냇골자연휴양림조성	계획	기본계획	실시설계	조성공사1차	조성공사2차	-
	실적	기본계획	-	-	-	-
숲속수목가옥조성	계획	8동	2동	-	-	-
	실적	8동	-	-	-	-
오산선바위 구름다리설치	계획	L=56m	-	-	-	-
	실적	L=56m	-	-	-	-
야생화테마랜드조성	계획	23㏊	-	-	-	-
	실적	23㏊	-	-	-	-
구례수목원조성	계획	54ha	-	-	-	-
	실적	54ha	-	-	-	-
백두대간 생태교육장조성	계획	1㏊	1㏊	-	-	-
	실적	1㏊	-	-	-	-
목재문화체험장 조성	계획	조성공사1차	조성공사2차	조성공사3차	-	-
	실적	조성공사1차
구례생태숲 조성	계획	155㏊	-	-	-	-
	실적	155㏊	-	-	-	-
지리산 자생식물원조성	계획	15㏊	-	-	-	-
	실적	15㏊	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획				예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	합계	국비	도비	시군비
합계	69,367	33,031	5,742	30,594	20,002	10,420	1,260	8,322
2014	51,326	23,081	3,782	24,463	11,222	5,170	650	5,402
2015	8,230	4,650	685	2,895	8,780	5,250	610	2,920
2016	3,311	2,050	300	961
2017	6,500	3,250	975	2,275
2018.
2019	-	-	-	-

※ 기투자금액 : 38,698백만원

빛가람혁신도시 활성화 방안

□ 중점 추진사업

① 혁신도시 이전기관 조기정착 지원체제 마련

- 공공기관협의회 및 실무위원회 정기 운영

- 지역공동체 프로그램 발굴 및 운영, 빛가람 한마음 행사

② 정주․교육여건 조성 및 명품도시 기반 구축

- 이전기관 임직원의 안정적 정착을 위한 공동주택 적기 공급(총 17,952세대)

- 환경친화적인 스쿨컴플렉스 건립 등 자족형 교육거점 기반 구축

- 혁신도시 접근성 강화를 위한 진입도로(4개소) 조기 개통

입주기관과 연계한 지역발전 협력사업 추진

- 산학연 클러스터 구축 및 투자유치, 산학연 유치지원센터 설립

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	'14	'15	'16	'17	'18
공공기관장협의회 개최	계획	1	2	2	2	2
	실적	1	1
공동주택 적기 공급	계획	2,255	3,817	5,468	6,412
	실적	2,255
환경친화적 학교 건립	계획	4		2	4	3
	실적	4	1
진입도로 조기 개통	계획	2	1	1
	실적	2	1
산학연 클러스터 투자유치 (분양률, %)	계획	40%	20%	15%	15%	10%
	실적	38.5%	24.3%
산학연 유치지원센터 설립	계획			착공	완공
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	127,778	17,379	30,902	30,397	49,100		36,952	1,683	4,902	7,997	22,370
2014	7,560	83	107	-	7,370	-	7,560	83	107	-	7,370	-
2015	29,392	1,600	4,795	7,997	15,000	-	29,392	1,600	4,795	7,997	15,000
2016	61,335	9,155	13,000	12,450	26,730	-	-	-	-	-	-	-
2017	29,491	6,541	13,000	9,950	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자금액 : 13,174백만원

삼포지구 모터스포츠산업 클러스터 조성

□ 중점 추진사업

① 차부품 고급브랜드화 연구개발사업

- 기술개발 : F1급 타이어 개발 등 과제 수행(5개)

- 기반구축 : 연구개발센터 건립, 전용장비 도입(8종), 평가법 개발(5종)

② 튜닝산업 지원시스템 구축사업

- 튜닝부품 시험․평가용 장비 구축(21종), 기업지원동 건립, 평가법 개발(10종)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	합계	2014	2015	2016	2017	2018
고성능 자동차 핵심기술 연구개발센터 건립	계획	2동	설계	건립	조경
	실적	설계	설계
전용장비 도입(8종)	계획	8종		1종	3종	4종
	실적
평가법 개발(5종)	계획	5종				5종
	실적
튜닝부품 시험/평가용 장비 구축(21종)	계획	21종		1종	6종	6종	8종
	실적
기업지원동 건립	계획	1동			설계,건립
	실적
튜닝부품 시험/평가법 개발(10종)	계획	10종				4종	6종
	실적
튜닝부품 시험평가동 건립	계획	1동		설계	건립
	실적

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	109,878	70,255	24,311	-	15,312	-	43,563	22,761	17,296	-	3,506	-
2014	12,066	5,200	5,060	-	1,806	-	16,295	5,200	9,622	-	1,473	-
2015	55,461	35,208	13,500	-	6,753	-	27,268	17,561	7,674	-	2,033	-
2016	32,581	21,577	4,251	-	6,753	-
2017	9,770	8,270	1,500	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-

※ 기투자금액 : 7,010백만원(국 2,000, 도 3,407, 민 1,603)

연륙․연도교 조기완공 및 착공

□ 중점 추진사업    ※ 사업비 변경 : 27,304억원 → 27,337억원

① 신안 다이아몬드제도 도로망 조기 구축

- 새천년대교('10～'18) 2017년 조기 완공 : 5,205억원, L=10.8km

- 미착공 구간 연도교 조기착공(중장기 과제)

․암태～비금 : 5,421억원, L=6.4km(해상교량 2개소)

․도초～하의: 2,711억원, L=3.24km(해상교량 3개소)

② 국도 77호선 연륙․연도교 조기 완공

- 여수～고흥간 연륙 연도교('04.～'19.) 조기 완공

․적금～영남 : L= 3.0km, 2,652억원(해상교량 1개소)

․화양～적금 : L=16.8km, 3,306억원(해상교량 4개소)

- 신지～고금간 연륙교('10.～'17.) 조기 완공 : 766억원, L=4.2km

- 미착공 구간 연도교 조기착공(중장기 과제)

․압해～화원 : 4,265억원, L=13.4km(해상교량 3개소)

․화태～백야 : 2,978억원, L=11.4km(해상교량 4개소)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
신안다이아 몬드제도 도로망 구축	계획	1지구 공사중	1지구 공사중	공사1 설계3	준공 1 공사3	공사3 설계2
	실적	1지구 공사중	1지구 공사중
국도 77호선 연륙․연도교	계획	6지구 공사중	6지구 공사중	준공 1 공사 5	준공 5 설계 3	공사 3 설계 4
	실적	6지구 공사중	6지구 공사중

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	기타	합계	국비	도비	시군비	기타
합계	2,220,400	2,220,400				313,300	313,300
2014	183,000	183,000				149,000	149,000
2015	183,000	183,000				164,300	164,300
2016	181,400	181,400
2017	181,000	181,000
2018.	58,400	58,400
2019	1,433,600	1,433,600

※ 기투자금액 : 513,300백만원

광양항을 세계적 항만으로 육성

□ 중점 추진방향

해양항만 활력추진단 운영 추진

- (구성) 자문가 그룹(5명), 전문가 그룹(10명)

- (운영) 전문가 그룹은 월 1회 이상, 자문 그룹은 분기별 1회

광양항 24열 컨테이너크레인 추가 설치 추진(1기 ⇒ 4기)

- 부산신항은 총 65기중 24열 47기 보유(광양항은 총 27기중 24열 1기 보유)

광양항 유관기관 관리자급 협의회 구성·운영

- 광양항 활성화를 주도할 수 있는 유관기관 중심으로 현안사항 집중 논의·협의

광양항 통합마케팅 기획단 운영

- 전남도, 상공회의소, 여수광양항만공사 등 8개 기관 공동 운영

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
해양경제특구 지정 추진	계획	T/F 구성	연구용역발주	시행계획수립	전문가 그룹구성	지정 고시
	실적	구성 완료	-	-	-	-
8단 24열 대형크레인 설치	계획	해수부 건의	건의 및 타당성 용역	설계발주 (1기)	설계발주 (1기)	설계발주 (1기)
	실적	3회	-	-	-	-
광양항 배후단지 154KV 추진	계획	업무협의	해수부 건의 (수정계획 반영)	실시설계 등	사업착공	사업추진
	실적	2회	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	343,550	338,800	580	4,170	-	-	32,370	28,400	1,400	1,400	-	1,170
2014	17,000	16,400	30	570	-	-	18,370	16,400	700	700	-	570
2015	81,050	80,400	50	600	-	-	14,000	12,000	700	700	-	570
2016	81,100	80,400	100	600	-	-
2017	41,100	40,400	100	600	-	-
2018.	41,100	40,400	100	600	-	-
2019	82,200	80,800	200	1,200	-	-

※ 기투자금액 : 4,431,300백만원

진도항 배후지 개발

□ 중점 추진방향

○ 진도항 및 서망항 배후지역을 해안경관과 조화를 이루는 미항으로 정비하고, 연안지역의 정주환경 개선, 관광기능 도입 및 수산물 가공 등 특화산업 개발을 통해 지역경제 활성화 및 관광활동 증진 도모 (남해안권 발전 종합계획 선도사업)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
진도항 배후지 개발사업	계획	용역 및 실시설계	진도항 구간 단지 조성	서망항 구간 단지조성	사업 준공
	실적	완료	투기장 용지보상완료	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	464,500	12,000	6,000	11,400	435,100	-	23,204	10,402	5,201	7,601
2014	15,400	6,000	3,000	6,400	-		14,400	6,000	3,000	5,400
2015	14,000	6,000	3,000	5,000	-		8,804	4,402	2,201	2,201
2016	-	-	-	-	-
2017	435,100	-	-	-	435,100
2018.
2019

※ 기투자금액 : 60백만원

목포항 권역별 특화개발 추진

□ 중점 추진사업

① (신항)  자동차부두, 석탄부두 조기완공으로 물동량 창출(‘18년)

② (북항) 서남권 친환경 수산종합지원단지 조성('17년 예상)

③ (내항) 마리나 계류시설 확대(57척 → 200척 계획)

④ (남항)  친수 및 해양복합지구 등 해양 관광항으로 개발

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
목포신항 물류거점항 육성	계획	필리핀 INAP 참석	목포 신항 INAP 개최	국내외 초청 설명회 및 해외 마케팅	국내외 초청 설명회 및 해외 마케팅	국내외 초청 설명회 및 해외 마케팅
	실적	참석	-	-	-
북항 서남권친환경 수산물단지조성	계획	기본 및 실시설계	사업 착공	사업 추진	사업 준공	운영 추진
	실적	완료	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	1,221,700	1,181,800	7,100	35,800	10,800	-	151,000	146,500	700	1,600	-	2,200
2014	57,000	53,900	400	2,000	700	-	71,700	70,100	500	400	-	700
2015	126,400	112,900	3,400	5,000	5,100	-	79,300	76,400	200	1,200	-	1,500
2016	425,000	411,700	3,300	5,000	5,000	-
2017	587,200	582,200	-	5,000	-	-
2018.	26,100	21,100	-	5,000	-	-
2019	43,700	29,900	-	13,800	-	-

※ 기투자금액 : 648,500백만원

무안국제공항 활성화

□ 중점 추진사업

○ 사업기간 : 2014. 7월 ~ 계속

○ 사 업 비 : 655억원(국비 354, 도비 95, 민자 206)

- 활성화 추진(도비)       :  95억원(정기성 전세기 77, 항공사 재정지원 18)

- 시설확충(국비)          : 354억원(공항활주로 확장 354)

- 비행훈련센터 설립(민자) : 206억원(한국공항공사 206)

○ 사업내용

① 무안국제공항 국내선 및 국제선 노선 확충

- 무안～제주 등 국내외 노선에 대한 저가항공사(LCC, Low Cost Carrier)유치

- 중국, 동남아, 홍콩 등 맞춤형 관광상품 개발

- 정기성 전세기 유치로 해외 관광객 모객 확대 및 대중국 관광루트 활성화

- 항공사 운항손실금 지원(공항이용 항공사업자 재정지원 조례)

․ 노선별 운항손실액 30%(반기별 국제선 100백만원, 국내선 50백만원 한도)

- 흑산도 신공항 개항(’20년)과 연계한 무안 ↔ 흑산도간 노선 개설 추진

② 무안국제공항 인프라 확충

- 대형 항공기의(B747) 원활한 이․착륙을 위한 활주로 확장

․ 활주로 확장 : 2,800m → 3,200m(400m 연장) 354억원

- 호남고속철도(2단계) 무안국제공항 경유노선 추진(송정～나주～무안공항～목포)

․호남고속철도 사전타당성 조사용역 시행(국토부)  : ’13.10.～’14. 8.

□ 최적 노선으로 「송정～나주～무안공항～목포」노선 변경 추진

․’15년 정부 예산 600억원 반영(실시설계)            : ’14.12.30.

무안국제공항 주변 항공복합산업 육성

- 비행훈련센터 설립 무안공항 결정(’14. 5. 29, 한국공항공사)

- 비행훈련센터와 연계, 무안공항 시설확충, 보조 이착륙장 신설, 훈련용 항공기 급유 지원사업 등 항공복합산업 육성 여건 마련

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
정기노선 취항 및 신규노선 유치	계획	부정기선 유치	신규노선 유치	정기노선 유치	정기노선 운항	정기노선 운항
	실적	18개 부정기 노선 운항		-	-	-
정기성 전세기 유치	계획	10개 노선 150회/편도	20개 노선 300회/편도	20개 노선 300회/편도	20개 노선 300회/편도	10개 노선 150회/편도
	실적	7개 노선 176회/편도
항공사 운항손실금 지원	계획	2억원 지원	4억원 지원 (확대지원)	4억원 지원	4억원 지원	4억원 지원
	실적	2억원 지원
활주로 확충 추진	계획	국비지원 건의	국비지원 건의	실시설계 추진	공사착공	공사준공
	실적	미반영
무안공항 항공복합산업 육성	계획	비행훈련 센터 개소	고등비행과정 개소 준비	고등비행 과정 개소
	실적	훈련센터개소(3기관)
흑산도 소형공항 개항과 연계 추진	계획	기본계획수립 타당성용역	기본계획 확정고시	신공항설계 및 토지보상	착공	공사추진
	실적	기본계획 추진

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	71,617 (12,200)	35,400	15,600 (12,200)	-	20,617	-	14,674 (2,797)		3,697 (2,797)	-	10,852	-
2014	5,875 (2,200)	-	2,400 (2,200)	-	3,475	-	4,572 (897)	-	1,097 (897)	-	3,475	-
2015	29,702 (1,800)	20,000	2,200 (1,800)	-	7,502	-	10,102 (1,900)	-	2,600 (1,900)	-	7,377	-
2016	25,500 (1,500)	15,400	1,900 (1,500)	-	8,200	-	-	-	-	-	-	-
2017	3,340 (1,500)	-	1,900 (1,500)	-	1,440	-	-	-	-	-	-	-
2018.	1,100 (700)	-	1,100 (700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	6,100 (4,500)	-	6,100 (4,500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기 투자금액 : 6,521백만원(토지매입 4,600 재정지원 1,921)

1군 1소방서 및 119구조대 설치

□ 중점 추진사업

① 안전한 전남 만들기 위한 군지역 단계적 소방서 설치

- 무안('15), 고흥('16), 장성('17), 완도('18)

※ 소방서 부시는 군에서 제공, 건축비는 도에서 반영 추진

② 소방서 설치 전까지 인명구조 능력 배양을 위한 119구조대 설치

- 고흥‧진도('14), 무안・함평・완도('15), 장흥・곡성('16), 장성・구례('17), 신안('18)

③ 빛가람 혁신도시 119안전센터 설치 : 2015년

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
소방서 설치	계획		무안 빛가람센터	고흥	장성	완도
	실적
119구조대	계획	고흥 진도	무안 함평 완도	장흥 곡성	장성 구례	신안
	실적	고흥 진도

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	85,215	1,400	83,815				13,433		13,433
2014	1,000		1,000				1,724		1,724
2015	14,101	700	13,401				11,709		11,709
2016	7,043	280	6,763
2017	9,043	280	8,763
2018.	6,022	140	5,882
2019	48,006		48,006

사회복지종사자 처우개선

□ 사업개요

○ 추진기간 : ‘14. 7. ～ ’18. 6.

○ 사 업 량 : 22개시군 / 2,033개소 14,582명

○ 사 업 비 : 77,701백만원(국비 24,336, 도 31,763, 시군 21,602)

○ 추진내용

- 사회복지시설 종사자 특별수당 지급

․지급기준 : 생활시설 10만원, 이용시설 7만원

- 시․군별 “사회복지사 처우개선 및 지위향상 조례”제정 추진

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
종사자 특별수당 지원	계획	7,379	14,758	14,758	14,758	7,379
	실적	14,700	14,990
종사자 처우개선 관련 조례제정	계획	7개시군	6개시군	6개시군	4개시군
	실적	6개지역 (도, 시군 5)	시군별 조례제정 독려중

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	66,411	19,759	27,473	19,179			29,690	9,102	12,773	7,815
2014	7,379	2,195	3,335	1,849			14,700	4,400	6,600	3,700
2015	14,758	4,391	6,267	4,100			14,990	4,702	6,173	4,115
2016	14,758	4,391	6,267	4,100
2017	14,758	4,391	6,267	4,100
2018	7,379	2,195	2,669	2,515
2019	7,379	2,196	2,668	2,515

※ 기투자금액 : 11,290백만원(국비 4,577, 도비 4,290, 시군비 2,423)

통합의학 활성화 거점 육성

□ 중점 추진사업

○ 2015 대한민국통합의학박람회 개최 지원(완료)

- '15. 7. 31. ～ 8. 6.(7일간) / 장흥 청소년수련관 일원 / 14억원

- 개최결과 : 총 관람객 252천명, 검진‧체험 60천명, 참가기관 43개소 등

○ 통합의학센터 건립 지원(‘12 ~ ’16)

- 장흥군 안양면 로하스타운 일원 / 9,159㎡(지하1층, 지상4층) / 296억원

- 통합의학 치유, 교육, 연구 시설 등 인프라 구축

○ 2016 장흥국제통합의학박람회 개최 지원

- '16. 9. 29. ～ 10. 31. (33일간) / 장흥군 안양면 로하스타운 일원 / 190억원

- 통합의학 정보교류, 국제 학술대회, 통합의학 진료‧체험, 건강행사 등

○ 전남한방산업진흥원 운영('09. 3. 26.개원)

- 장흥군 안양면 우드랜드길 288 / 건물 3,859㎡, 시설물 5,415㎡

- 한약자원 R&D, 한의약 산업 육성, 약용작물 보존‧보급 육성 등

※ '16년 상반기 중 국가 한약진흥재단에 편입 예정

○ 우수한약재유통지원시설(BTL) 운영 지원

- 화순읍 산단길 12-51 / 연면적 5,873㎡ / 109억원(민간자본)

․ 20년간 시설 원리금 균분 상환 * '15년 : 도비 150백만원

- 한약재 수매‧저장‧가공‧품질 검사‧유통 등

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
대한민국 통합의학박람회 개최	계획	1회	1회		1회
	실적	1회	1회
2016 장흥국제통합의학 박람회 개최 지원	계획			1회
	실적			1회(확정)
통합의학센터 건립 지원	계획	20%	80%	100%
	실적	20%	50%
전남한방산업진흥원 운영	계획	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소	1개소
우수한약재유통지원시설 (BTL) 운영 지원	계획	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소	1개소

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타	합계	국비	도비	시군비	민자	기타
합계	80,489	35,344	20,292	21,353	3,500		35,056	19,259	8,595	7,202
2014	14,306	7,503	4,032	2,771			13,306	7,503	3,432	2,371
2015	18,483	10,356	4,780	3,347			21,750	11,756	5,163	4,831
2016	23,858	7,499	6,010	6,849	3,500
2017	6,633	1,999	3,085	1,549
2018.	5,233	1,999	2,385	849
2019	11,976	5,988		5,988

※ 기투자금액 : 32,807백만원(국비 12,041, 도비 12,750, 시군비 8,016)

인재육성을 위한 제2남도학숙 건립

□ 사업개요(안)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017년(2018. 2월 개원 예정)

○ 위치/규모 : 서울 은평구 녹번동 86번지(舊 은평구청 별관부지)

- 부지면적 5,960㎡, 건축물 연면적 14,292㎡

○ 수용인원 : 608명(광주 304, 전남 304)

○ 사업방식 : 부지매입 후 자체신축   * 광주시 주관

○ 사 업 비 : 약 466억원(광주․전남 각 233억원)

□ 연도별 추진일정

사업명	구분	2014	2015	2016	2017	2018
｢제2남도학숙｣ 건립	계획	사업방식 결 정	실시설계	착 공	준 공	입사생 모집
	실적	사업방식 정책연구	건립 대상 부지 매입	-	-	-

□ 연도별 투자계획 및 실적

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획						예산확보 실적
	합계	국비	도비	시군비	민자	기타 (광주시부담)	합계	국비	도비	시군비	민자	기타 (광주시부담)
합계	46,600	-	23,300	-	-	23,300	11,024	-	5,512	-	-	5,512
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	11,024	-	5,512	-	-	5,512	11,024	-	5,512	-	-	5,512
2016	22,556	-	11,278	-	-	11,278	-	-	-	-	-	-
2017	13,020	-	6,510	-	-	6,510	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-