위험도로 구조개선사업

	사업개요(2014~2023)
- 총 73개소, 162,138백만원(국비 81,069, 지방비 81,069) - ○ 지 방 도: 37개소, 97,358백만원 ○ 시 군 도: 36개소, 64,780백만원 - 소요재원: 국고(광역․지역발전특별회계) 50%, 지방비 50% ※ 1차(‘04∼’13년) 위험도로 구조개선사업 추진 : 141개소, 1,137억원

□ 투자현황(중장기계획)

○ 대상지구 : 73개소, 88.0km, 1,620억원(국비 810, 지방비 810)

- 완료지구 :  9개소, 14.5km, 338억원

- 시 행 중 :  4개소, 8.60km, 360억원

- 미 시 행 : 60개소, 64.9km, 922억원

○ 년차별 투자 실적

(단위 : 개소, 억원)

사업량		총사업비	2020 까지	2021년	2021 이후	비고
추진	미추진
14	59	1,620	592	42	986

* 준공: 여운재, 배산('16), 봉룡~세동, 남죽, 쌍태, 매산('17), 월선('18), 건모(‘19), 학곡(’19), 봉강(‘20)

□ 2021년 추진

○ 위    치 : 장성, 고흥*(계속 2, 신규* 1)

○ 본 예 산 : 42억 원 - 지특 21(50%), 도비 21(50%)

- 본  청 시행 : 1지구 (32억 원) * 지방비 별도 추가  (봉강 6.5억, 당숙재 25.7억)

- 사업소 시행 : 2지구 (10억 원) * 계속 1, 신규 1

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

○ 사업내용 : 선형개량, 도로 확포장, 우회도로, 안전시설 설치 등

□ 향후계획

○ 제2차(2014~2023년) 중장기 계획에 따라 사업추진

□ 2021년 추진계획

○ 예산 내시(행정안전부) : 4,200백만원(국비 2,100, 도비 2,100)

사 업 명	위 치	사업량	사 업 비				공사기간	시 공 자	비고
			계	2020년까지	2021년	2022년이후
합 계	3지구	6.98	22,332	7,290	4,200	10,842
도로교통과 시행(1지구)		2.88	15,332	6,890	3,200	5,242
작은재 선형개량	장성 북일	2.88	15,332	6,890	3,200	5,242	'14.12.08.~ '22.11.30.	국제건설 산업㈜	계속
도로관리사업소 시행(2지구)		4.10	7,000	400	1,000	5,600
송정지구 선형개량	고흥 송정	1.10	2,800	400	600	1,800	'21. ~ '23.	입찰공고 추진	계속
상포지구 선형개량	고흥 상포	3.00	4,200	-	400	3,800	'21. ~ '23.	실시설계 추진	신규

* 예산 부족분 지방비 예산 투입(봉강 6.5억원, 당숙재 25.7)

** 도로교통과(1지구)와 도로관리사업소(2지구)에서 각각 사업을 추진하고 있으나,

앞으로 신규발주는 사업소에서만 추진하여 일원화 예정