□ 공사

(단위: ㎞, 백만원)

구 분	위 치	사업량	사업 기간	총 사업비	2020 까지	2021	2022 이후	비고
공사	33개	122.41		1,132,483	600,400	105,775	426,308
준공지구	6개	24.39		219,696	186,786	28,316	4,867
무안공항	무안 청계	8.12	2010 2021	94,549	83,674	10,875	-
영산강 강변도로	무안 몽탄	4.66	2010 2021	41,903	33,980	4,000	3,923
거제~안치	진도 지산	3.80	2015 2021	16,705	12,861	2,900	944
남포∼장재	장흥 용산	3.16	2011 2021	42,853	35,630	7,223	-
봉강	광양 봉강	2.99	2015 2021	14,919	14,173	746	-
당 숙 재	신안 자은	1.66	2014 2021	9,040	6,468	2,572	-
계속지구	24개	87.27		771,014	411,460	76,919	282,635
만곡~신하	영광 군서	2.58	2015 2022	12,499	6,539	3,124	2,836
벌교∼낙안	순천 보성	6.59	2011 2022	61,428	31,799	3,404	26,225
깃재터널	영광 장성	3.95	2017 2022	48,511	19,561	8,092	20,858
증도∼지도	신안 지도	3.30	2014 2022	19,570	8,808	1,300	9,462
염산 포천2교	영광 염산	0.22	2019 2022	7,100	878	1,700	4,522
유치∼이양	장흥 화순	15.03	2006 2022	226,287	195,479	11,670	19,138
진월∼광영	광양 진월	2.76	2011 2022	67,308	42,141	9,209	15,958
보성~겸백	보성 겸백	5.00	2017 2022	27,799	14,279	2,426	11,094
금정~유치	영암 장흥	5.74	2017 2022	23,524	8,938	3,139	11,447
용방 위험구간	구례 용방	1.70	2017 2022	8,392	4,632	1,300	2,460

구 분	위 치	사업량	사업 기간	총 사업비	2020 까지	2021 추진	2022 이후	비고
갈퀴재 위험	장흥 장평	3.10	2017 2022	13,283	5,207	4,600	3,476
무정~순창	담양 무정	4.80	2016 2023	23,789	11,291	4,000	8,498
구등대 ~ 양화	해남 화원	2.63	2018 2023	19,000	9,072	4,644	5,284
태천~선도	신안 지도	4.03	2019 2023	14,240	3,001	3,000	8,239
월등 위험	순천 월등	1.00	2019 2023	4,038	1,421	700	1,917
해룡 위회	순천 해룡	1.14	2019 2023	6,272	1,497	1,450	3,325
밤고개 ~율포	보성 회천	2.80	2019 2023	10,033	2,032	1,500	6,501
조성~대서	보성 고흥	3.40	2020 2023	8,700	1,358	1,000	6,342
한천~오음	화순 한천	1.36	2020 2023	5,900	1,186	816	3,898
벽파~연동	진도 고군	1.49	2020 2023	6,200	675	550	4,975
원동~청룡(2)	무안 삼향	2.55	2020 2023	17,800	7,346	706	9,748
과역~남양	고흥 남양	3.94	2019 2024	26,941	2,730	2,300	21,911
고서IC ~광주댐	담양 고서	4.90	2017 2024	51,800	27,868	3,800	20,132
강진 까치내재	강진 군동	3.30	2020 2026	60,600	3,722	2,489	54,389
신규지구	3개	10.75		141,500	2,154	540	138,806
당목 우회도로	완도 약산	1.45		22,000	658	190	21,152
해남 ~대흥사	해남 해남	5.10		35,000	-	200	34,800
원화~효산	화순 도곡	4.2		84,500	1,496	150	82,854