		도로공사 추진 현황

□ 국가지원지방도

사 업 명		사 업 기 간	사업량 (km)	사 업 비(백만 원)						비고
				계	2022 까지	2023 추진			2024 이후
						소계	국비	도비
계속지구		6개	41.8	437,907	346,258	43,259	23,437	19,822	48,390
	남평~화순	2016 2023	6.8	122,874	104,798	10,861	10,853	8	7,215	p.12
	법성~홍농	2015 2023	5.6	88,490	72,070	16,420	-	16,420	-	p.14
	중군~진상	2016 2023	9.1	109,115	96,764	7,249	6,474	775	5,102	p.16
	도계~장성	2018 2023	5.9	44,463	44,463	-	-	-	이월액 (2,682)	p.18
	낙안~상사	2019 2024	8.5	48,308	20,137	5,157	3,610	1,547	23,014	p.20
	북평~북일	2020 2025	5.9	24,657	8,026	3,572	2,500	1,072	13,059	p.22

□ 광역도로

사 업 명		사 업 기 간	사업량 (km)	사 업 비(백만 원)						비고
				계	2022 까지	2023 추진			2024 이후
						소계	국비	도비
보상지구		1개	15.4	116,200	6,914	3,808	1,904	1,904	105,478
	광주하남~장성삼계	2021 2026	15.4	116,200	6,914	3,808	1,904	1,904	105,478	p.26

□ 여수국가산단진입도로

사 업 명		사 업 기 간	사업량 (km)	사 업 비(백만 원)						비고
				계	2022 까지	2023 추진			2024 이후
						소계	국비	도비
		1개	9.6	60,362	36,334	6,028	-	6,028	18,000
	여수국가산단진입도로	2014 2026	9.6	60,362	36,334	6,028	-	6,028	18,000	p.30

□ 지방도

(단위: ㎞, 백만 원)

구 분	위 치	사업량	사업 기간	총 사업비	2022년 까지	2023년	2024년 이후	비고
총 계 (지방도+장산+접도)	61지구	230.34		2,425,455	695,009	180,400	1,550,046
지방도 정비사업	59지구	226.83		2,235,855	689,509	180,000	1,366,346
공 사	34지구	131.94		1,231,657	657,120	164,884	409,653
준공지구	15지구	58.53		546,355	467,720	78,635	-
유치∼이양	장흥 화순	15.03	2006 2023	233,411	221,811	11,600	-	p.36
진월∼광영	광양 진월	2.76	2011 2023	74,933	62,117	12,816	-	p.38
작은재 위험	장성	2.88	2014 2023	13,832	12,637	1,195	-	p.40
무정~순창	담양 무정	4.80	2016 2023	25,277	19,567	5,710	-	p.42
깃재터널	영광 장성	3.95	2017 2023	52,660	38,075	14,585	-	p.44
보성~겸백	보성 겸백	5.00	2017 2023	31,226	24,488	6,738	-	p.46
금정~유치	영암 장흥	5.74	2017 2023	25,221	19,270	5,951	-	p.48
갈퀴재 위험	장흥 장평	3.10	2017 2023	15,707	14,385	1,322	-	p.50
구등대~양화	해남 화원	2.63	2018 2023	22,544	21,340	1,204	-	p.52
태천~선도	신안 지도	4.03	2019 2023	16,004	10,261	5,743	-	p.54
해룡 우회	순천 해룡	1.14	2019 2023	6,402	4,150	2,252	-	p.56
월등 위험	순천 월등	1.22	2019 2023	6,418	6,154	264	-	p.58
조성~대서	보성 고흥	3.40	2020 2023	9,192	5,738	3,454	-	p.60
한천~오음	화순 한천	1.36	2020 2023	6,712	4,002	2,710	-	p.62
벽파~연동	진도 고군	1.49	2020 2023	6,816	3,725	3,091	-	p.64
계속지구	16지구	64.31		642,831	187,386	83,449	371,996
밤고개~율포	보성 회천	2.80	2019 2024	10,970	6,529	2,000	2,441	p.68
원동~청룡(2)	무안 삼향	2.55	2020 2024	20,757	12,816	5,042	2,899	p.70
벌교∼낙안	순천 보성	6.59	2011 2024	66,488	43,727	5,000	17,761	p.72
증도∼지도	신안 지도	3.30	2014 2024	20,854	13,091	3,578	4,185	p.74
과역~남양	고흥 남양	3.94	2019 2024	27,699	9,530	4,500	13,669	p.76
고서IC~광주댐	담양 고서	4.9	2017 2024	52,432	37,080	4,500	10,852	p.78
해남~대흥사 (1단계)	해남 해남	1.44	2021 2024	10,400	3,392	1,500	5,508	p.80
백수~군서 선형개량	영광 백수	2.80	2022 2024	8,091	-	1,000	7,091	p.82
남악~임성	무안 삼향	1.16	2022 2025	28,679	4,423	12,250	12,006	p.84
강진 까치내재	강진 군동	3.30	2020 2026	65,187	19,627	13,000	32,560	p.86
원화~효산 (1단계)	화순 도곡	1.42	2021 2026	45,429	26,067	7,231	12,131	p.88
군남~영광	영광 군남	5.00	2022 2026	48,900	4,000	3,000	41,900	p.90
해남~대흥사 (2단계)	해남 해남	3.66	2022 2026	35,503	2,829	4,000	28,674	p.92
신흥~용동	고흥 도양	8.23	2022 2026	49,100	4,159	8,862	36,079	p.94
영산강(2-2) 1공구	무안 영암	5.70	2023 2028	75,842	58	4,000	71,284	p.96
영산강(2-2) 2공구	무안 영암	7.52	2023 2028	76,500	58	4,000	71,942	p.98
신규지구	3지구	9.10		42,471	2,014	2,800	37,657
나주 세지 우회도로	나주 세지	0.90	2023 2025	8,500	339	800	7,361	p.102
은곡~매월	영암 학산	1.96	2023 2025	9,100	675	1,000	7,425	p.104
무안~몽탄	무안 몽탄	6.24	2023 2028	24,871	1,000	1,000	22,871	p.106
설 계	21지구	80.77		898,865	25,367	3,135	870,363
설계완료	9지구	36.33		233,705	9,878	-	223,827
송지~고담IC(2)	해남 송지	2.22	2012 2014	12,700	-	-	12,700	p.110
용곡~황죽	광양 옥룡	5.45	2007 2010	63,900	1,419	-	62,481	p.112
원불교	영광 백수	1.55	2010 2013	13,400	300	-	13,100	p.114
장평~이양	장흥 화순	10.6	2007 2010	47,200	1,732	-	45,468	p.116
문평IC~고막원	나주 문평	4.19	2016 2019	25,605	-	-	25,605	p.118
원화~효산 (3단계)	화순 효산	1.42	2019 2021	26,900	-	-	26,900	p.120
도암~운주사	화순 도암	2.70	2019 2022	15,000	907	-	14,093	p.122
장평 위험	장흥 장평	1.50	2019 2022	8,000	537	-	7,463	p.124
염산~영광 (2단계)	영광 염산	6.70	2019 2022	21,000	4,983	-	16,017	p.126
설 계 중	8지구	35.55		249,400	14,263	635	234,502
마산~산이	해남 마산	13.00	2019 2022	112,000	5,853	-	106,147	p.130
손불~석창	함평 손불	3.40	2019 2022	15,400	1,071	-	14,329	p.132
화원~장수	해남 화원	2.60	2019 2022	15,000	972	-	14,028	p.134
나주 남평	나주 남평	1.85	2019 2022	19,000	1,140	-	17,860	p.136
장흥 유치	장흥 유치	2.70	2019 2022	40,000	1,909	-	38,091	p.138
영암 덕진	영암 덕진	4.60	2019 2022	25,000	1,375	200 (선보상)	23,425	p.140
남악~임성 등 4개소	무안 등4	2.29	2019 2022	11,000	1,443	-	9,557	p.142
장교~가동 외 4개소	함평 보성	5.11	2022 2025	12,000	500	435	11,065	p.144
설계신규	4지구	8.89		415,760	1,226	2,500	412,034
소안~구도1)	완도 소안	2.07	2023 2028	143,960 (71,980)	140 (-)	1,000 (570)	142,820 (71,410)	p.148
월호~금오2)	여수 금오	3.46	2023 2029	192,400 (96,200)	- (-)	1,000 (500)	191,400 (95,700)	p.150
공산~다시	나주 다시	0.50	2023 2028	57,900	-	300	57,600	p.152
가치~와우 등 2 보완	진도 지산	4.25	2023 2028	21,500	1,086	200	20,214	p.154
선 보 상	4지구	14.12		88,100	726	5,000	82,374
안남~송림	고흥 대서	3.48		22,100	726	1,000	20,374	p.158
남성~복길	무안 청계	2.30		10,700	-	1,000	9,700	p.160
원화~효산 (2단계)	화순 효산	1.36		28,400	-	2,000	26,400	p.162
과역~남양 (2단계)	고흥 남양	5.56		26,900	-	1,000	25,900	p.164
용역 등기타		1식		1,432	581	851	-
도로 관리계획	도내	2,298	2021 2023	581	581	-	-	p.168
영산강(2-1) 사후 등 부대용역 등				851	-	851	-
재배정사업	10지구	1식		15,501	5,715	5,830	3,956
학산 금계 교차로개선	영암 학산	1식		1,445	913	532	-
신안 암태 굴곡 위험	신안 암태	9개소		4,925	369	1,000	3,556
장성 사거리교 회전교차로	장성 북이	1식		690	17	673	-
광영 광양 지방도	광양 광영	0.45	2021 2023	1,350	850	500	-
국지도 일로 용산교차로	무안 일로	1식	2021 2023	200	41	159	-
강진교차로 개선	강진	1식		91	25	66	-
해상재난 대피시설	함평 손불	1식		3,800	3,500	300	-
영암 노후포장	영암	1식		2,000	-	2,000	-
고흥 동강 죽암	고흥	1식		500	-	500	-
고막원IC 교차로 개선	나주	1식		500	-	100	400
부대비		1식		300	-	300	-
장산~자라3)	신안 장산	2.87	2022 2028	161,500 (70,700)	4,500 (1,945)	200 (100)	156,800 (68,655)	p.170
진도 접도4)	진도 의신	0.52	2023 2027	28,100 (14,050)	1,000 (-)	200 (100)	26,900 (13,950)	p.174