국가지원 지방도 건설사업 추진

	사업개요(1996~2026)
― 총 7개 노선 39지구, 337㎞, 3조 5,144억원 ― ○ 기 시 행 : 13지구, 84㎞, 1조 430억원 ○ 시 행 중 : 11지구, 86㎞, 1조 498억원 ○ 실 시 설 계 : 3지구, 29㎞, 4,097억원 ○ 향 후 추 진 : 12지구, 138㎞, 1조 119억원

지금까지 추진실적 - 1조 5,298억원(진도 43%)

❍ 기 시 행 : 13지구,  84㎞,  10,430억원(’13년 준공 : 화원~삼포)

❍ 계속사업 : 10지구,  39㎞,   4,868억원

-  앵남~화순 1,062, 송현~남평 987, 화양~나진 846,  나진~소라 953

- 일로~몽탄   458, 몽탄~동강 408, 세지~송현 123, 북하~도계   21

- 남평~앵남     5,  법성~홍농    5

2015년 추진계획 - 11지구, 961억원(공사비 761, 보상비 200)

❍ 준공사업 : 2지구,  1.2km,  139억원

-  앵남~화순 102, 송현~남평 37

❍ 계속사업 : 8지구,  7.0km,  817억원

-  화양~나진 155, 나진~소라 190, 일로~몽탄 163, 몽탄~동강 120
세지~송현  73, 북하~도계*  35, 법성~홍농*  38, 남평~앵남* 43

* 익산청 보완 설계중인 사업으로 ‘15년 발주 예정

❍ 신규사업 : 1지구(종군～진상), 0.1km, 5억원

【중점 추진사항】

❍ 공사가 지연되지 않도록 공사비(국비) 및 보상비(도비) 확보 노력