GFEZ 개발사업 추진현황

(‘15.6.30. 기준)

지구	단 지 명	면적(㎢) (만평)		사업비 (억원)	사업기간	사업시행자	추 진 실 적
5	21단지	77.68 (2,354)		131,973
광양지구	광양컨테이너부두	6.17 (187)		47,977 (사업비 제외)	’87~’20	해수부, 여수광양항만공사	․총25선석/885만TEU 중 16선석운영 ․Ⅲ-2단계 공사 중
	컨부두배후지(동측)	2.54 (77)		3,794	’03~’08	해 수 부 (1,2단계) 광양시(3단계)	․준공(’08. 12월) ․입주완료(27개사/1.36㎢)
	컨부두배후지(서측)	1.94 (59)		3,104	’07~’12	해양수산부	․준공(’12. 6월) ․입주 모집 중(6개사, 0.30㎢/1.00㎢)
	포스코터미널CTS	1.11 (34)		9,266	’04~’14	(주)포 스 코 터 미 널 (주)SNNC, (주)포스코	․1차준공(´08. 4월) ․공장준공(‘14. 12.)
	황금산업단지	1.12 (34)		3,008	’10~’17	(주) 광 양 지 아 이	․실시계획승인(’13.6.) ․착공(‘15. 6.) 및 보상추진(22%)
	성황국제비즈니스	0.75 (23)		1,502	’11~’15	광양시	․개발계획 변경(’12.12.) ․사업타당성조사 용역 추진(광양시)
율촌지구	율촌Ⅰ산단	9.11 (276)		12,564	’94~’18	전라남도	․공정 : 97%, 분양 : 78%, 부분준공 : 6.45㎢
	율촌Ⅱ산단	3.79 (115)		9,269	’10~’20	율촌제2산업단지개발(주)	․SPC 설립: 율촌2산단개발(’12. 5) ․개발계획 변경(’13. 4.)
	율촌Ⅲ산단	9.76 (296)		13,555	’16~’20	전라남도, 민자, 외투	-
	율촌항만부지	5.13 (155)		3,078	’10~’30	해양수산부	․준설토 매립 중(65%)
신덕지구	신대배후단지	2.90 (88)		5,600	’03~’13	순천에코벨리(주)	․부분준공(’12. 6.) ․공정률 : 100%, 분양률 : 99%
	해 룡 산 단	0.33 (10)		453	’03~’10	순천시	․준공(’08. 12월) ․분양완료(17업체/0.21㎢)
		1.26 (38)		2,702	’08~’16	(주) 대 우 건 설	․개발계획 변경(’13. 3.) ․공정률 : 57%
	광양세풍산단	3.00 (91)		5,219	’10~’15	세풍산단개발(주)	․사업시행자 대체지정(’14. 5.) ․공사 착공(‘15. 6.) 및 보상(88.5%)
	광양복합업무	4.43 (134)		10,614	’12~’20	전라남도, 광양시	․구조조정 : 면적축소(’14. 8.) ․개발계획 변경 용역 추진 중
	웰빙카운티	1.11 (34)		3,500	’12~’20	전라남도, 순천시 ,광양시	․구조조정 : 면적축소(’14. 8.) ․개발계획 변경 용역 추진 중
	선월하이파크	1.07 (32)		2,257	’12~’20	전라남도, 순천시	․투자 세부이행 협약체결(’13. 9.) ․개발계획 변경 신청(’15. 6.)
화양	화양지구	9.99 (303)		14,289	’03~’15	일상해양산업(주)	․토지보상 : 70% ․골프장 공정 : 100%
하동지구	갈사만조선산단	5.61 (170)		15,970	’08~’15	하동군, 하동지구개발사업단(주)	․1투기장 호안완료(’13. 5.) ․실시계획 변경(’14. 1.)
	대송산단	1.37 (41)		2,383	’09~’16	하동군, 대송산업개발(주)	․도급계약체결(’15. 2.) ․공정률 : 4.7%
	덕천에코시티	2.54 (77)		4,823	’12~’16	경상남도, 정부투자기관	․개발계획 변경(’12.12.)
	두우레저단지	2.65 (80)		5,023	’12~’16	경상남도, 정부투자기관	․사업자공모(’15. 3.) ․우선협상대상자 선정(‘15.6)
❍ 개 발 완 료(빨강) ❍ 개 발 진 행(파랑) ❍ 미개발지구(검정)			: 4개 단지 / 8.49㎢ (컨부두 동측, 컨부두 서측, 포스코터미널CTS, 신대배후) : 8개 단지 / 37.96㎢ (컨부두, 황금, 율촌1, 해룡, 세풍, 화양, 갈사만, 대송) : 9개 단지 / 31.23㎢ (성황, 율촌2, 율촌3, 율촌항만, 광양복합, 웰빙카운티, 선월, 덕천, 두우)