2018년

항만건설사업

해운항만과

(항만개발)

홍도항 동방파제 축조공사

	【 사업개요 (’13. 12.～’18. 7.) 】
❍ 위 치 : 신안 흑산면 홍도리(홍도항) ❍ 사 업 량 : L=150m ❍ 사 업 비 : 84,776백만원 ❍ 시공회사 : ㈜한양 외 4개사 ❍ 감리용역 : ㈜대영엔지니어링 외 2개사

2018년 추진계획

❍ 전체 준공(‘18. 7. 26)

- (6차분) 케이슨․블록거치, 상부콘크리트 / (7차분) 상부콘크리트

- (8차분) 등대 및 전기공사, 펜더시설, 안개경보기 등 부대공

	조감도

완도항 해경전용부두 축조공사

	【 사업개요 (’15. 3.～’19. 4.) 】
❍ 위 치 : 완도군 완도읍 군내리(완도항) ❍ 사 업 량 : 접안시설 L=428m, 호안시설 L=116m ❍ 사 업 비 : 32,346백만원 ❍ 시공회사 : 동부건설㈜ 외 2개사 ❍ 감리용역 : ㈜건일 외 2개사

2018년 추진계획

❍ 블록제작 및 거치, 사석공, 상부공, 외부토사 매립,

❍ 재하성토 유용, 함선고정시설, 부잔교 제작 및 설치 등

	조감도

진도항 2단계 건설공사

	【 사업개요 (’16. 10.～’20. 9.) 】
❍ 위 치 : 진도군 임회면 남동리 진도항 일원 ❍ 사 업 량 : 준설 67만㎥, 안벽 L=200m, 진입도로 L=660m 등 ❍ 사 업 비 : 32,293백만원 ❍ 시공회사 : 해동건설(주) 외 1개사 ❍ 감리용역 : ㈜건화 외 2개사

2018년 추진계획

❍ 기초사석 투하 및 고르기, 콘크리트 블록 제작 및 거치, 박지준설 등

❍ 총 사업비 2차 조정(물가변동, 사후환경, 폐기물처리 등)

	조 감 도