의안 번호	2021 -

수산유통가공과

국립해양수산박물관 건립 부지선정 및 타당성조사

우리 도의 풍부한 해양 생태자원 및 역사·문화를 체계적으로 관리·보존하기 위해 필요한 국립해양수산박물관 건립 타당성조사 연구용역

□ 용역의 필요성

❍ 전남은 전국 최대 해양생태자원*과 차별화된 해양 역사·문화의 보고임에도 불구하고, 국가차원의 보존·관리 거점시설 부재

* (섬)   (해안선)   (갯벌)   (바다면적)

❍ 해양생태자원과 역사·문화(이순신, 장보고 등)의 체계적 관리·보존을 위해 필요한 국립해양수산박물관 건립을 위해 필요

	【 국립해양수산박물관 건립 개요 】
• 사업기간: 2024. ~ 2028년(5년) • 위 치: 전라남도 일원 • 규 모: 부지 42,500㎡, 연면적 22,464㎡ / 1개 동(지하 1층, 지상 2층) • 총사업비: 1,246억 원(국비 1,243, 도비 3) * 예비타당성 조사대상 사업 • 사업내용: 해양자원 전시관, 체험관, 연구시설, 교육관 및 편의시설 등

* 국립해양문화시설 현황: 5개소(운영중 : 부산, 충남, 경북 / 건립중: 인천, 충북)

□ 용역개요

□ 용 역 명: 국립해양수산박물관 건립 부지선정 및 타당성조사

□ 달성목표: ‘23년 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부)

□ 용역기간: 2022. 3. ~ 2022. 12.(10개월)

□ 용 역 비: 300백만 원(도비)

□ 용역의 주요내용

〈 연구방향 〉

□ 단순 전시기능에서 탈피한 전남의 특성을 반영한 차별화된 박물관 건립을 위한 타당성조사 및 부지선정

〈 연구범위 〉

□ 공간적 범위: 전라남도 연안 일원

□ 시간적 범위: 기준년도(2021년)

□ 내용적 범위: 국립해양수산박물관 건립·유치 방안 모색

- 전남의 차별화된 국립해양수산박물관 기본구상 및 타당성 분석

- 국립해양수산박물관 건립 부지 선정 등(각종 영향평가, 타 법령 및 계획 등과 충돌 여부 검토 등)

〈 주요과제 〉

□ 국립해양수산박물관 건립 기본구상

- 국내외 전시 시설 사례를 조사 후 장단점 및 특성 비교분석

- 박물관 건립 기본계획 및 건축계획 수립(건립규모, 총사업비 등)

□ 국립해양수산박물관 건립 부지 선정 등

- 인문, 사회, 자연환경, 관광분야, 문화, 예술 등 현황 분석

- 사회기반시설, 개발현황, 교통망 등을 분석하여 최적의 입지 선정

□ 전남의 차별화된 해양수산박물관 건립 타당성 분석

- 박물관 건립의 필요성 및 당위성 제시

□ 국립해양수산박물관 건립 및 운영계획 수립 등

- 전시물 확보 및 활용 계획, 박물관 운영계획 등

□ 유사 용역사례(최근 5년간)

□ (충청북도) 미래해양과학관 건립 타당성조사 및 기본구상

- 수행기관: 한국해양과학기술원

- 기간/비용: 2017. 6. ~ 2017. 11.(6개월) / 150백만 원

- 주요내용: 미래해양과학관 건립 타당성조사 및 기본구상

□ (인천광역시) 인천해양박물관 건립 타당성 조사 연구

- 수행기관: 한국해양수산개발원

- 기간/비용: 2016. 5. ~ 2016. 10.(6개월) / 160백만 원

- 주요내용: 인천해양박물관 건립 타당성 조사 연구

□ 용역 추진계획

〈 추진체계 〉

□ 내실있는 용역추진을 위한 단계별 의견수렴 등 보고회 개최

- 연구진은 원칙적으로 연구용역 기관 소속 연구원을 중심으로 구성

- 다만, 타 연구기관의 전문적인 조력과 공동연구가 필요한 경우 초빙 가능

□ 보고회 개최(3회)

- (착수 보고) PPT 또는 서면보고, 과업착수 20일 이내 보고(과업에 대한 추진방향, 추진방법 등 보고)

- (중간 보고) 전문가 포럼 및 중간보고회(과업 추진상황 중간결과 보고)

- (최종 보고) 지적사항 보완 계약종료 30일 전 최종보고

〈 추진일정 〉

□ 세부 추진계획 수립 및 용역계약 체결       : ’22. 1. ~ 2.

□ 용역 착수 및 중간보고회 개최              : ’22. 3. ~ 7.

□ 용역 최종보고회 및 결과보고서 제출	: ’23. 1.

□ 활용방안

□ 연구용역 결과를 토대로 정부에 ‘국립해양수산박물관 건립’ 필요성 및 당위성을 설명하여 국비예산 확보

- `23년 예비타당성조사 대상사업 신청(기재부)

용역실명제

해양수산 국장	최정기 (☎ 6801)	수산유통가공과장	김형수 (☎ 6905)	수산물 브랜드 지원팀장	김 진 선 (☎ 6790)	담당자	송귀순 (☎ 6791)