여수 전시․컨벤션센터 건립 타당성 연구 용역

여수박람회장에 마이스 산업 육성 및 유치 활성화를 견인할 전문 전시‧컨벤션센터 구축을 위한 연구용역 추진

□ 용역의 필요성

□ 여수박람회장은 국제 마이스 개최지로서 최적의 입지여건을 갖추고 있으나 국제 수요를 충족할 전문 전시․컨벤션센터 부재

□ 마이스 산업의 육성과 안정적인 국제행사 개최를 위한 국제 규모의 전문 전시․컨벤션센터 건립 검토 필요

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 여수 전시‧컨벤션센터 건립 타당성 조사 연구 용역(안)

□ 달성목표 : 사업여건, 효과 등을 종합 분석하여 사업 타당성 검토

□ 용역기간 : 2018. 10. ~ 2019. 4.(6개월)

□ 용 역 비 : 60백만원(도비 30, 시군비 30)

□ 용역의 주요내용

〈 연구방향 〉

□ 전문 전시‧컨벤션센터 필요성과 건립 방안

〈 연구범위 〉

□ 공간적 범위 : 여수시(여수세계박람회장)

□ 시간적 범위 : 2019~2022

□ 내용적 범위 : 사업 필요성, 수요예측, 기본계획, 경제성 등

〈 주요과제 〉

□ 여수박람회장 전시‧컨벤션센터 건립 필요성

□ 전시‧컨벤션 산업 현황 및 여건 분석

□ 전시‧컨벤션 사업여건 분석

□ 전시장 수요예측‧전망 및 지역 수요조사 분석

□ 여수박락회장 전시‧컨벤션센터 건립사업 기본계획

□ 경제성 및 경제적 파급효과 분석 등

□ 용역 추진계획

□ 정책연구용역 심의 위원회 심의 : ’18. 8

□ 사업추진 TF팀 구성 및 정책 자문단 구축 : ’18. 9.

□ 보고회 개최(4회) : ’18. 10. ~ 19. 3.

- 착수보고회 : PPT 또는 서면보고, 과업착수 10일 이내 보고

- 중간보고회 : 과업착수 후 120일 이내 2회 과업추진상황 중간보고

- 최종보고회 : 용역완료 10일전 보고

□ 연구용역 완료 : ’19. 4.

□ 여수박람회장 전시‧컨벤션센터 건립 추진 : ’19. 4. ~

□ 활용방안

□ ‘여수박람회장 전시‧컨벤션센터 건립’ 국고사업 건의

□ 국제회의 및 전시산업 육성과 유치 활성화 기반 마련