「서남해안 섬지역 경관숲 조성」

기본계획 연구용역 추진 계획(안)

	(산림보전과)

「서남해안 섬지역 경관숲 조성」

기본계획 연구용역 추진 계획(안)

전남의 비교우위 자원인 섬·해수욕장·항구 주변 해안경관 테마숲

조성을 위한 국고 확보에 대응코자 기본계획 수립 연구용역 추진

Ⅰ		필 요 성

❍ 민선 7기 공약인□서남해안 관광휴양벨트 조성□과 연계 서남해안

맞춤형 경관 테마숲 조성으로 휴식과 힐링의 섬 투어 기반 확충

❍ 전남의「가고 싶은 섬」가꾸기 등과 연계해 섬별 향토․문화․

역사성을 보유한 다양한 컨셉의 섬숲 경관 마련

* 전남 도서수 : 2,165개(전국 3,355개 대비 65%)

* 방문객 : ’14)270 → ’15)570 → ’16)852 → ’17)1,066천명(295%↑)

Ⅱ		용역개요

❍ 용 역 명 :「서남해안 섬지역 경관숲 조성」기본계획 연구용역

❍ 용역기간 : ’18. 10. ~ ’19. 5. (8개월)

❍ 용 역 비 : 100백만원(도비)

❍ 추진방법 : 공개입찰

❍ 수행내용 : 테마숲 대상지 선정, 수종 및 식재모델 제시, 경제성 분석 등

❍ 예산과목 : 정책)산림소득증대 및 자원화 단위)산림자원 육성 세부)숲속의

전남 아름다운숲 만들기 시행  편성목)연구개발비(207) 통계목)01 연구용역

	<서남해안 섬지역 경관숲 조성계획(안) >
∙ 사업기간 : ’19. ~ ’28.(10개년) ∙ 사 업 비 : 1,000백만원(국비 50050%, 도비 50050%) ∙ 사업내용 : 섬 지역 경관테마숲(40개소) 조성, 한·중·일 평화숲 조성(1개소) ∙ 추진절차 : 기본계획(’18년) → 실시설계·행정절차(’19년) → 조성(’20.~’28년)

Ⅲ		세부 추진계획

과업범위

□ 공간적 범위 : 전남 서남해안권 15개 시군(‘가고싶은 섬’ 연계)

※ 가고싶은 섬 현황(12개)

‣ 여수(낭도, 손죽도) 고흥(연홍도), 강진(가우도), 완도(소안도, 생일도, 여서도),

진도(관매도, 대마도), 보성(장도), 신안(반월·박지도, 기점·소악도)

□ 시간적 범위 : 기준년도 2018년, 목표연도 2028년(10개년)

□ 내용적 범위 : 제반환경 및 현황분석을 통한 대상지 선정, 도입수종 및 식재 모델 제시 등 기본구상 및 타당성 검토

주요과제

□ 서남해안 섬․해수욕장․항구주변 테마 경관숲 조성 기본계획 수립

- 역사․문화․환경 등 종합분석, 단계별 추진전략

- 기재부 및 산림청 대응 경제성 분석 및 재원조달 계획

- 대상지 구체화 및 유형별 식재 모델림(도입수종, 단비표) 제시

□ ‘서남해안 관광휴양벨트’와 ‘가고싶은 섬’ 계획 및 관계 법률 검토를 통한 타당성 검토

□ 국․내외 성공적인 사례지 조사 후 도입 및 관광자원화 방안 검토

추진일정

□ 구상 및 방향설정(’18.10.) → 여건분석 및 착수보고(’18.10.~11.) → 중간보고 및 자문(’18.12.~’19.3.) → 최종 보고(’19. 5.)

Ⅳ		기대효과

□ 지속가능하고 체계적인 섬 가꾸기를 위한 아름다운 경관숲 확충으로 휴식과 힐링의 섬관광 활성화 및 정주권 생활환경 개선 기여

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 연구용역 계약 및 전문가자문 · 보고회 추진  : ’18. 10. ~ ’19. 4.