남도 의병 역사공원 조성

타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진

겨레를 지켜온 남도 의병의 불굴의 충혼을 기리고 역사의 장으로 활용하기 위한『남도 의병 역사공원 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역』추진

□ 필 요 성

○ 의로운 고장이라는 영예에도 불구하고 구국의 대열에 앞장섰던 의병들의 활약상 및 사료 등의 조사·연구는 물론 기념관 부재

○ 우리 고장 의병들의 구국충혼을 기리고 의향 전남의 자긍심 고취와 교육의 장으로 활용

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남도 의병 역사공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 용역기간 : 2019. 3. ~ 8.(6개월)

○ 주요내용

- 의병들의 활약상, 유적·유물 등 실태 및 공원 조성 타당성 조사

- 사업부지 조사·선정, 기본 및 운영계획 수립, 특색 있는 콘텐츠 개발 등

※ 국비 확보를 위한 근거 자료로 활용

○ 용 역 비 : 100백만원(도비)

○ 용역 진행절차

- 용역심의위원회 심의(‘18. 10월) → 예산 확보(’18. 10월) → 계약 체결(‘19. 3월) → 용역 수행(전문가 및 도민의견 수렴)

	≪남도 의병 역사공원 조성 개요≫
◈ 사업기간 : 2020. ∼ 2022.(3개년) ◈ 추정규모 : 부지 33,000㎡, 연면적 10,000㎡ ※ 장소는 도내 일원 - 기념관(지하 1층, 지상 3층) - 야외 체험관 등 테마파크 - 교육문화원(교육시설) - 식당동(1층) ◈ 사 업 비 : 200억원(국비 100, 지방비 100) ◈ 사업내용 : 공원조성, 기념관(사무공간, 수장고, 전시실), 테마파크(체험관, 교육시설), 충혼탑, 식당 등

□ 과업내용

○ 남도 의병 역사공원 조성의 당위성 확보

○ 남도 의병 역사공원 조성 후보지 조사 및 선정

- 입지여건 및 당위성, 환경 분석 등

○ 조성방향 및 계획지표 검토, 시설수요 예측 및 규모 검토

○ 경제적 타당성 분석

○ 전남만의 특색있는 콘텐츠․켄셉 제안, 도입시설 및 프로그램 구상

○ 토지 이용체계 및 공간(기념관, 체험관, 충혼탑, 교육시설, 운영 프로그램 등) 기본구상

○ 역사공원 조성 후 체험, 교육 프로그램 운영 방안 등

□ 추진일정

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립용역          : ’19. 3월 ~ 8월

○ 연구용역 착수보고회 및 자문단 구성․회의 개최 : ’19. 4월

○ 연구용역 중간보고회	개최	: ’19. 6월

○ 연구용역 최종보고회 개최	: ’19. 8월

○ 용역 결과 보고 및 기본계획 수립            : ’19. 10월