「에코 푸른숲 전남」 만들기

숲조성 유형별 매뉴얼 연구용역 추진계획(안)

	(산림보전과)

「숲 조성 유형별 매뉴얼」 연구용역 추진계획(안)

민선 7기 에코 푸른숲 만들기 추진을 위해 누구나 쉽게 이해할 수 있는

숲 조성 모델 마련「숲 조성 유형별 매뉴얼」연구용역 추진

- (사)숲속의전남 현장 정책간담회 지사님 지시사항(’18.9.12.) -

Ⅰ		필 요 성

❍ 경관숲‧마을숲 등 유형별 식재 모델 제시로 도민의 관심과 자발적

참여 확대로 “에코 푸른숲 전남” 만들기 조기 실현

❍ 공간‧디자인‧생태 환경을 고려한 알기쉬운 숲 조성 매뉴얼 마련 으로 완성도 있는 다양한 컨셉의 아름다운 숲 조성

* 주민참여숲 : ’15) 39개소(18억원) → ’16) 85(40) → ’17) 107개소(40) → ’18) 91(40)

Ⅱ		용역개요

❍ 용 역 명 :「숲 조성 유형별 매뉴얼」연구용역

❍ 용역기간 : ’18. 10. ~ ’19. 3. (6개월)

❍ 용 역 비 : 30백만원(도비)      * 정책기획관실 풀 용역비

❍ 추진방법 : 공개입찰

❍ 수행내용 : 경관숲‧마을숲 등 유형별 식재모델 및 단비표 제시

❍ 예산과목

- 부서)정책기획관 정책)도정의 종합기획 및 조정 단위)도정 주요시책 수립

세부사업)도정 주요시책 기획 및 현안사업 추진 편성목)연구개발비

	<주민참여숲 추진현황>
∙ 추진기간 : 2015 ~ 현재 ∙ 추진실적 : 322개소, 138억원(도비 50%, 시군비 50%) ∙ 관리현황 : 숲돌보미 478개 단체, 17천명 ∙ 추진절차 : 사업 공고→주민 제안서 제출→시군협의회 평가(서류․현장)→선정 ※ 추진근거 : 전라남도 나무심기 지원과 관리에 관한 조례(’15.8.)

Ⅲ		세부 추진계획

과업범위

□ 공간적 범위 : 전라남도 일원

□ 시간적 범위 : 기준년도 2018년, 목표연도 2028년(10개년)

□ 내용적 범위 : 누구나 쉽게 숲 조성 지침서로 활용 가능한 유형별 식재모델 및 단비표 제시

주요과제

□ 알기쉽고 사용이 편리한 숲 조성 유형별 식재모델 제시

- 역사․문화․환경 및 문헌조사 등 종합적 조사․분석

- 유형별 식재 모델림(수종, 단비표, 기본도면) 제시

- 유형별 국내외 우수 사례(조성전→조성후) 제시

□ 관계 법률 검토를 통한 대책 및 방향 제시

- 각종 기본계획, 상위계획, 관련계획 및 정책 등 체계적 검토

- 대상지별 도입수종에 대한 예상되는 문제점을 도출하고 대안 제시

□ 국․내외 성공적인 사례지 조사 후 도입 방안 검토

추진일정

□ 구상 및 방향설정(’18. 10.) → 여건분석 및 착수보고(’18. 11.) → 중간보고 및 자문(’19. 1.) → 최종 보고(’19. 3.)

Ⅳ		기대효과

□ 지속가능하고 체계적인 아름다운 경관숲․마을숲 확충으로 휴식과 힐링 기반 마련 및 정주권 생활환경 개선 기여

Ⅴ		향후 추진계획

❍ 연구용역 계약 및 전문가자문·보고회 추진  : ’18. 10. ~ 12.