무안갯벌도립공원 및 신안갯벌도립공원

10년 단위계획 수립 용역

의안 번호

기후생태과

□ 용역의 필요성

□ 공원관리청(전라남도)은 10년마다 도립공원내의 식생, 생태적 가치 등을 조사하여 공원계획의 타당성 검토 및 공원구역 조정, 투자계획 등에 반영

<자연공원법 제15조 제2항>

공원관리청은 10년마다 지역주민, 전문가, 그 밖의 이해관계자의 의견을 수렴하여 공원계획의 타당성 유무를 검토하고 그 결과를 공원계획에 반영 하여야 한다

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 무안갯벌도립공원 및 신안갯벌도립공원 10년 단위계획 수립 용역

※두 개의 공원계획 타당성 검토용역을 추진하여야 하나, 식생 등이 비슷하여 하나의 용역으로 통합 추진하여 예산 절감 및 업무의 효율성을 높이고자 함.

□ 달성목표 : 지속가능한 공원관리를 위해 공원계획의 타당성을 검토하고 미래지향적으로 조정

□ 기간/용역비 : 2019. 1. ~ 2019. 12.(12개월) / 90백만원

□ 주요내용 : 공원계획의 타당성 검토 및 구역 조정(해지 또는 추가 등)

- 이용객 탐방성향, 이용수요 전망, 공원시설 및 투자계획 등 평가

- 식생 및 생태 보전적 가치 조사 분석

- 공원관리의 효율성, 공원경계선의 적정성 등

□ 용역결과 활용계획

□ 도립공원 2개소(무안, 신안)의 공원계획 타당성 검토, 공원구역 조정, 투자계획 등에 반영

무안갯벌도립공원 및 신안갯벌도립공원

10년 단위계획 수립 용역

도내 도립공원(무안, 신안)에 대해 공원계획의 타당성을 검토, 공원구역 조정, 투자계획 등에 반영

□ 필요성

□ 자연공원법 제15조제2항에 따라 10년마다 지역주민, 전문가 이해관계자의 의견을 수렴하여 공원계획의 타당성(공원구역 타당성 포함)을 검토하고 공원계획 변경에 반영(법적 의무사항)

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 무안갯벌도립공원 및 신안갯벌도립공원 10년 단위계획 수립용역

□ 달성목표 : 지속가능한 공원관리를 위해 공원계획의 타당성을 검토하고 미래지향적으로 조정

□ 용 역 비 : 90백만원(도비)

□ 용역기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.(12개월)

□ 용역의 주요내용

〈 연구방향 〉

□ 공원계획의 타당성 검토 및 구역 조정(해지 또는 추가 등)

- 이용객 탐방성향, 이용수요 전망, 공원시설 및 투자계획 등 평가

- 식생 및 생태 보전적 가치 조사 분석

- 공원관리의 효율성, 공원경계선의 적정성 등

〈 연구범위 〉

□ 시간적 범위 : 2019년 ~ 2028년

□ 공간적 범위

1) 무안갯벌 도립공원(37.1㎢)

2) 신안갯벌 도립공원(162.0㎢)

〈 주요과제 〉

□ 도립공원 2개소(무안, 신안)의 공원계획(구역)의 타당성을 검토하여 공원계획 변경

□ 연구분야

- 공원 편입 대상지역의 타당성 평가

- 자원성 및 타당성 평가결과 조정지역 도출

- 공원계획 변경(타당성조사) 보고서 작성

- 생태기반평가 결과 중 전문가 검토가 요구되는 지역에 대해 의견서 작성

□ 전산분야

- 지형도면 고시 및 KLIS(한국토지정보시스템) 등재

- 생태기반평가(GIS 활용)

- 생태기반평가 결과 도출된 공원 대상지역의 자원성 평가(GIS 활용)

- 기초 데이터베이스 정비

□ 유사 용역사례(최근 5년간)

□ 해당없음

□ 용역 추진계획

〈 추진체계 〉

□ 연구기관 선정

- 환경․생태․경관․산림․해양․문화․휴양․안전 분야 등 공원정책 등에 전문적인 지식과 경험이 풍부한 연구기관, 대학 등과 계약을 체결

□ 책임연구원 지정

- 연구진은 원칙적으로 연구용역 기관 소속 연구원을 중심으로 구성

- 다만, 타 연구기관의 전문적인 조력과 공동연구가 필요한 경우 초빙가능

□ 보고회 개최(4회)

- 착수보고회 : PPT 또는 서면보고, 과업착수 30일 이내 보고

- 중간보고회 : 과업착수 후 90일 이내 과업추진상황 중간보고(2회)

- 최종보고회 : 최종보고 제출 30일전 보고

- 공 청 회 : 자연공원법 제13조 및 15조 규정에 따라 시장군수 및 지역주민, 전문가, 이해관계자의 의견 수렴

〈 추진일정 〉

□ 행정절차추진(용역심사, 일상감사 등)	: 2018. 10. ~ 2019. 1.

□ 발주 및 계약	: 2019. 2.

□ 착수 보고회	: 2019. 2.

□ 중간 보고회(2회)	: 2019. 4. ~ 10.

□ 최종 보고회	: 2019. 12.

□ 성과물 납품	: 2019. 12.

□ 활용방안(기대효과)

□ 도립공원을 효율적으로 보전하고 주민의 불편사항을 해결

용역실명제

동부지역본부장	송 경 일(☎ 7100)	기후생태 과 장	김 인 수 (☎ 7010)	자연생태 팀 장	김진선 (☎ 7040)	담당자	정은영 (☎ 7041)

연구용역 원가계산서

(단위 : 원)

비목	구분	금액	구성비	비고
인건비	인건비 소계	50,334,653	55.9%
	책임연구원	11,409,562	12.7%
	연구원	23,329,862	25.9%
	연구보조원	15,595,229	17.3%
	보조원	-
경비	경비 소계	24,441,000	27.2%
	여비	16,716,000	18.6%
	유인물비	1,425,000	1.6%
	전산처리비	1,200,000	1.3%
	국내외 자료조사	2,400,000	2.7%
	회의비	1,500,000	1.7%
	교통통신비	1,200,000	1.3%
일 반 관 리 비 (6% 이내)		3,738,783	4.2%	6%이내
이윤 (9.8% 이내)		3,303,746	3.7%	10%이내
총 원 가 (총원가+VAT)		90,000,000

▣ 단가산출내역표

(단위 :  원)

비목	구분	금액	산출근거	비고
인건비	인건비 계	50,334,653
	책임연구원	11,409,562	․ 3,169,323원×1인×12월×30%
	연구원	23,329,862	․ 2,430,194원×2인×12월×40%
	연구보조원	15,595,229	․ 1,624,503원×2인×12월×40%
경비	경비 계	24,441,000
	여비	16,716,000	․ 책임연구원 : 91,000원×1인×12월×3일 = 3,276,000원 ․ 연 구 원 : 70,000원×2인×12월×4일 =6,720,000원 ․ 연구보조원 : 70,000원×2인×12월×4일 = 6,720,000원
	유인물비	1,425,000	․ 착수보고회 : 50원×30부×50쪽×1회 = 75,000원 ․ 중간보고회 : 50원×30부×100쪽×2회 = 300,000원 ․ 최종보고회 : 50원×30부×200쪽×1회 = 300,000원 ․ 최종요약서 : 50원×50부×100쪽×1회= 250,000원 ․ 최종성과품 : 50원×50부×200쪽×1회 = 500,000원
	전산처리비	1,200,000	․ 전산장비사용료 : 100,000원×12월
	국내외 자료조사	2,400,000	․ 논문등 자료조사 : 200,000원×4명×3회
	회의비	1,500,000	․ 실무 협의회 : 100,000원×5회 ․ 공 청 회 : 200,000원×5회
	교통통신비	1,200,000	․ 우편료, 교통비 등 : 100,000원×12월
일 반 관 리 비		3,738,783	․ 4.2% (인건비+경비)	6%이내
이윤		3,303,746	․ 3.7% (인건비+경비+일반관리비)	10%이내
총 원 가		81,818,182	․ 인건비+경비+일반관리비+이윤
부 가 가 치 세		8,181,818	․ VAT＝10%
총 계		90,000,000