｢이차전지 플랫폼 구축사업｣ 타당성조사 연구용역

의안 번호	2019 -

신성장산업과

□ 용역의 필요성

❍ 이차전지 및 4대 핵심소재 시장 확대*와 차세대 이차전지기술 선점을 통한 新시장 주도 정책에 적극 대응

* Lib전지(억불) : (’13) 201 → (’20) 441 (연평균 12%↑) / 4대 핵심소재(억불) : (’13) 53.2 → (’20) 220.9(연평균 22.6%↑)

❍ 이차전지 플랫폼 구축을 위한 대형 국책사업 발굴 및 전남 유치 타당성 분석

□ 용역개요

□ 용 역 명 : ｢이차전지 플랫폼 구축사업｣ 타당성 조사 연구용역

□ 달성목표 : ｢이차전지 플랫폼 구축｣ 타당성 검토 및 구축(안) 수립

□ 기간/용역비 : ’19. 5. ~ ’20. 2.(10개월) / 300백만원

□ 주요과제

- 비전․목표 및 사업범위 설정,『이차전지 플랫폼』전남 구축 당위성 도출

- 이차전지 핵심 부품·소재 클러스터 구축 계획 수립

‣ 인프라 구축, 개술개발 과제, 산학연 협력 네트워크 구축, 사업화 지원 방안 등

- ｢이차전지 플랫폼｣ 구축을 위한 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구

‣ 입지선정, 인프라 구축안, 중앙부처 추진사업과 연계한 재원조달 방안

‣ 정책적‧기술적 타당성 및 경제성 분석, 예비타당성 조사 요구서 작성 등

□ 용역결과 활용계획

□ 국가 공인 프로젝트로 지정 받기 위한 예비타당성 조사 신청  및 연관 국가기관․기업 유치 전략자료로 활용

<붙임> 사업계획서 1부

｢이차전지 플랫폼 구축｣ 타당성조사 연구용역 계획

전남의 비교우위 여건 활용, 급성장 중인 배터리 산업 선점을 위해 「이차전지 플랫폼 구축사업」 타당성조사 용역 실시

□ 용역의 필요성

❍ 이차전지 및 4대 핵심소재 시장 확대*와 차세대 이차전지기술 선점을 통한 新시장 주도 정책에 적극 대응

* Lib전지(억불) : (’13) 201 → (’20) 441 (연평균 12%↑) / 4대 핵심소재(억불) : (’13) 53.2 → (’20) 220.9(연평균 22.6%↑)

❍ 이차전지 플랫폼 구축을 위한 대형 국책사업 발굴 및 전남 유치 타당성 분석

□ 용역개요

□ 용 역 명 : ｢이차전지 플랫폼 구축사업｣ 타당성 조사 연구용역

□ 달성목표 : ｢이차전지 플랫폼 구축｣ 타당성 검토 및 구축(안) 수립

□ 용역기간 : ’19. 5. ~ ’20. 2.(10개월)

□ 용 역 비 : 300백만원(도비)  * ’19년 1회 추경 편성요구

□ 용역의 주요내용

〈 연구방향 〉

❍ (이차전지 생태계 조성) 소재·부품 R&D, 제품생산, 인력양성, 수요연계 등 ‘밸류체인 구축’을 통해 ｢전남의 미래 먹거리 산업｣ 육성

❍ (이차전지 기술혁신 주도) 소재·부품연구를 통해 ‘이차전지 성능혁신’과 ‘차세대이차전지 상용화’로 ｢산업주도권｣ 확보

□ (에너지산업의 메카) 이차전지 소재·부품산업을 중심으로 ｢일자리 창출 → 이차전지 후방산업 육성 → 이차전지 경쟁력 강화｣ 추진

〈 연구범위 〉

□ 공간적 범위 : 전남도내 일원

□ 시간적 범위 : ’20 ~ ’24.(5년간)   * 분야별 로드맵 수립

□ 내용적 범위 : ｢이차전지 플랫폼｣ 전남 구축 타당성 검토 및 구축 계획 수립

〈 주요과제 〉

❍ 국내외 이차전지 산업 현황과 당면과제 분석

- 이차전지와 소재·부품 시장 동향 및 전망

- 이차전지 산업 육성 필요성 및 전남유치 논리 개발

❍ 이차전지 핵심 소재·부품 산업육성 기반구축 방안

- (인프라 구축) 전문연구소 유치, 차세대 이차전지 소재개발과 제품생산 공정기술 개발을 위한 제조 분석 장비 구축

- (기술개발 및 실증) 혁신소재·부품 개발, 제조 프로세스 효율화 기술 개발 및 실증, 중·장기 R&D 로드맵 수립

- (기업 클러스터 구축 및 인력양성) 관련기업 유치 및 R&D 기업 클러스터 구축 방안, 산·학․연 협력 네트워크 구축, 전문 인력 양성 등

- (사업화 지원) 소재·부품 시험분석, 이차전지 시제품 제작, 기술 마케팅 지원 등

❍ 국가사업 반영에 필요한 기본계획 수립 및 타당성 조사

- 산업육성기반 구축안, 연관산업 활성화를 위한 국가지원사업 계획 수립

- 중앙부처 정책, 추진 사업 등과 연계한 구체적인 재원조달 방안 제시

- 정책적·기술적 타당성 및 경제성 분석 등

□ 유사 용역사례(최근 5년간) : “해당사항 없음”

□ 용역 추진계획

〈 도민 의견수렴 〉

□ 기  간 : '19. 3. 15. ~ 4. 3.

□ 장  소 : 전남도 홈페이지(정책연구용역 게시판)

□ 도민의견 사항 : 의견 없음

〈 추진체계 〉 : ｢기획자문위원회｣ 구성

□ 사업추진 기획자문위원회 구성 및 정책 자문단 위촉·운영

□ 내실있는 용역추진을 위한 단계별 보고회 개최

- (착수보고) 과업에 대한 추진방향, 추진방법 등 의견 수렴

- (중간보고) 과업 추진사항 중간보고 및 의견 수렴

- (최종보고) 중간 보고회 및 수시보고 시 지적사항 보완 최종 보고

〈 추진일정 〉

용역 발주		ㆍ 용역 발주 및 계약		'19. 4.~5.
｢이차전지 플랫폼｣ 구축 타당성 조사서 작성		ㆍ 착수보고회 개최('19. 5월) ㆍ 중간보고회 개최('19. 7월, 9월)		'19. 5.~11.
결과보고서 제출		ㆍ 최종보고회 개최(11월), 예타 요구서 작성, 결과보고서 제출		'19. 11.
예타신청 및 국고확보를 위한 중앙부처 협의		ㆍ 예타신청(’19. 4분기) 및 국고반영을 위한 관계부처 업무협의		'19.11. ~ '20. 2.

□ 활용방안

□ 국가 공인 프로젝트로 지정 받기 위한 예비타당성 조사 요구서 제출자료 활용

□ 용역을 통해 도출된 단위사업은 국고 확보 및 연관 국가기관․기업 유치 전략자료로 활용

(참고자료) 전문가 의견서

용역실명제

경제에너지 국장	안 상 현 (☎ 3801)	신성장산업 과 장	김종갑 (☎ 3910)	미래전략 팀 장	조재웅 (☎ 3920)	담당자	나혜란 (☎ 3921)

연구용역 원가계산서

(단위 : 원)

비목	구분	금액	구성비(%)	비고
인건비	인건비 소계	185,475,606	68.00
	책임연구원	25,734,904	9.43
	연구원	73,999,410	27.13
	연구보조원	85,741,292	31.43
	보조원	-	-
경비	경비소계	53,600,000	21.04
	여비	22,800,000	8.36
	유인물비	3,500,000	1.28
	전산처리비	3,000,000	1.10
	회의비	23,500,000	8.61
	교통통신비	800,000	0.29
일 반 관 리 비 (5% 이내)		11,953,780	4.38
이윤 (10% 이내)		21,697,887	6.95
총 원 가		272,727,273	100.00	※연구용역비 (총원가+VAT)

▣ 단가산출내역표	(단위 :  원)

비목	구분	금액	산출근거	비고
인건비	인건비 소계	185,475,606
	책임연구원	25,734,904	․ 6,433,726원×1인×10개월×40%=25,734,904원
	연구원	73,999,410	․ 4,933,294원×3인×10개월×50%=73,999,410원
	연구보조원	85,741,292	․ 3,297,742원×4인×10개월×65%=85,741,292원
	보조원	-
경비	경비 소계	53,600,000
	여비	22,800,000	․ 책임연구원 80,000원×1인×4회×10개월=3,200,000원 ․ 연구원 등 70,000원×7인×4회×10개월=19,600,000원
	유인물비	3,500,000	․ 착수/중간/최종보고서 : 10,000원×50부×3회=1,500,000원 ․ 요약보고서 10,000원×50부= 500,000원 ․ 최종성과품 30,000원×50부=1,500,000원
	전산처리비	3,000,000	․ 전산처리비 300,000원×10개월=3,000,000원
	시약·연구용 재료비	-
	회의비	23,500,000	․ 보고회․자문회의 1,500,000원×5회=7,500,000원 ․ 세미나 개최 2,000,000원×2회= 4,000,000원 ․ 전문가수당 200,000원×8인×3회= 6,000,000원 ․ 원고료 200,000원×8인×3회= 6,000,000원
	임차료	-
	교통통신비	800,000	․ 교통통신비 10,000원×8인×10개월=900,000원
	감가상각비	-
일 반 관 리 비		12,083,554	․ (인건비+경비)×일반관리비율(4.4%)	6%이내
이윤		18,972,629	․ (인건비+경비+일반관리비)×이윤율(6.95%)	10%이내
총 원 가		272,727,273
부 가 가 치 세		27,272,727		10%
총 계		300,000,000		연구용역비