담양 일반산업단지 조성사업 추진현황

우리도 중부 대도시권 신산업 거점단지 조성을 위해 추진 중인 담양일반산업단지 조성사업 추진현황임

□ 사업개요

○ 위    치 : 전남 담양군 담양읍 삼만리, 금성면 원천리 일원

○ 면적/사업비 : 588,000㎡ / 538억원(민자)

○ 사업기간 : 2012 ~ 2015년

○ 시 행 자 : 담양그린개발(주)  ※ 자본금 100백만원

- 담양군 20, 현대엠코 24.9, 해동건설 6, 한국투자증권 19, 하나다올신탁 5, 위더스PMD 25.1

□ 추진실적 및 계획

○ 민간사업자 공모 및 선정(우선협상대상자 : 현대엠코(주))      : ‘12. 10. 16

○ 특수목적법인 설립 및 출자타당성 군의회 승인   : ‘12. 12. 21

○ 2013년 산단 공급계획 반영(국토해양부)          : ‘12. 12. 28

○ 산업단지계획 승인 신청(시행자 → 도)            : ‘13. 3. 29

○ 산단개발 SPC 설립(담양그린개발)                : ‘13. 7. 1

○ 산업단지계획 승인 관계기관 협의         : ‘13. 5. ~ ’13. 10.

○ 산업단지계획심의위원회 심의 의결              : ‘13. 10. 29

- 의결조건 : 진입도로와 공장용지 구배조정, 환경피해방지대책 수립 등

○ 산업단지계획 승인 고시                        : ‘13. 11. 28

□ 앞으로 추진계획

○ 토지보상 및 공사 착공                             : ‘13. 12월

□ 토지이용계획

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		580,507	100.00
	산 업 시 설 용 지	333,607	57.5
	지 원 시 설 용지	16,151	2.8
	연 구 센 터	1,420	0.2
	지 원 시 설	13,731	2.4
	재 활 용 시 설	1,000	0.2
	공 공 시 설 용 지	135,567	23.3
	도 로	90,654	15.6
	주 차 장	5,286	0.9	◦3개소
	보 행 자 도 로	852	0.1
	하 천	17,742	3.0
	유 수 지	16,554	2.9	◦5개소
	수 도 시 설	1,589	0.3	◦1개소
	폐 수 처 리 장	2,890	0.5	◦1개소
	녹 지 용 지	95,182	16.4
	공 원	18,597	3.2
	녹 지	76,585	13.2